20000조경공사

20010 조경공사 일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 장은 건축공사에 부대되는 조경공사 일반에 적용한다.

나. 조경기반 조성공사(토공, 배수 등)와 포장, 관수, 식재 및 각종 조경시설, 구조물 설치공사, 조경석공사는 물론 건축물에 부속되는 옥상조경, 실내조경, 생태복원 등을 포함한다.

다. 특수 놀이 및 운동시설, 조경유지관리공사는 제외하되, 필요한 경우 조경공사표준시방서의 관련조항을 적용한다.

1.2 적용규준

가. 공사수행에 있어서 적용규준은 설계도서에 따르되 설계도서에 규정되어 있지 않은 사항은 동등 이상의 국제규격 또는 건설기술관리법규 제34조(설계 및 시공기준)의 규정에 의한 건설공사설계기준, 건설공사시공기준 및 표준시방서, 그리고 산업표준화법규 제12조(한국산업표준) 규정의 한국산업표준에 의한다.

나. 설계도서에 완전하게 규정되어 있지 않은 자재나 설비 등을 공사에 사용하고자 하는 경우에는 국제적으로 공인받고 있는 표준이나 기준 또는 한국산업표준에 적합하거나 유사한 공사에서 사용한 예가 있는 것으로 하되 담당원의 승인을 받아야 한다.

다. 공사용 자재 및 재료로써 환경기술개발 및 지원에 관한 법률에 따라 환경표지(환경마크)의 사용인증을 받은 자재 또는 재료가 있는 경우 동 자재 및 재료를 우선 사용한다.

1.3 현장시공조건

가. 건축, 토목 등의 선행공사로부터 연결되어 조경공사가 시행되는 경우의 공사현장 인도 및 인수는 선행공사로 인한 제반 공사장애요인이 완전히 정리된 조건으로 한다.

나. 식재지역에 선행공사에 의한 쓰레기 및 모르타르, 벽돌, 블록 등 공사 관련 폐자재 등의 식재부적합토가 매립된 경우에는 반드시 식재용토로 교체한 후 식재하여야 하며 이에 대한 비용은 원인 행위자 부담으로 별도로 정산되어야 한다.

1.4 공사 상호간의 협력

가. 타 공사와 동시에 진행되어야 할 필요가 있는 경우에는 선후공종에 하자나 공정상의 지연이 생기지 않도록 하여야 한다.

나. 수급인은 당해 공사와 연계되어 분리 발주된 모든 공사 수급인과의 상호마찰을 방지하고 전체공사가 계획대로 완성될 수 있도록 공사의 선후 또는 병행시행, 공사착수시기, 공사 진행속도, 공사범위, 공사 준비, 공사물 보호 및 가설시설 등에 대하여 협의하여야 하며, 협의과정에서 도출된 사항에 대하여는 발주자에게 설계변경을 요청할 수 있다.

다. 토목공사가 시행되는 포장구역 안에 설치되는 조경시설은 토목공사 책임자와 협의하여 주위가 미려하게 마감될 수 있도록 한다.

1.5 공사사진

공종에 따른 사진촬영 대상 부위는 표 20010.1과 같으며, 기타 공사의 품질 확인 또는 공사의 변경을 요하는 경우 이를 포함한다.

표 20010.1  공종에 따른 사진촬영 내용

공사의 종류	시 점	번호 수정 내용
조경구조물공사	터파기 후	매설심도 및 바닥상태
	철근조립 후	조립상태
	거푸집 제거 후	규격 및 마감상태
배관, 관수, 수경시설공사	배관 완료 후	매설심도 및 배관상태
조경포장공사	원지반 다짐 후	평탄성
	표층다짐 및 포설 후	다짐두께 및 평탄성
놀이터, 운동장조성공사	바닥정지 후	정지상태 및 모래포설, 마사토 다짐 두께
식재공사	식재면 고르기 후	면고르기 상태
	식재·잔디 시공 후	식재, 잔디 시공처리상태

1.6 공사기간

1.6.1 일 반

가. 시공 후 잔류침하에 의한 후속 공사물의 파손 위험이 예상되는 경우에는 잔류침하가 허용범위 내에 도달할 때까지의 기간을 감안하여 충분한 공사기간을 설정해야 한다.

나. 연결 및 중복공사로 인하여 공사의 원활한 진행에 문제가 있다고 판단되는 경우에는 수급인은 발주자와 협의하여 공사기간을 조정할 수 있다.

1.6.2 공사기간 확보

가. 부적기 식재, 천재지변 등 공사의 지연이 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 공사기간을 연장할 수 있다.

나. 식재공사 기한이 부적기에 해당되는 경우, 식재공사 기한은 식재 적기 완료일 후로부터의 기간만큼 차기의 식재적기로 이월한다. 단 식재공사 기한이 식재적기 완료일 후로부터 10일 이내일 경우 또는 지역별 기후 및 현장여건을 감안하여 계속 시공이 가능할 경우에는 하자발생 예방을 위한 양생 및 보호조치 등을 하여 담당원의 승인을 받고 계속 공사하여 준공처리할 수 있다.

다. 이월된 식재공사는 이월공사기간에도 불구하고 식재적기 개시일로부터 최소 15일 이상의 공사기간이 확보되어야 하며, 최소 공사기간은 공사종류와 규모에 따라 차이가 있으므로 담당원과 협의하여 결정한다.

라. 식재공사 기한이 차기의 식재적기로 이월되더라도 식재공사를 제외한 타 공사의 공사기한은 이월되지 않는다. 단 관련공사(건축, 토목 등)의 공사기한이 동절기 물공사 중 단기간 등에 해당될 경우에 한하여 시설물 및 기타공사의 공사기한도 식재공사와 같이 이월된다.

1.7 기상조건

1.7.1 흙공사

가. 흙이 동결되어 있을 경우에는 흙쌓기, 되메우기, 관의 매설작업을 중지한다.

나. 기존 지반, 진행중인 공사 또는 완성된 공사에 손상을 주거나 해로울 수 있는 일기조건 중에는 터파기 작업을 해서는 안 된다.

다. 강우, 과습 또는 이상건조 시에는 작업시행 여부를 담당원과 협의한다.

라. 강우 등으로 인하여 흙다짐 최적함수율보다 과습할 경우에는 되메우기 작업을 중지한다.

1.7.2 콘크리트 공사

가. 콘크리트 및 모르타르 공사는 일평균기온 4℃ 이상에서 시행하여야 하며, 불가피하게 공사를 수행해야 할 경우에는 담당원의 승인을 받아 필요한 보온조치를 하여야 한다.

나. 외기의 최고온도가 30℃를 초과하면 콘크리트를 냉각시킬 수 있는 방법에 대하여 담당원과 상의하여야 하며, 외기의 온도가 0℃ 이하로 내려가거나 콘크리트를 치는 동안 0℃ 이하로 내려갈 것으로 예상되는 경우에는 보온조치에 대하여 담당원과 상의하여야 한다.

1.7.3 식재공사

가. 식재공사는 해당 공사지역의 식재적기를 감안하여 정한다.

나. 적기 식재에도 불구하고 기온이 2℃ 미만 32℃ 이상, 평균풍속 48 km/h를 초과하는 경우에는 공사를 중지하여야 한다.

다. 강우 시 또는 이상기후일 경우, 담당원이 승인한 경우가 아니라면 식재작업을 해서는 안 된다.

1.8 전문기술자

수급인은 건설산업기본법규 제40조 제1항의 규정에 따라 공사시행에 필요한 전문지식과 경험이 있는 책임기술자를 현장에 배치하여야 한다.

1.9 환경관리 및 친환경시공

1.9.1 일반사항

가. 환경에 관한 법규를 준수하고 건축물의 전과정(생애주기) 관점에서 조경공사 단계에서 의도하는 환경관리 및 친환경시공의 목표가 달성되도록 재료 및 시공의 사양을 정한다.

나. 이 절은 조경공사에 있어서 환경관리 및 친환경시공을 실시하는 경우에 적용하며 이 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01045(환경관리 및 친환경시공)에 따른다.

1.9.2 재료선정

가. 환경마크, 탄소마크, 환경성적표지 등 공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

나. 조경공사의 자재는 전과정에 걸쳐 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 적은 것을 우선적으로 선정한다.

다. 각종 수목 및 조경재료, 그리고 조경공사에 필요한 가설자재 등은 현장 인근에서 생산되어 운송과 관련한 환경영향이 적은 것의 우선 선정을 고려한다.

라. 조경공사에 사용될 수목 등의 자재는 현장의 기존 수목 중 생존 가능성이 높은 것들을 골라 선정한다.

마. 조경공사에 사용되는 재료는 순환자원의 사용을 적극적으로 고려한다.

바. 적절한 구매계획을 수립하여 잉여 자재가 발생하지 않도록 하고, 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 것을 우선적으로 사용한다.

1.9.3 시공방법 선정

가. 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경 공법의 사용을 고려한다.

나. 천연자원의 보전에 도움이 되는 공법, 폐기물 배출을 최소화하는 공법을 사용한다.

다. 공사용 장비 및 각종 기계·기구는 에너지 효율 등급이 높고 배출 등에 의한 환경영향이 적은 것을 우선적으로 사용한다.

라. 공사용 용수는 사용량을 측정하여 환경관리계획에 포함될 수 있도록 하고, 공사의 품질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 우수 및 중수를 적극적으로 활용한다.

마. 공사에 따르는 소음, 진동 등의 억제에 도움이 되는 건설장비, 기계·기구를 우선적으로 이용하고 작업 장소 또는 작업시간을 충분히 고려하여 공사현장의 주변지역 환경 및 작업환경의 보전에 노력한다.

바. 공사장에서 발생하는 폐기물, 분진, 오수 및 배수 등이 공사장과 공사장 인근의 대기, 토양 및 수질을 오염시키지 않도록 적절히 계획하고 조치하여야 한다.

사. 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선적으로 사용하고, 부득이하게 발생한 폐기물 및 이용할 수 없게 된 재료의 재자원화를 고려한다.

아. 반출, 폐기 및 소각되는 경우에는 이에 따른 처분 및 운송에 의한 환경영향을 최소화할 수 있도록 고려한다.

자. 강우에 의한 토사유출로 환경피해가 발생하지 않도록 방지시설을 설치한다.

차. 공사차량 운행 시 먼지발생 등의 폐해를 억제하기 위한 제반 시설(세륜시설 등)을 설치하고 필요한 조치를 취한다.

카. 시멘트 가루, 콘크리트 잔재물 등 수목생육에 유해한 물질이 인근의 식재지로 유입되지 않도록 하여야 한다.

하. 가로수 등의 포장지역 식재에는 작업 도중 발생하는 토사로 도로 등이 더럽혀지지 않도록 한다.

2. 자 재

해당 사항 없음

3. 시 공

해당 사항 없음

20015 부지조성공사

1. 일반사항

1.1 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 하며, 특별히 명시하지 않은 경우의 제출 시기는 해당 공사 착공 전으로 한다.

1.1.1 현황관련 자료

가. 흙의 반입 및 반출에 앞서 지정된 취토장 및 사토장의 지형자료를 제출한다.

나. 표토채집은 분포현황을 사전에 조사하고 별도의 채집 및 보관 계획서를 담당원에게 제출하여 승인받는다.

다. 시공에 앞서 수급인은 공사지역의 지하매설물 및 지장물을 조사하고, 이의 조치계획을 작성하여 제출한다.

라. 공사의 지형 변경으로 인한 토사붕괴 등의 위험을 점검하고, 대책을 수립한 보고서를 제출한다.

1.1.2 시험 및 분석자료

가. 공사에 사용될 반입 토사는 현장 반입 전에 공인된 기관의 토질시험서를 제출한다.

나. 공사지역 원지반 토양상태의 사전조사 분석 자료를 제출한다.

1.1.3 시공도

굴착 및 절성토, 원지반, 제안된 등고선 등이 표시된 세부시공도를 제출한다.

1.2 참조 표준

자생식물 및 산림유전자원 보호림 관리요령

1.3 사전검사

수급인은 이 공사와 관련된 다음 사항의 확인 및 검사에 대한 담당원의 지시를 이행하여야 한다.

1.4 운반, 저장 및 취급

수급인은 토석의 운반, 저장, 취급 시 다음의 사항을 준수하여야 한다.

가. 도로를 오염시키거나 먼지가 날리지 않도록 하여야 한다.

나. 과적으로 인하여 운반 시 적재함에서 떨어지지 않도록 하여야 한다.

다. 비나 눈에 젖어 과다한 수분이 함유되지 않도록 조치하여야 한다.

라. 오물이나 기타 재료가 혼입되지 않도록 하여야 한다.

1.5 측 정

가. 수량산출은 다짐상태의 시공기준면을 기준으로 한다.

나. 연약지반 등 침하된 흙쌓기 양은 침하된 부분을 실제수량으로 산정한다.

다. 굴취작업은 토사 채취 후 지정된 장소까지 운반하여 흙쌓기 또는 가적치 작업이 완료된 상태를 기준으로 한다.

라. 흙쌓기 작업은 운반된 토사를 지정된 높이, 두께 및 경사로 포설하고 다짐이 완료된 상태를 기준으로 한다.

마. 땅깎기면 고르기는 흙깎기 표면이 그대로 남아 있는 상태의 표면적으로 산정한다.

바. 잔토처리는 땅깎기 수량과 사용된 흙의 환산적용수량과의 차이를 나타낸다.

1.6 시공허용 오차

가. 표토층을 제외한 흙쌓기, 깔기, 메우기 마무리면의 시공허용차는 ±50 mm 이내로 한다.

나. 매 10 m마다 표고를 측정하며, 10 m 이내에 지형의 변화가 있을 때는 지형 변화점을 추가하여 측정한다.

2. 자 재

2.1 반입토양

가. 반입토양은 계약도서에 지정된 장소에서 채취하여야 하며, 계약도서에 채취장소가 명시되지 않아 수급인이 선정하는 경우에는 사전에 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 점토덩어리나 유해한 유기물, 쓰레기 등을 포함하지 않은 것이어야 한다.

다. 특별히 지정하지 않은 경우, 75 ㎛ 통과량 25% 이하, 포함된 자갈의 최대치수 25 mm 미만의 토양이어야 한다.

2.2 토질시험

토질시험은 계약도서에 지시되어 있는 경우가 아니면 담당원이 특별히 필요하다고 인정한 경우에만 실시한다.

2.3 표 토

식물에 있어서 기반이 되는 표토는 토양학 분류에 의한 O층과 A층을 포함하는 표층토양으로 토양산도(pH) 5.6∼7.4 범위이어야 한다.

3. 시 공

3.1 기존 식생보호

3.1.1 기본사항

가. 계약도서에 명시된 수목과 식생은 손상되지 않게 보호조치하여야 한다.

나. 기존 식생을 보호하는 곳에는 주위에 차량의 출입을 통제하고, 자재나 흙 등을 쌓아두지 않아야 한다.

다. 보호되고 있는 식생은 공사기간 중 건강한 상태를 유지하도록 관리하여야 한다.

3.1.2 기존수목 주변의 흙쌓기

가. 수목의 뿌리가 기존의 위치 이상으로 묻히지 않도록 하고, 돋우는 흙은 배수가 양호한 사질양토를 사용하여야 한다.

나. 부득이 기존 수목의 줄기가 묻힐 만큼 흙쌓기를 많이 해야 하는 경우에는, 수관폭의 1/2∼3/4을 여유공간으로 남겨두고 그 주위를 굵은 자갈 등으로 채워 공기, 수분, 양분 등의 공급이 원활하도록 조치해야 한다.

다. 수목 주위의 흙쌓기한 부분은 경사면 또는 석축 등을 설치하고, 필요한 배수시설을 하여야 한다.

3.1.3 기존 수목 주변의 땅깎기

가. 뿌리의 손상을 최소화하기 위하여 수관폭 이내의 지반은 땅깎기하지 말아야 하며, 뿌리가 노출되어 건조하지 않도록 흙이나 물에 적신 거적 등으로 덮어 보양해 주어야 한다.

나. 땅깎기로 인한 지하수위 변화로 수목이 고사 혹은 쇠약해지지 않도록, 땅깎기 높이는 1.5 mm 이내를 원칙으로 한다.

3.1.4 보호수

보호수는 산림청 예규 자생식물 및 산림유전자원 보호림 관리요령에 따라 보호 및 관리하여야 한다.

3.2 표토 모으기 및 보관

3.2.1 표토 모으기

가. 표토 모으기의 깊이는 200∼600 mm 범위로 하되 현장여건에 따라 담당원과 협의하여 조정할 수 있다.

나. 장해가 되는 수목이나 구조물 등을 미리 제거하고, 큰 돌이나 나무뿌리 등의 잔재물을 남김없이 치운 후에 표토 모으기를 시행하여야 한다.

다. 중기작업 중 눌림에 의해 토질이 변질되지 않도록, 채취, 운반, 적치 등의 적절한 작업순서를 정해 시행하여야 한다.

3.2.2 보 관

가. 가적치의 두께는 1.5 m를 기준으로 하며 최대 3 m를 초과할 수 없다.

나. 표토의 토성변화, 비산, 유출 및 양분의 유실을 방지하기 위해 가적치 기간 중에는 식물 또는 비닐 등으로 피복하여 보관하여야 한다.

3.3 가배수

가. 필요한 경우에는 충분한 배수능력을 갖춘 가배수시설을 설치한다.

나. 가배수처리는 주위의 상황과 기존 수로를 사전에 조사하고, 필요한 경우 관련 토지 및 시설 관리자의 허가를 받아 시행한다.

다. 시공 중에는 강우, 용수, 누수 등에 의한 체수현상이 발생하지 않도록 시공면을 상시 정리하여야 한다.

3.4 흙쌓기

가. 가장 낮은 곳부터 각 층을 수평으로 다져가면서 소정의 높이까지 쌓아 올려 각층마다 충분히 다지고 마무리해야 하며, 다짐의 정도가 필요할 때에는 시험에 의하여 정한다.

나. 흙쌓기 지반의 활동이 우려되는 경우 수급인은 지반을 안정시키기 위한 적절한 대책을 구상하여 담당원과 협의 및 시행한다.

다. 흙쌓기 작업 중 침하 등의 현상이 발생하였을 경우에는 신속히 담당원과 협의하여야 한다.

라.  흙쌓기 면은 적정한 기울기를 유지하고 충분한 지지력을 가지도록 마무리하여야 한다.

3.5 터파기

가. 구조물의 축조나 시설물의 설치에 지장이 없도록 소정의 깊이와 폭으로 굴착한 다음, 바닥을 고르고 담당원의 검사를 받아야 한다.

나. 빗물이나 고인 물, 솟아나는 물, 외부로부터의 유입수 등은 적절한 방법으로 물막이하여 배수처리 하여야 한다.

다. 수도관, 가스관, 전기배관 등이 손상되지 않도록 주의하고, 출토물이 나올 경우에는 작업을 중단하고 담당원에게 보고하여 그 지시에 따른다.

3.6 되메우기

가. 양질의 토사를 사용하여 되메우기하고 충분히 다짐하되, 동결된 지반에 시공하거나 동결된 재료를 사용하여서는 안 된다.

나. 되메우기 및 다짐을 할 때 구조물에 손상이 가지 않도록 주의하고, 되메우기한 뒤에 침하가 예상되는 경우에는 더 쌓기를 한 후 다져야 한다.

3.7 잔토처리

가. 산재된 소규모 개별 시설물의 잔토는 조성되는 대지의 형상에 큰 영향을 미치지 않는 범위 안에서 현장 안에 소운반하여 고르게 깔고, 자갈류는 특별히 규정한 경우가 아니면 부지 안에 매립한다.

나. 현장 안에 깔고 고르기 곤란할 정도로 다량의 잔토가 발생한 경우에는 이를 총괄적으로 집계하여 성토재 등으로 유용하거나 장외로 반출하여야 한다.

3.8 흙깎기

가. 흙깎기는 상부에서부터 시행하는 것을 원칙으로 한다.

나. 흙깎기 중 토질의 현저한 변화 또는 매설물을 발견한 경우에는 즉시 담당원에게 보고하고 지시를 받아야 한다.

다. 흙깎기 시공 중 붕괴나 사태 등이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 신속히 담당원에게 보고 및 협의하여야 한다.

라. 계획지반의 토질 등에서 소정의 지지력이나 균질성을 얻을 수 없다고 판단되는 경우에는 담당원과 협의하여야 한다.

3.9 마운딩 조성

가. 마운딩 조성에 사용하는 토양은 식물생육에 지장이 없는 양토 또는 사질양토를 활용하여야 한다.

나. 마운딩은 우수의 흐름이 정체되지 않고 배수계통으로 출수되도록 시공하여야 한다.

3.10 고르기 및 다짐

가. 계획고에 맞도록 평평하게 고르고, 표면에 잡초뿌리나 자갈 등이 없도록 마무리해야 한다.

나. 계약도서에 지정된 다짐기계를 사용하여 식물생육에 적합한 다짐밀도가 얻어질 때까지 다져야 한다.

20020 배수공사

1. 일반사항

1.1 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 하며, 특별히 명시하지 않은 경우의 제출 시기는 해당 공사 착공 전으로 한다.

1.1.1 현황관련 자료

공사시행 전에 현장여건을 점검하고, 관로매설 방향의 측량자료를 제출한다.

1.1.2 인·허가 자료

배수관 배관과 관련하여 도로굴착이 필요한 경우 굴착허가서류를 제출한다.

1.1.3 제품관련 자료

가. 공사에 사용될 자재에 대한 제품자료 및 제작자의 설치지침서

나. 프리캐스트 콘크리트 제품 또는 기성품인 경우, 각각 1경간씩의 제품견본

1.1.4 시험 및 분석자료

지하배수를 하는 곳에서는 토양의 투수계수를 측정하여 성과표를 제출한다.

1.1.5 시공도

배수시설물의 연결 부위에 대한 시공상세도

1.2 사전검사

수급인은 이 공사와 관련된 다음 사항의 확인 및 검사에 대한 담당원의 지시를 이행하여야 한다.

1.3 운반, 저장 및 취급

수급인은 공사용 기자재의 운반, 저장, 취급 시 다음의 사항을 준수하여야 한다.

가. 모든 자재는 운반도중 충격에 의한 파손이 일어나지 않도록 유의하여야 한다.

나. 각종 배관용 자재는 빗물에 젖거나 오물에 의해 더럽혀지지 않도록 조치하여야 한다.

다. 플라스틱용 접착제는 제조업자의 저장요건에 맞추어 서늘한 곳에 저장한다.

1.4 측 정

가. 관매설공사는 되메우기와 공사의 뒷정리가 끝난 상태에서 접합 부위의 누수 여부를 확인하고, 담당원의 승인을 받았을 때를 기준으로 한다.

나. 측구는 인접시설과의 접합과 배수기능에 이상이 없음을 담당원이 승인하였을 때를 기준으로 한다.

다. 물받이공사는 연결되는 관과의 접합과 배수기능에 이상이 없으며, 물받이 뚜껑의 높이가 적당하다고 담당원에 의해 인정된 때를 기준으로 한다.

1.5 시공허용 오차

가. 관의 경사는 3 m당 ±3 mm 이내의 시공허용차 범위를 기준으로 한다.

나. 포장면과 접속되는 배수구조물의 포장면과의 단차는 ±3 mm 이내의 기준으로 한다.

2. 자 재

2.1 콘크리트 제품

U형 측구, L형 측구, 맨홀, 측구덮개 등의 콘크리트 제품은 현장치기 또는 한국산업표준에 적합한 프리캐스트 콘크리트 제품으로 설계도서에 명시된 규격이어야 한다.

2.2 측구 및 물받이 덮개용 스틸 그레이팅

용융아연도금 처리된 제품 또는 주물제품으로서 한국산업표준에 적합해야 한다.

2.3 플라스틱 제품

기성제품으로 한국산업표준에 적합하고 설계도서에 명시된 규격이어야 한다.

2.4 유공관

가. 보통 PVC관이나 PE관, HDPE관 등 한국산업표준제품이어야 한다.

나. 기타 유공관은 투수구멍의 연면적이 표면 연면적의 20% 이상이어야 하며, 토사유입을 방지하기 위해 투수구멍의 일부를 막은 제품을 사용할 때는 막힌 부분이 위로 향하도록 하여야 한다.

2.5 콘크리트관

한국산업표준에 적합한 배수관을 사용하여야 한다.

2.6 배수용 골재

배수용 골재는 최대치수 50 mm 이하의 자갈 또는 쇄석으로 하며, 5 mm체 통과분이 5% 이하이어야 한다.

2.7 배수판

인공지반용 배수판은 담당원의 승인을 받아 사용하여야 한다.

3. 시 공

3.1 표면배수

3.1.1 표면배수공사

가. 설계도서에 명시된 기울기에 따라야 하며, 집수정의 상단이나 측구의 집수지점은 주변의 포장이나 구조물과 자연스러운 기울기로 연결되어야 한다.

나. 식재지역 및 구조물쪽으로 역경사가 되어서는 안 되며, 식재지역에 타 지역의 유수가 유입되지 않도록 처리하여야 한다.

3.1.2 측구공사

가. 측구는 설계도서에 명시된 대로 설치하여야 하며, 부득이한 경우는 담당원과 협의하여 지시에 따른다.

나. 측구의 바닥면은 일정한 기울기로 표면이 평활하게 시공하여야 한다.

다. 측구는 하류쪽 혹은 낮은 곳에서부터 설치·시공하며, 연결부위에서 단차가 발생하지 않고 누수되지 않도록 시공하여야 한다.

라. 연약지반이 나타난 경우에는 시공 전에 담당원과 시공방법에 대하여 협의하여야 한다.

마. 측구 뚜껑은 측구 본체 및 노면과 단차가 생기지 않도록 평탄하게 설치·시공하여야 한다.

3.1.3 관매설공사

가. 관은 설계도서에 명시된 대로 설치·시공하여야 하며, 부득이한 경우는 담당원과 협의하여 지시에 따른다.

나. 따로 명시되지 않은 경우, 관의 매설을 위한 터파기는 바닥면을 관의 바깥 직경보다 300 mm 이상 넓게 파고, 수직 터파기로 하여야 한다.

다. 소켓이 붙어 있는 관은 소켓이 상류쪽을 향하도록 설치해야 한다.

라. 관의 바닥면은 일정한 기울기를 유지하고, 기초와 밀착시켜 직선으로 설치·시공하여야 한다.

마. 관의 연결부위는 단차가 발생하지 않아야 하며, 누수되지 않도록 시공한다.

바. 관의 일부를 절단하여야 할 경우에는 사용부분이 손상되지 않도록 주의하고, 사용부분이 손상된 경우에는 수급인의 책임과 비용부담으로 교체하여야 한다.

사. 연약지반이 나타난 경우에는 시공 전에 담당원과 시공방법에 대하여 협의한다.

아. 되메우기는 다짐 최적함수비에 가까운 토양수분상태에서 시행하고, 시공 후 침하가 발생하지 않도록 다져야 하며, 더돋우기는 담당원의 지시에 따른다.

3.1.4 물받이공사

가. 설치는 설계도서를 따르며, 부득이한 경우는 담당원과 협의하여 지시에 따른다.

나. 기초에 하중이 골고루 분산되고 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 배수관과의 접합부위에서 누수하지 않도록 시공하여야 한다.

라. 뚜껑이 집수구 본체 및 노면과 단차가 발생하지 않도록 시공하여야 한다.

마. 집수구와 노면 사이의 높이를 조정할 필요가 있을 때에는 담당원과 협의한다.

3.2 지하배수

3.2.1 터파기 및 기초공사

가. 따로 명시되지 않은 경우의 터파기는 바닥면의 폭을 관의 바깥 직경보다 300 mm 이상 넓게 파고, 측면의 경사는 0.3 : 1보다 완만하여야 한다.

나. 터파기한 바닥면이 사질토 계통의 양호한 지반일 경우에는 그 위에 유공관을 직접 설치한다.

다. 터파기한 바닥면이 딱딱한 암반층일 때에는 관 바닥보다 100 mm 이상 깊이 파서, 바닥에 자갈이나 쇄석을 깔고 균일하게 다진 후 관을 설치하여야 한다.

라. 터파기한 바닥면이 연약지반일 경우에는 바닥에 자갈이나 쇄석을 150 mm 이상 깔고 요철이 생기지 않도록 모래를 균일하게 덮어 다진 후, 다져진 모래층 위에 불투수성 시트를 깔고 그 위에 관을 설치한다.

마. 불투수성 시트의 연결 부위는 200 mm 이상 겹치게 하며 접착제와 테이프 등으로 밀착시켜야 한다.

3.2.2 관의 설치

가. 관 외주부의 1/2∼1/3에만 구멍이 뚫려 있는 유공관은 되메우기용 토사의 투수계수가 10-2 mm/sec 이하일 때에는 구멍이 위로 향하도록, 투수계수가 10-2 mm/sec 이상일 때에는 구멍이 아래로 향하도록 설치하여야 한다.

나. 소켓이 붙어 있는 유공관은 소켓이 상류쪽을 향하도록 설치하여야 한다.

다. 유공관은 연결되는 개소가 최소가 되도록 하고, 연결 부위에서 누수되지 않도록 시공해야 한다.

라. 유공관은 일정한 기울기를 유지하고 직선으로 설치되어야 한다. 관을 구부려 설치할 때에는 담당원의 승인을 얻어야 한다.

마. 유공관의 내부 바닥면은 평활하게 연결되어야 한다.

3.2.3 골재 채우기

가. 배수층의 채움재는 유공관 구멍 직경의 2배 이상의 크기를 가지는 것이어야 한다.

나. 따로 명시되지 않은 경우, 유공관 채움재의 깊이는 100 mm로 한다.

다. 채움재는 유공관의 측면 아래쪽에서부터 소정의 높이까지 유공관이 파손되지 않도록 잘 다지면서 넣어야 한다.

라. 채움재 위에 부직포를 설치할 경우에는 부직포의 연결 부위가 200 mm 이상 겹치도록 하여야 한다.

3.2.4 골재배수층 설치

가. 골재배수층이 시공될 바닥면은 고인물이나 이물질이 없는 상태에서 침하가 일어나지 않도록 잘 다지고 설계도서의 높이로 마감하여야 하며, 따로 명시되지 않은 경우의 종단기울기는 1% 이상으로 한다.

나. 부직포를 설치할 경우에는 부직포의 연결부위가 200 mm 이상 겹치도록 하여야 한다.

다. 골재배수층은 적합한 다짐장비로 다짐도가 75% 이상 되게 다져야 한다.

20025 조경구조물공사

1. 일반사항

1.1 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 하며, 특별히 명시하지 않은 경우의 제출 시기는 해당 공사 착공 전으로 한다.

1.1.1 제품관련 자료

자재의 견본품 또는 생산지, 규격, 특성 등의 제품자료와 제작자의 설치지침서

1.1.2 시험 및 분석자료

가. 구조물 관련 시험, 검사, 확인보고서

나. 매 1m³마다 관리시험자료를 제출

1.1.3 시공도

가. 담당원의 지시에 따라 거푸집의 제작 및 철근가공의 시공도

나. 평면 및 높이에 따른 시공이음의 위치도와 시공상세도

1.2 참조 표준

KS D 3504	철근콘크리트용 봉강

KS F 2526	콘크리트용 골재

KS F 2527	콘크리트용 부순 골재

KS F 2530	석재

KS F 2534	구조용 경량 골재

KS F 3110	콘크리트 거푸집용 합판

KS F 4004	콘크리트 벽돌

KS F 4009	레디믹스트 콘크리트

KS L 1001	도자기질 타일

KS L 1593	도자기질 타일용 접착제

KS L 4201	점토 벽돌

KS L 5201	포틀랜드 시멘트

KS L 5204	백색 포틀랜드 시멘트

1.3 사전검사

수급인은 이 공사와 관련된 다음 사항의 확인·검사에 대한 담당원의 지시를 이행하여야 한다.

1.4 운반, 저장 및 취급

시멘트, 거푸집, 철근, 레디믹스트 콘크리트 등의 운반, 저장, 취급은 이 시방서 콘크리트 공사의 해당 기준에 따른다.

1.5 측 정

가. 기초공사는 독립된 구간의 거푸집 제거와 콘크리트 양생 및 되메우기가 끝나고 기초 위에 구조물의 설치가 가능하다고 담당원의 승인을 받았을 때를 기준으로 한다.

나. 콘크리트 공사는 독립된 구간의 거푸집 제거와 콘크리트 양생이 끝나고 후속공사에 지장이 없다고 담당원의 승인을 받았을 때를 기준으로 한다.

1.6 시공허용 오차

가. 거푸집 표면에 대한 오차 : 길이 3 m당 6 mm 이내

나. 콘크리트의 부재 두께 오차 : －6 mm, ＋13 mm

다. 기초

1) 평면치수의 변동 : －13 mm, ＋50 mm

2) 위치오차 : 잘못 놓인 방향의 기초폭의 2% 이하 또는 50 mm 이하

3) 두께 : 명시된 두께의 ±5% 이내

4) 압축강도 : 설계강도의 －3% 이내

2. 자 재

2.1 철근 및 콘크리트

2.1.1 철 근

가. 철근은 KS D 3504에 적합한 철근 콘크리트용 이형봉강으로 한다.

나. 결속선은 직경 0.9 mm 이상 되는 연철을 사용한다.

다. 철근을 조립하기 전에 녹이나 먼지, 기름, 기타 콘크리트의 부착력을 감소시킬 위험이 있는 것을 제거하여야 한다.

2.1.2 콘크리트 재료

가. 시멘트는 KS L 5201에 의한 한국산업표준제품으로서, 동일 구조물에 사용되는 시멘트는 단 하나의 상표만을 사용해야 하며, 조금이라도 굳어진 시멘트는 사용하여서는 안 된다.

나. 골재는 KS F 2526의 규정에 적합한 콘크리트용 잔골재 및 굵은 골재 또는 KS F 2527의 규정에 적합한 콘크리트용 부순골재로 한다.

다. 물은 깨끗하고 콘크리트 품질에 영향을 주는 기름, 산, 염류, 유기물 등의 물질을 함유해서는 안 된다.

2.1.3 콘크리트 혼합물

인력비빔 콘크리트의 종별 설계기준 28일 강도, 굵은골재 최대치수 및 표준중량 배합은 표 20025.1을 기준으로 한다.

표 20025.1  인력비빔 콘크리트의 설계, 골재치수, 배합기준

콘크리트의 종별	설계기준 28일 강도	굵은골재 최대치수	표준중량배합(kg)
			시멘트	모래	자갈 또는 부순돌
B1	18 N/mm²	25 mm	346	828	1,011
B2	18 N/mm²	40 mm	323	775	1,101
C	16 N/mm²	40 mm	312	748	1,195

2.1.4 레디믹스트 콘크리트

레디믹스트 콘크리트는 원칙적으로 한국산업표준 지정공장에서 제조한 것을 사용하되, KS F 4009의 규격에 합격한 것으로 콘크리트에 포함된 염소이온농도가 출하시점에서 0.3 kg/m³ 이하이어야 한다.

2.2 거푸집

가. 합판 거푸집은 KS F 3110의 규정에 적합한 콘크리트 거푸집용 합판으로 제작되어야 하며, 거푸집을 재사용할 때에는 깨끗이 청소한 뒤 콘크리트와 접하는 면에 광유 등 박리제를 균일하게 발라 사용한다.

나. 강재 거푸집은 설치업자의 지침에 따른다.

다. 거푸집 박리제는 모든 형태의 거푸집에 사용할 수 있는 것으로 콘크리트의 표면에 얼룩을 만들거나 나쁜 영향을 주어서는 안 되며, 콘크리트 표면의 접합과 부착을 방해하거나 양생 시 수분의 흡수를 방해하지 않는 것이어야 한다.

2.3 미장 및 방수재료

2.3.1 시멘트 모르타르

가. 시멘트 모르타르의 재료는 콘크리트 재료기준에 따른다.

나. 모르타르에 사용하는 모래는 깨끗하고 강한 것으로 체로 쳐서 사용하여야 한다.

다. 특별히 명시하지 않은 경우 바탕 모르타르와 붙임 모르타르의 용적 배합비는 시멘트와 모래의 비를 각각 1 : 3과 1 : 2로 한다.

2.3.2 방수재료

방수제는 설계도서에 명시된 방수처리방법에 적합한 자재로 한다.

2.4 강 재

설계도서 또는 공사시방서에 제시된 형상, 규격, 품질을 갖는 것으로 유해한 산, 녹에 의한 변질이 없는 것을 사용하여야 한다.

2.5 벽 돌

가. 벽돌은 KS F 4004의 규정에 적합한 콘크리트 벽돌 C종 2급으로, 겉모양이 균일하고 비틀림이나 해로운 결렬 또는 흠이 없어야 한다.

나. 토벽돌은 KS L 4201의 규정에 적합한 미장벽돌 3종으로, 쌓기에 지장을 주거나 강도의 저하 및 내구성을 해치는 균열이나 결함이 없어야 한다.

2.6 석 재

2.6.1 구조용 석재

가. 석재는 KS F 2530에 적합한 품질을 갖는 것으로 균열, 마모 및 흠집 등의 결함이 없고 가공마무리한 치수가 부족함이 없어야 한다.

나. 석재의 규격, 색상 등은 설계도서에 따르되 색깔, 무늿결, 가공모양, 마무리 정도 및 물리적 성질이 서로 다른 것을 사용하여서는 안 된다.

2.6.2 인조석

인조석은 회색 또는 백색 시멘트에 경량골재를 혼합하여 고온으로 성형 소성한 것으로 그 모양이나 크기, 색상은 설계도서에 따른다.

가. 시멘트는 KS L 5201의 규정에 적합한 포틀랜드 시멘트 또는 KS L 5204의 규정에 적합한 백색 포틀랜드 시멘트를 사용한다.

나. 경량골재는 KS F 2534의 규정에 적합한 천연골재를 가공한 구조용 경량골재를 사용한다.

다. 안료는 사용품질에 지장이 없고, 시공 중에 강도저하가 생기지 않으며, 물성적으로나 환경적으로 문제되지 않는 것이어야 한다.

2.6.3 석재 연결철물

연결철물, 촉, 꺾쇠 등은 부식되지 않거나 부식방지 코팅처리된 것이어야 한다.

2.7 타 일

2.7.1 도자기질 타일

가. 타일은 KS L 1001의 규정에 적합한 것으로, 형상이 정확하고 색조 및 경도가 일정하며 흠이 없어야 한다. 색조, 색깔 등은 설계도서에 따른다.

나. 외장용 타일은 자기질 또는 석기질로 하되, 충분한 뒷굽이 있는 것을 사용하고, 뒷면은 유약이 묻지 않은 거친 것이어야 한다.

2.7.2 모르타르

가. 고름용 모르타르의 배합은 시멘트 : 모래=1 : 3(용적비), 붙임용 모르타르의 배합은 시멘트 : 모래=1 : 2(용적비)로 하고 내장용에는 지정방수제를 혼입한다.

나. 줄눈용 모르타르의 배합은 시멘트 : 모래=1 : 1(용적비)로 하고 줄눈 폭 3 mm 이하의 경우에는 시멘트를 사용한다. 단, 백색시멘트, 색사, 안료, 혼화제의 사용은 담당원의 지시에 따른다.

2.7.3 접착제

KS L 1593의 규정에 적합한 도자기질 타일용 접착제를 사용한다.

2.8 인조암

인조암은 열에 강하고 장시간 자외선에 노출되더라도 변색되지 않는 제품으로 하되, 사용재료의 재질 및 두께는 설계도서에 따른다.

3. 시 공

3.1 기초공사

조경구조물공사는 지반다짐이 충분히 이루어진 견고한 지반에서 행해져야 하며, 지반이 연약하여 부등침하가 예상되는 경우에는 말뚝기초나 콘크리트기초로 보강하여야 한다.

3.1.1 터파기

가. 터파기는 설계도서에 명기된 경계와 높이로 하며, 터파기한 바닥은 수평을 유지하고 단단해야 한다.

나. 터파기의 경계는 거푸집 설치, 벽면 방수 등에 적합한 작업공간을 주도록 정해져야 한다.

다. 터파기 시 흙이 무너질 우려가 있을 때에는 담당원의 지시에 따라 적절한 비탈을 유지시키거나 흙막이처리를 한다.

라. 파낸 재료는 터파기의 경계로부터 1 m 이상의 거리를 두고 쌓아 두어야 하며, 터파기한 자리는 밖에서 빗물이 흘러 들어가지 않도록 조치하여야 한다.

3.1.2 되메우기

가. 되메우기 재료는 담당원의 승인을 받아 사용하여야 한다.

나. 200 mm를 넘지 않는 층으로 되메우기해야 하며, 각 층은 다음 층을 치기 전에 최대 건조밀도의 90% 이상으로 다져야 한다.

다. 방수처리된 구조물 주위에 되메우기할 때에는 방수막에 손상이 가지 않도록 필요한 조치를 취해야 한다.

라. 명시된 표고로 전면을 마무리해야 한다.

3.1.3 잡석 다짐

가. 기초잡석은 다져진 지반 위에 포설하되, 흙과 뒤섞이지 않도록 해야 한다.

나. 잡석다짐은 다짐기계를 이용하여 고르게 다져 공극이 최대한 채워지도록 한다.

다. 잡석의 틈새는 틈막이 자갈과 모래를 채워서 다진다.

3.1.4 버림 콘크리트

가. 따로 명시되지 않은 경우의 버림 콘크리트의 두께는 60 mm로 하고 폭은 잡석다짐의 폭과 동일하게 한다.

나. 따로 명시되지 않은 경우의 버림 콘크리트의 용적배합비는 시멘트 : 모래 : 자갈＝1 : 3 : 6으로 하거나 설계기준강도 16 N/mm² 이상으로 한다.

3.1.5 기초 콘크리트

가. 기초 콘크리트는 수평으로 설치되어야 한다.

나. 수평면에 대하여 30° 이상의 각도를 가지는 콘크리트에는 거푸집을 설치하고 되메우기를 하기 전에 거푸집을 제거하여야 한다.

다. 버림 콘크리트를 치지 않는 기초 콘크리트 아래에는 0.3 mm 이상의 폴리에틸렌 필름 깔기를 한다.

라. 설계도서에 명시되지 않은 경우, 기초 콘크리트의 용적배합비는 시멘트 : 모래 : 자갈＝1 : 3 : 6 혹은 설계기준강도 18 N/mm² 이상으로 한다.

3.1.6 앵커볼트의 설치

가. 2개 이상 설치되는 앵커볼트는 용접 등으로 앵커볼트 상호간을 고정시킨 후 콘크리트 안에 매설해야 한다.

나. 앵커볼트와 설치될 시설물과의 조합을 확인한 후, 앵커볼트 상호간을 고정시킨다.

다. 앵커볼트 중 콘크리트 바깥으로 나오는 부분은 콘크리트 안에 매설하기 전에 녹막이 페인트를 칠한다.

라. 앵커볼트는 설치될 시설물의 베이스 플레이트에 대하여 직각으로 매설되어야 한다.

3.2 콘크리트 공사

3.2.1 콘크리트 치기

가. 콘크리트를 치기 전 24시간 이내에 콘크리트 반입 및 치기일정을 담당원에게 통지하여야 한다.

나. 콘크리트의 소운반과 치는 동안에 재료의 분리와 손실이 일어나지 않도록 해야 한다.

다. 치기가 시작되면 부재가 완성될 때까지 연속작업으로 치기를 해야 하며, 부분적으로 굳어진 콘크리트를 사용해서는 안 된다.

라. 시멘트와 골재가 물과 혼합된 후 60분 이내에 콘크리트 부리기를 시작하고, 90분 이내에 콘크리트 치기를 완료하여야 한다.

마. 펌핑으로 콘크리트를 치고자 할 때에는 담당원의 승인을 얻어야 한다.

바. 펌핑 호스의 단부에서 나오는 콘크리트는 1.5 m 이내의 자유낙하고를 갖게 해야 한다.

3.2.2 콘크리트 다지기

가. 콘크리트는 치기 중에 충분히 다져야 한다.

나. 거푸집의 진동은 담당원의 승인이 있을 경우에만 해야 한다.

다. 진동기는 콘크리트를 친 전면적에서 일정한 간격으로 수직하게 찔러 넣었다가 뽑아내어야 하며, 찔러 넣기의 간격은 찔러 넣기 영향권이 겹칠 수 있어야 한다.

라. 진동기가 거푸집에 닿지 않게 하면서 거푸집 표면에 가깝게 찔러 넣는다.

3.2.3 시공이음

가. 따로 명시되지 않은 경우, 벽과 슬래브에 있는 시공이음과 벽과 기초 사이에 있는 시공이음에 깊이 40 mm 이상의 키홈을 두어야 한다.

나. 시공이음매는 주철근에 직각이 되도록 두고, 철근은 시공이음을 가로질러 연속되어야 한다.

다. 콘크리트의 치기, 다지기, 양생 중에 이음매의 위치를 단단하게 유지할 수 있도록 이음매의 거푸집을 잘 지지해야 한다.

라. 시공이음에서는 콘크리트의 표면을 깨끗하게 청소하고, 다음 층의 콘크리트를 치기 전에 레이턴스를 제거하여야 한다.

마. 수축에 대한 시간적 여유를 주기 위해서는 12시간 내에는 시공이음과 연결되는 쪽에 콘크리트를 쳐서는 안 된다.

바. 지수판은 설계도서에 명시된 시공이음에 두어야 하며, 계약도서에 명시되지 않은 시공이음은 담당원의 사전승인을 받아야 한다.

3.2.4 양생 및 보호

가. 콘크리트의 양생기간은 콘크리트가 쳐진 시각부터 10일 이상이어야 하며, 이 기간 동안 콘크리트의 표면은 습윤 상태로 유지해야 한다.

나. 거푸집은 해체될 때까지 젖고 서늘하게 유지되어야 한다.

다. 금방 친 콘크리트는 건조한 바람, 비를 맞거나 손상 받지 않도록 보호해야 하며, 더러워지지 않도록 한다.

라. 콘크리트는 양생기간 중 무거운 하중, 충격, 진동 등을 받지 않도록 해야 한다.

마. 거푸집을 해체한 후에도 양생기간 동안은 콘크리트의 표면이 습윤한 상태를 유지하도록 하여야 한다.

3.3 거푸집 공사

가. 거푸집은 콘크리트 부재의 위치, 형상 및 치수를 확보하고, 구조물의 품질을 확보할 수 있는 콘크리트가 되도록 시공하여야 한다.

나. 거푸집은 용이하고 안전하게 설치, 철거가 가능해야 하며 연결 부위의 접합이 좋고, 모르타르가 새지 않는 구조이어야 한다.

다. 거푸집의 구석에는 모따기재를 붙이고, 거푸집의 내면에는 박리제를 도포해야 한다.

라. 거푸집을 재사용할 때에는 콘크리트와 접하는 면을 청소하여 사용한다. 이때, 거푸집의 면이 손상되지 않도록 하여야 한다.

마. 동바리, 거푸집의 조립, 존치기간은 이 시방서 20050 수경시설공사에 따른다.

3.4 철근 공사

3.4.1 철근 가공

가. 철근은 설계도서에 명시된 형상과 치수에 맞게 가공하며 재질에 손상이 가지 않도록 한다.

나. 철근 말단부의 갈고리는 구부림각 180°, 구부림각 90°, 구부림각 135°를 사용하고, 갈고리의 구부림 반직경은 철근직경의 2.5배 이상으로 한다.

1) 구부림각 180°의 갈고리는 철근의 말단부를 반원형으로 180° 구부리고 반원형의 끝에서부터 철근의 말단까지는 철근직경의 4배 이상으로 최소한 60 mm 이상의 직선부가 되도록 가공한다.

2) 구부림각 90°의 갈고리는 철근의 말단부를 90° 구부리고 철근 말단까지의 직선부가 철근 직경의 12배 이상이 되도록 가공한다.

3) 구부림각 135°의 갈고리는 철근의 말단부를 135° 구부리고 철근 말단까지의 직선부가 철근 직경의 6배 이상으로 최소 60 mm 이상이 되도록 가공한다.

다. 철근의 구부림 가공은 상온에서 실시한다.

3.4.2 철근 조립

가. 철근을 설계도서대로 올바르게 배치하고 콘크리트를 칠 때 움직이지 않도록 견고하게 묶는다.

나. 철근과 철근이 교차하는 곳은 직경 0.9 mm 이상의 결속선으로 결속한다.

다. 철근의 피복두께를 확보하기 위하여 간격재를 배치하여야 하고, 거푸집에 접하는 간격재의 재질은 콘크리트제 또는 모르타르제를 사용하여야 하며, 다른 간격재를 사용할 때에는 담당원의 승낙을 얻어야 한다.

라. 철근의 조립이 완료되었을 때에는 담당원에게 검사를 받아야 한다.

마. 철근 조립 후 많은 시간이 경과하였을 경우에는 콘크리트를 치기 전에 재차 배근상태를 검사하고 청소하여야 한다.

3.4.3 철근이음

가. 이음 위치는 인장응력을 크게 받는 곳을 피하고, 동일위치에 이음자리가 집중되지 않도록 해야 한다.

나. 이음길이는 철근직경의 20배 이상으로 하고 직경 20 mm 이상의 결속선으로 여러 개소 결속한다.

다. 이음 위치는 철근의 이음길이에 철근직경의 25배를 더한 길이 이상 인접한 철근의 이음과 서로 어긋나게 배치한다.

3.4.4 철근의 피복두께

가. 철근의 피복두께란 콘크리트 표면으로부터 철근까지의 최단거리이며, 설계도서 상의 콘크리트 표면으로부터 철근의 중심까지의 거리와는 다르다.

나. 따로 명시되지 않은 경우의 철근의 피복두께는 표 20025.2의 기준을 따른다.

표 20025.2  철근의 피복두께 기준                                                     (단위 : mm)

시 공 구 분		슬래브, 벽	보	기둥	기초
지상에 노출된 경우	모르타르 바르기 등의 마감을 하는 경우 모르타르 바르기 등의 마감을 하지 않는 경우	30 30	30 30	30 35	－ －
직접 흙에 접하는 경우	모르타르 바르기 등의 마감을 하는 경우 모르타르 바르기 등의 마감을 하지 않는 경우	30 35	35 40	40 45	－ 60

3.5 쌓기 및 붙이기

3.5.1 블록쌓기

가. 작업을 시작하기 전에 기초 등의 상단을 청소하고 파손을 점검한 후에 줄눈 접착면 및 콘크리트면에 적당히 물축임을 한다.

나. 모르타르는 사전에 가반죽하여 놓고 사용에 알맞게 가수하여 반죽하고 가수한 후 될 수 있는 대로 빨리 사용하되 응결을 시작한 것은 사용하지 말아야 한다.

다. 세로기준틀은 먼저 좌우의 모서리를 정확하게 쌓고, 이것을 기준으로 수평실을 치고 수평수직에 한 단씩 블록의 살두께가 큰 편을 위로하여 쌓아간다.

라. 쌓기 모르타르는 접합면 전체에 발라 줄눈을 일정하게 맞추어 바르게 대어 쌓고, 1일의 쌓기 높이는 1.6 m 이하를 기준으로 한다.

마. 줄눈 모르타르의 경화에 앞서 줄눈누르기와 줄눈파기를 한다. 치장줄눈의 경우에는 흙손을 사용하여 빈틈이 발생하지 않도록 줄눈누르기를 하여 마무리한다.

3.5.2 벽돌쌓기

가. 줄눈 모르타르(1 : 2)는 접합면의 전체에 고루 배분되도록 하고 줄눈폭은 특별히 정하지 않는 경우에는 10 mm로 한다.

나. 벽돌에 부착된 불순물은 제거하고 사전에 물축이기를 한다.

다. 착수 전에 벽돌 나누기를 하고 세로줄눈은 특별히 정한 바가 없는 한 통줄눈이 되지 않도록 쌓기 한다.

라. 1일 쌓기 높이는 1.2 m 이하로 하고 이어쌓기를 위하여 계단형으로 남겨 놓도록 한다.

3.5.3 돌쌓기

가. 메쌓기의 접촉부는 5∼10 mm로 해야 하며, 해머 등으로 접촉부위를 다듬어 접합시키고, 접촉부 뒤틈 사이에는 조약돌을 괸 다음 그 사이와 뒷면에 채움용 돌을 충분히 채워야 한다.

나. 찰쌓기의 뒤채움은 콘크리트를 사용하고, 줄눈에 모르타르를 사용한다. 접촉 부위의 두께는 견칫돌의 경우 10∼13 mm를 표준으로 하고 막깬돌쌓기에서는 25 mm 이하를 표준으로 한다.

다. 찰쌓기의 1일 쌓기 높이는 1.2 m를 표준으로, 최대 1.5 m 이내로 한다. 또 1일에 전부 쌓기가 끝나지 않았을 때는 남는 부분은 계단형으로 남겨 놓는다.

라. 찰쌓기의 신축줄눈은 설계도서에 따르고 특별히 정한 바가 없는 경우는 20∼30 m에 1개소를 표준으로 하여 담당원의 승인을 얻어 설치하도록 한다.

마. 배수관의 위치 및 구조는 설계도서에 따르고, 특히 정한 바가 없는 경우에는 내경 50 mm 정도의 경질염화비닐관(P.V.C관)을 사용하여 1.5∼2 m²에 1개소의 비율로 설치하고 그 근원부가 막히지 않도록 하여야 한다.

바. 찰쌓기는 시공 후 즉시 양생거적 등으로 덮고 적당히 물을 뿌려 습윤을 유지하여야 한다.

사. 골쌓기에서 머릿돌은 5각의 형상을 이루도록 하고 큰돌을 아래층에 쌓아 안정도를 높여야 한다.

아. 호박돌 및 잡석쌓기는 줄쌓기를 원칙으로 하고, 튀어나오거나 들어가지 않도록 면을 맞추고 양옆의 돌과도 이가 맞아야 한다.

3.5.4 돌붙임

가. 돌붙임에 사용하는 뒤채움 모르타르, 줄눈 모르타르는 빈틈이 없도록 유의하여 채운다.

나. 산석 치장쌓기는 설계도서에서 정하는 균일한 크기의 돌을 사용하여 이를 잘 맞추어 쌓아야 하며, 접촉 부위의 간격은 10∼25 mm를 표준으로 한다.

다. 이가 맞지 않을 경우에는 망치 등을 사용하여 접촉부를 다듬어 맞추되, 깨진 면이 표면에 노출되지 않아야 한다.

라. 가공석을 사용하여 성쌓기를 할 경우에는 찰쌓기라 하더라도 메쌓기의 효과를 내기 위하여 돌을 사각형으로 다듬어 맞댄 면의 간격이 최소화되도록 이를 맞추어 쌓는다.

마. 성쌓기의 뒤채움은 모르타르를 빈틈이 없도록 채우되 줄눈 부위의 모르타르는 철선 등을 이용하여 긁어내어 표면에 노출되지 않도록 하여야 한다.

바. 장대석 등 균일한 가공석을 사용할 경우에는 수평줄눈을 맞추어 일정높이마다 되물림쌓기를 한다.

사. 판석붙임은 설계도서에 기준하여 돌나누기, 설치공작도를 작성 제출하여 담당원의 승인을 얻은 후 가공·설치·시공한다.

3.5.5 타일붙이기

가. 설계도서 및 담당원의 지시에 따라 줄눈나누기를 하고 필요에 따라 타일을 조정할 수 있다. 줄눈나누기는 기준량에 따라 정확히 행하여야 한다.

나. 붙이기 바탕은 평탄하게 보정한 후 청소를 하고 물축이기를 한다.

다. 줄눈나누기는 수준기를 사용하여 종횡이 잘 맞도록 붙인다.

라. 치장줄눈메우기에 앞서 줄눈 부분을 청소하고, 줄눈메우기는 모르타르의 경과 정도를 보아 가능한 빠른 시기에 행하여야 하며, 줄눈부의 건조상태에 따라 물축임을 행한다.

마.  치장줄눈은 모르타르가 경화한 정도를 보아 줄눈흙손을 사용하여 소정의 형상으로 마감하여야 한다.

바. 외부시공의 경우 일광의 직사 또는 바람과 물에 의해 훼손되지 않도록 가리개 등 보호조치를 하여야 한다.

3.6 경관구조물공사

3.6.1 석 축

가. 석축의 규격, 재료는 설계도서에 맞게 설치하여야 한다.

나. 석축의 전면 기울기는 메쌓기에서는 1 : 0.3, 찰쌓기에서는 1 : 0.2 이상을 표준으로 한다.

다. 석축 기초의 깊이는 시공지역의 동결심도보다 깊어야 하며, 최소 700 mm 이상으로 한다.

라. 뒤채움 재료는 천연석 또는 부순돌로 강도가 크며 내구성이 있는 최대직경 150 mm 정도의 굵기가 적당한 입도로 혼합된 것이어야 한다.

마. 되메우기 흙으로 유기질토, 나무조각, 콘크리트 덩어리, 벽돌 부스러기, 동결된 토사 등을 사용하여서는 안 된다.

3.6.2 장식벽

가. 장식벽은 담장이나 옹벽에 경관 목적을 위하여 표면 마감처리를 행하는 벽을 말한다.

나. 돌붙임, 벽돌치장쌓기, 타일붙이기는 이 시방서 20050 수경시설공사에 따른다.

다. 치장재료는 견본품을 담당원에게 제출하여 승인을 득하여야 하며, 시공 전에 줄눈나누기 등의 시공도면을 제출하여야 한다.

라. 기타 뿜어붙이기 및 표면 긁기, 쪼아내기 등 특수한 처리는 공사시방서에 따른다.

3.6.3 담 장

가. 담장의 기초는 부등침하가 없도록 충분히 다져야 하며, 최소 6 m 간격으로 동결심도 이하로 기초보강을 하여야 한다.

나. 벽돌이나 블록 담장의 경우 상단은 정확히 수평이 유지되어야 하며, 경사에 따라 계단식으로 마감하여야 한다.

다. 치장쌓기의 경우 기초부위가 노출되지 않도록 치장면이 지면에 100 mm 이상 묻히도록 한다.

라. 벽면은 기울어짐이 없도록 정확히 수직을 유지해야 하며 일정구간마다 지지를 위한 기둥이나 그와 유사한 구조로 보강하여야 한다.

마. 옹벽 등의 구조물 위에 설치하는 경우에는 하단의 재료분리선이 수평을 유지하여 깨끗이 마감되어야 한다.

바. 담장의 길이가 30 m를 넘는 경우 20∼30 m 간격으로 신축이음을 두어야 한다.

3.6.4 문 주

가. 기초는 동결심도 이하로 충분히 다져 부등침하가 발생하지 않도록 하며, 성토지반인 경우 200 mm 단위로 층다짐을 하여야 한다.

나. 경사지라 하더라도 양쪽 문주는 서로 대칭을 유지하여야 한다.

다. 치장쌓기 또는 붙이기할 경우 줄눈나누기를 하여 사전에 담당원의 승인을 얻어야 한다.

라. 문주의 상단은 물매를 만들거나 방수처리를 하여 수분이 침투되지 않도록 하여야 한다.

3.6.5 계단 및 경사로

가. 계단 및 경사로의 규격, 재료, 경사 등은 설계도서에 맞게 설치하여야 한다.

나. 계단은 침하가 발생하지 않도록 터파기 후 철저히 다져야 하며, 철근을 배근할 경우 반드시 50 mm 이상 띄워 계단 본체와 일체가 되도록 하여야 한다.

다. 경사로가 긴 경우에는 이음줄눈을 설치하여 부등침하가 생기지 않도록 해야 한다.

라. 장애인용 경사로를 설치할 경우의 표면처리는 미끄러지지 않게 소정의 마찰력을 지니도록 해야 한다.

마. 자연경관지역에 목재를 사용하여 계단 및 경사로를 설치할 경우에는 답압에 의한 목재의 유격이 생기지 않게 시공해야 하며, 미끄럼을 방지할 수 있는 조치를 하여야 한다.

바. 미장할 경우에는 콘크리트 구조체에 붙은 유기불순물, 흙 등을 깨끗이 닦아낸 후 착수하여야 하며 각단에 물이 고이지 않도록 평탄하게 하여야 한다.

사. 계단 상·하부에 측구, 도수로, 집수거, 집수정, 맨홀 등의 배수구조물을 적절히 설치하여 시공하여야 한다.

3.6.6 보도교

가. 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

나. 높이가 2 m 이상의 보도교는 난간을 설치하여야 한다.

다. 무지개 형상의 곡선형 보도교는 종단 기울기가 8%를 넘지 않도록 하며, 미끄럼을 방지하기 위한 거친 표면처리를 하여야 한다.

3.6.7 야외 스탠드

가. 계단식 스탠드를 원칙으로 하며, 평균 경사도는 14° 이상을 유지하여야 한다.

나. 빗물이나 오물이 고이지 않도록 표면에서 돌출시키거나 일정 기울기가 유지되어야 하며, 맨 하단부에 측구 등의 배수구조물을 설치하여야 한다.

3.6.8 전망대

가. 전망대의 재료 및 규격, 형상은 설계도서에 따르고 관련 재료 및 시공항목을 적용한다.

나. 주위보다 높게 돌출구조물로 설치하는 경우에는 높이 1.1 m 이상의 안전책을 설치한다.

다. 지붕구조물을 설치하는 경우에는 풍압 및 설하중에 견딜 수 있는 견고한 구조로 하고, 특수구조물일 경우에는 담당원과 협의하여 구조계산서를 제출하여야 한다.

라. 피뢰침 등의 낙뢰보호시설을 설치한다.

3.6.9 소옹벽

가. 소옹벽은 소규모 비탈면 안정, 플랜터 박스 등에 사용되는 1 m 이하의 중력식 소옹벽에 한정한다.

나. 소옹벽의 규격 및 재료는 설계도서에 따른다.

다. 옹벽의 전면에는 1 : 0.02 정도로 경사를 두어서 시공오차로 인해 옹벽이 앞으로 기울어지는 것을 피해야 한다.

라. 옹벽기초 하단이 시공지역의 동결심도보다 깊어야 한다.

마. 옹벽 전면의 콘크리트 철근 피복 두께는 50 mm 이상 되게 하고, 문양거푸집을 사용하는 경우에는 문양 홈깊이를 제외한 두께가 50 mm 이상이어야 한다.

바. 노출면은 균일한 외관을 얻을 수 있도록 콘크리트의 재료, 배합, 치기방법이 바뀌지 않도록 주의하고, 미리 정해진 구획의 콘크리트는 완료될 때까지 연속해서 쳐야 하며, 재료분리가 일어나지 않도록 잘 다져야 한다.

사. 문양거푸집을 사용할 경우 옹벽의 형상에 따라 그 설치공작도를 작성하여 담당원의 승인을 받아야 하며, 문양거푸집으로 인하여 설계도서에 지시된 옹벽두께가 감소하는 경우가 없도록 주의해야 한다.

아. 문양거푸집으로 1회용 발포폴리스티렌을 사용할 경우에는 거푸집 제거와 동시에 옹벽에 부착된 발포폴리스티렌을 깨끗이 제거하고, 제거된 폐기물은 소각로에서 소각 처리하거나 현장 밖으로 반출하여야 한다.

3.6.10 식생옹벽

가. 식생옹벽에 사용되는 조립식 블록은 모양과 색상이 균일하고 비틀림이나 균열 등이 없는 양질의 제품을 사용하여야 한다.

나. 기초는 옹벽 높이의 1/2 만큼 터파기하고 부등침하가 발생하지 않도록 잡석다짐 또는 버림 콘크리트 기초를 해야 한다. 이때 기초 주변은 배수가 잘 되도록 자갈층 또는 맹암거 등의 배수시설을 하여 침수에 의한 피해가 없도록 해야 한다.

다. 식생옹벽의 기울기는 설계도서에 따르되 옹벽용 블록은 선형과 수평이 일정하게 유지되도록 하며 뒤채움 시공 시 옹벽 매 단높이마다 1톤 이상의 소형 평면진동기로 2회 이상 균질하게 다짐하여야 한다.

라. 옹벽구체 보강토는 배수에 유리한 마사토 성분의 사질양토 사용을 원칙으로 하며, 뒤채움용 골재는 투수성과 내구성이 양호한 자갈, 쇄석 등으로 석분이 함유되지 않은 재료이어야 한다.

마. 식재공사시에는 블록 내부를 식물생육에 적합한 사질양토로 채운 후 설계도서에 명시된 수목 및 초화류를 식재하되, 갈수기에 원활한 수분 공급을 위해 보습제를 동시에 사용하여야 하며 필요한 경우 옹벽 상단부에 점적관수시설을 도입해야 한다.

바. 옹벽 사이에 식재하는 경우 하단부는 부착되어 올라가는 만경류를 식재하고 중간단은 관엽이나 초화류를, 상단은 인동덩굴이나 줄사철 등 늘어지는 수종 또는 철쭉, 눈주목, 눈향 등의 조형미가 있는 수종을 선택하여 조기에 녹화가 가능하도록 한다.

20030 조경포장공사

1. 일반사항

1.1 적용 사항

가. 이 시방서는 조경포장공사에 적용한다.

나. 흙다짐, 마사토 및 혼합토포장, 석재 등의 포장공을 포함한다.

1.2 관련 시방절

가. 이 공사와 관련이 있으나 이 시방서에서 언급되지 않은 사항은 이 시방서 20020 배수공사, 20055 조경시설공사 등의 다른 시방서의 해당 사항에 따른다.

1.3 참조 표준

이 시방서에서 인용된 표준은 이 시방서의 일부를 구성한다. 년도 표시가 있는 경우에는 해당 년도의 표준을 적용하며, 년도 표시가 없는 경우에는 가장 최근 표준을 적용한다.

도로공사 표준시방서

KS F 2312	흙의 다짐 시험 방법

KS F 2530	석재

KS F 4006	콘크리트 경계 블록

KS F 4419	보차도용 콘크리트 인터로킹 블록

KS L 1001	도자기질 타일

KS M 2201	스트레이트 아스팔트

1.4 용어의 정의

CBR시험 : 노상토(路床土)의 지지력을 비교하기 위해 생각해낸 관입 시험의 일종. 노상토 지지력 시험이라고도 한다. 도로의 기층을 만들 때 사용하는 가장 우수하다고 여겨지는 크러셔-런(crusher-run)을 사용하여 지름 50 mm의 피스톤을 관입했을 때의 관입 깊이와 단위하중에 대해 시험한 흙의 동일한 깊이에 대한 단위하중이 몇 %인가를 구하는 시험. 그 %를 CBR 값이라 한다. 노상토 및 포장용 입상 재료의 강도 지표로서 사용된다. 현장단위하중 / 표준단위하중.

수침CBR시험 : 물 속에 96시간 담근 후 시험하는 것.

1.5 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 한다. 특별히 명시하지 않은 경우의 제출시기는 해당 공사착공 전으로 한다.

1.5.1 현황관련 자료

가. 포장 예정지의 노반상태를 점검한 도면 및 보고서

나. 동절기, 우기 시 등 부적기 시공을 고려한 노반상태 보고서

1.5.2 제품관련 자료

가. 공사에 사용될 포장재의 특성, 제조방법, 치수 등 특수문양 등의 제품자료 및 제작자의 설치지침서

나. 지정된 종류, 색상, 표면마감이 실제 제품과 동일하게 제작된 포장재 견본

다. 반입될 제품에 대한 한국산업표준 허가증, 또는 품질인증승인서류, 형식승인서류 등의 사본

라. 표층재 제품 견본품 각 1 m²

1.5.3 시험 분석자료

가. 포장관련 시험, 검사, 확인보고서

나. 노상 및 노반토에 대한 토질시험 성적표

다. 시공 중에 실시하는 관리시험 성적표

1.5.4 시공도

가. 인터록킹 블록, 타일, 콘크리트 평판, 표층재 등의 배치 평면도

나. 건물, 도로, 옥외장치물, 각종 구조물, 맨홀 등과의 접합방법

다. 종류가 다른 포장 상호간의 접합방법

라. 나대지나 잔디밭과의 경계부위에 대한 마감처리

마. 마감높이 및 표면 배수구배의 검토

1.5.5 포장보양계획서

수급인은 시공 후 포장 보양계획서를 제출하여야 한다.

1.6 사전검사

수급인은 이 공사와 관련된 다음 사항의 확인 검사에 대한 담당원의 지시를 이행하여야 한다.

1.7 운반, 저장 및 취급

1.7.1 아스팔트 혼합물의 운반

가. 아스팔트 혼합물은 깨끗이 청소된 덤프트럭을 사용하여 운반하여야 한다.

나. 보온 및 이물질의 혼입을 방지하기 위하여 보호막 등으로 덮는다.

다. 아스팔트 혼합물이 적재함에 붙지 않도록 적재함 내부에 기름 등을 얇게 도포하며, 가능한 한 도포량은 최소량으로 해야 한다.

라. 기온이 낮을 때나 강한 바람이 불 때에는 아스팔트 혼합물의 온도가 급격히 저하하기 때문에 보온재나 마포로 아스팔트 혼합물의 표면을 덮어야 한다.

1.7.2 아스팔트 혼합물의 저장

가. 가열혼합물의 믹서에서 덤프트럭에 직접 적재하지 않고 혼합 후 일단 저장할 경우, 12시간 미만일 경우에는 일시 저장 빈(surge bin)에, 12시간 이상일 경우에는 가열저장 사일로(hot storage silo)에 저장한다.

나. 일시 저장 빈에 저장할 경우에는 아스팔트 혼합물의 온도가 저하하지 않도록 하고, 혼합 직후의 온도보다 10℃ 이상 저하하지 않은 상태에서 배출하여야 한다. 특히 저장 빈 배출구 부근은 온도가 저하하기 쉽기 때문에 충분히 보온하여야 한다.

다. 아스팔트의 품질변화에 대한 방지대책시설이 없는 빈에서 12시간 이상 저장해서는 안 된다.

라. 사일로 안의 아스팔트 혼합물의 온도를 항상 확인할 수 있는 장치를 설치하고 온도 관리를 하여야 한다. 온도 검사 위치는 가능한 한 배출구 가까운 부분과 사일로 중앙부로 한다.

마. 3일 이상 저장하는 사일로 내의 혼합물에 대해서는 정기적으로 아스팔트 혼합물의 침입도를 확인하여 품질을 관리하여야 한다.

바. 사일로 안의 혼합물이 적어지면 아스팔트 혼합물의 품질이 크게 저하되는 경향이 있으므로 장기간 저장할 경우에는 사일로 안에 가능한 한 다량의 혼합물을 채워 두는 것이 바람직하다.

1.7.3 시멘트, 콘크리트용 자재

이 시방서 05010 콘크리트공사의 해당 규정을 적용한다.

1.7.4 경화 마사토(clay) 포장재의 취급

가. 마사토 보관은 강우 시 유실되지 않도록 해야 하며 필요 시 비산되지 않도록 덮개를 사용한다.

나. 보관 시 비닐을 덮어 강우 및 습기에 의해 경화되지 않도록 한다.

다. 경화 마사토를 취급할 때에는 반드시 분진방지 마스크를 착용하여야 한다.

1.7.5 기타 표층재

가. 외기의 영향으로 변질되지 않도록 바람이 잘 통하는 곳에 저장하여야 한다.

나. 비, 눈, 시멘트 가루, 흙, 기타 이물질에 오염되지 않도록 저장하여야 한다.

1.8 측 정

가. 표층의 다짐 및 뒷정리가 종료된 상태에서 면적(m²) 단위로 산출한다.

나. 수평면적에 대한 면적을 측정하고, 이 면적을 경사면적으로 환산한다.

1.9 시공허용오차

가. 노상 및 노반 : 직선거리 3 m당 0.01 m 미만. 매 50 m²마다 측정, 평균값 적용

나. 기층 및 보조기층 : 직선거리 3 m당 0.008 m 미만. 매 50 m마다 2회 측정, 평균값 적용

다. 표층재의 허용오차 : 완성된 두께는 설계두께의 +10%, -5% 이내

라. 표면마무리 허용오차 : 3 m의 곧은 자로 재었을 때의 요철 0.006 m 미만, 매 50마다 2회 측정, 평균값 적용

마. 흙다짐포장 후 표층두께의 오차 : 10% 이내

1.10 이행요구조건

가. 공사착공에 앞서 시공구역 내의 지장물 유무 및 지하매설물의 위치와 형상을 조사하고 사고가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

나. 포장의 표면배수 기울기는 특별히 규정하지 않는 한 다음을 적용한다.

표 25030.1  포장별 표면배수 기울기

종 별	기 울 기
원로, 보행자도로, 자전거도로, 광장	1.5∼2.0% 0.5∼1.0%

다. 포장 줄눈은 계약도면에 명시된 대로 설치하여야 한다.

라. 포장 문양은 계약도면에 의하되, 필요 시 문양 예시도를 작성하여 담당원의 승인을 받아 시행한다.

1.11 환경관리 및 친환경시공

1.11.1 일반사항

가. 환경에 관한 법규를 존중, 준수하고 건축물의 라이프사이클 관점에서 금속공사 단계에서 의도하는 환경관리 및 친환경시공의 목표가 달성되도록 재료, 제조, 시공 등의 사양을 정한다.

나. 이 절은 포장공사에 있어서 환경관리 및 친환경시공을 실시하는 경우에 적용하며 본 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01000 총칙의 01045 환경관리 및 친환경시공에 따른다.

1.11.2 재료선정

가. 환경마크, 탄소마크, 환경성적표지 등 공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

나. 조경공사의 자재는 전과정에 걸쳐 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 적은 것을 우선적으로 선정한다.

다. 조경공사에 사용되는 재료는 순환자원의 사용을 적극적으로 고려한다.

라. 적절한 구매계획을 수립하여 잉여 자재가 발생하지 않도록 하고, 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 것을 우선적으로 사용한다.

1.11.3 시공방법 선정

가. 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경 공법의 사용을 고려한다.

나. 천연자원의 보전에 도움이 되는 공법, 폐기물 배출을 최소화하는 공법을 사용한다.

다. 공사용 장비 및 각종 기계·기구는 에너지 효율 등급이 높고 배출 등에 의한 환경영향이 적은 것을 우선적으로 사용한다.

라. 공사용 용수는 사용량을 측정하여 환경관리계획에 포함될 수 있도록 하고, 공사의 품질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 우수 및 중수를 적극적으로 활용한다.

마. 공사에 따르는 소음, 진동 등의 억제에 도움이 되는 건설장비, 기계·기구를 우선적으로 이용하고 작업장소 또는 작업시간을 충분히 고려하여 공사현장의 주변지역 환경 및 작업환경의 보전에 노력한다.

바. 공사장에서 발생하는 폐기물, 분진, 오수 및 배수 등이 공사장과 공사장 인근의 대기, 토양 및 수질을 오염시키지 않도록 적절히 계획하고 조치하여야 한다.

사. 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선적으로 사용하고, 부득이하게 발생한 폐기물 및 이용할 수 없게 된 재료의 재자원화를 고려한다.

아. 반출, 폐기 및 소각되는 경우에는 이에 따른 처분 및 운송에 의한 환경영향을 최소화할 수 있도록 고려한다.

2. 자 재

2.1 노상 및 노반토

2.1.1 노상토

가. 노상토의 재료는 최대직경이 0.1 m 이하이고 0.075 mm체 통과분이 25% 이하이며, 시방 최소밀도에서 수침 CBR이 10 이상인 것을 사용하여야 한다.

나. 부득이한 경우, 담당원의 승인을 얻어 최대직경이 0.15 m 이하이고 0.075 mm체 통과 50% 이하이며, 시방 최소 밀도에서 수침 CBR이 5 이상인 것을 사용하여야 한다.

2.1.2 노반토

노반토는 최대직경 0.03 m 이하이고 0.075 mm체 통과분이 10% 이하이며, CBR이 60 이상인 쇄석을 사용하여야 한다.

2.2 보조기층 및 기층재

가. 투수성 아스팔트 포장의 필터층용 모래는 0.075 mm(No. 200)체 통과분이 6% 이하이고 투수계수가 10-3 cm/sec 이상인 것을 사용한다.

나. 보도용인 투수성 아스팔트 포장의 보조기층 및 기층용 재료는 최대입경 0.19 m인 단립도의 부순돌을 사용하며, CBR이 20 이상이어야 한다.

다. 차량이 출입하는 투수성 아스팔트 포장의 보조기층 및 기층용 재료는 최대입경 0.025 m인 단립도의 부순돌을 사용하며, CBR이 60 이상이어야 한다.

라. 경화 흙포장 보조기층의 표면이 지나치게 건조할 경우에는 균열의 원인이 되므로 물을 뿌린 후 포장을 하도록 한다.

2.3 표층재료

2.3.1 흙포장재

가. 표층안정제를 사용하지 않는 흙포장재는 바람에 날리지 않고, 입자의 모양이 날카롭지 않아야 한다.

나. 화강암이 풍화한 화강토는 No. 4체(4.76 mm)를 통과하는 입도를 가진 골재가 고루 함유되어 다짐과 배수가 양호하여야 한다.

다. 흙포장재는 시방 최고밀도에서 0.1∼0.03 m/sec 이상의 투수성을 가지고 있어야 한다.

라. 표층안정제는 피부에 접촉되더라도 유해하지 않은 성분으로서 빗물 등에 의하여 쉽게 유실되지 않는 것이어야 한다. 사용법은 제조업자의 지침에 따른다.

2.3.2 흙시멘트 포장재

가. 흙시멘트 포장에 사용되는 결합제로 포틀랜드 시멘트를 사용할 경우의 시멘트량은 혼합재료의 10%를 초과하지 않도록 하며, 혼합재의 7일 압축강도는 0.003 kg/m² 이상이어야 한다.

나. 흙시멘트 포장에 사용되는 결합제로 석회를 사용할 경우의 석회량은 혼합재료의 10%를 초과하지 않아야 한다.

다. 흙시멘트 포장에 사용되는 결합제가 기성제품일 경우에는 생산자의 기준에 따라 혼합재료를 제조한다.

2.3.3 투수성 아스팔트 포장재

가. 투수성 아스팔트 혼합물은 0.1∼0.02 m/sec 이상의 투수성을 가지고 있어야 한다.

나. 투수성 아스팔트 혼합물에 사용되는 골재는 0.013 m 이하의 단립도의 쇄석으로서 잔골재는 사용하지 않아야 한다.

다. 포장용 아스팔트는 KS M 2201의 규정에 적합하여야 한다.

라. 투수성 아스팔트 혼합물의 마샬기준치는 안전도 400 kg 이상, 흐름도 0.002∼0.004 m, 공극률 12% 이상, 포화도 40∼55%로 한다.

마. 색소는 계약도면에 지정된 색상으로 하되, 사용품질에 지장이 없고 시공 후 탈색 또는 강도의 저하가 없으며, 물성적으로나 환경적으로도 문제가 없는 것이어야 한다.

2.3.4 아스팔트 및 콘크리트 포장재

포장용 아스팔트 혼합물과 콘크리트 재료 및 부속자재는 도로공사표준시방서의 해당 기준을 적용한다.

2.3.5 인조잔디 포장재

가. 인조잔디의 표면재료는 인화성이 없는 것이어야 한다.

나. 투수성 인조잔디는 투수매트가 부착되어 있어야 한다.

다. 접착제는 제조업자의 지침에 따른다.

2.3.6 컬러 세라믹 포장재

가. 천연 또는 인공의 유색골재를 사용하되, 착색 효과를 높이기 위해 함께 사용할 수도 있다.

나. 골재는 접착제와 혼합하기 전에 색깔, 형상 등에 대하여 담당원의 승인을 얻어야 한다.

다. 접착제는 투명한 열경화형 에폭시 수지를 사용한다.

2.3.7 콘크리트 블록

가. 보차도용 콘크리트 인터록킹블록은 KS F 4419에 준하여 제작된 한국산업표준 표시품 또는 동등 이상의 제품으로 한다.

1) 보도용 인터록킹 블록 : 28일 휨강도 5 g/m² 이상, 두께 0.06 m

2) 차도용 인터록킹 블록 : 28일 휨강도 6 g/m² 이상, 두께 0.08 m

나. 프리캐스트 콘크리트 블록 : 28일 압축강도 27 g/m² 이상, 두께 0.06 m, 흡수율 7% 이하

다. 블록깔기용 모래 입도는 0.002∼0.008 m, 블록 줄눈 채움용 모래 입도는 0.003 m 이하를 기준으로 한다.

2.3.8 석 재

가. 포장용 석재는 KS F 2530의 규정에 적합하여야 한다.

나. 석재의 표면은 우천 시 미끄러지지 않게 표면가공된 것이어야 한다.

다. 내구적이고 흠이 없는 석재료 가공, 제작된 것으로 한다.

2.3.9 타 일

가. 타일은 KS L 1001의 규정에 적합하여야 한다.

나. 타일의 표면은 우천 시 미끄러지지 않게 표면가공된 것이어야 한다.

다. 금이나 박리층, 갈라짐, 깨어짐 등이 없어야 한다.

2.3.10 합성수지 포장재

한국산업표준 또는 동등 이상의 제품으로 한다.

2.3.11 고무바닥 타일

충격흡수재와 내마모성 표면재를 조합하거나, 균일재료를 이중으로 조밀하게 하고, 내마모성 표면재를 상부로 하여 하나의 재료를 구성시켜 공장 성형한 것으로, 충격을 흡수할 수 있어야 한다.

2.3.12 경계블록

가. 콘크리트 경계블록은 KS F 4006의 규정에 합격한 한국산업표준 또는 동등 이상 제품이어야 한다.

나. 화강석 경계블록은 KS F 2530에 의한 화강석 재질로 균열이나 결점이 없어야 한다.

3. 시 공

3.1 노상 및 노반의 조성

3.1.1 노 상

가. 노상의 전압은 현장의 토질에 적하한 다짐기계의 의하여 소정의 밀도(KS F 2312에 의해 정해진 최대건조밀도의 95% 이상)가 얻어질 수 있도록 고르게 다진다.

나. 성토에 의하여 노상을 조성할 때에는 1층의 두께(다진 후의 두께)가 0.2 m 이하가 되도록 다져 나간다. 다짐은 최적함수비에 가까운 상태에서 시행한다.

다. 지하수, 침투수, 용수 등을 발견한 경우는 배수처리법을 담당원과 협의하여야 한다.

라. 노상토 중에 잔디, 풀, 수목의 그루터기 등의 유기물이나 기타 유해물질이 있는 경우에는 양질토로 치환하는 등의 처리방법에 대하여 담당원과 협의하여야 한다.

마. 노상토의 입도분포가 불량하여 필요로 하는 지지력이 얻어지지 않을 때에는 노상토의 안정처리에 대해 담당원과 협의하여야 한다.

바. 동상이 예상되는 곳에서는 동상방지층의 설치에 대하여 담당원과 협의하여야 한다.

사. 노상은 균일한 지지력을 얻을 수 있도록 마감하여야 한다.

3.1.2 노 반

가. 노반재는 노상면에서 손상을 주지 않도록, 또한 입도조성을 해치지 않도록 소정의 두께로 고르게 깐다. 소정의 밀도(KS F 2312에 의해 정해진 최대 건조밀도의 95% 이상)가 얻어질 수 있도록 고르게 다진다.

나. 노반은 균일한 두께로 고르게 깔고, 1층의 다짐 두께가 0.15 m(다진 후의 두께)를 넘지 않도록 한다. 다짐은 최적함수비에 가까운 상태에서 시행해야 한다.

다. 1층의 다짐이 끝난 후에는 다져진 표면을 갈퀴로 얕게 긁어 요철이 생기게 한 후, 그 위에 노반재를 깔고 다져 나간다.

라. 노반은 종·횡단의 성형, 소정의 두께, 균일한 지지력 및 평탄성이 얻어질 수 있도록 배려해 가면서 마감하여야 한다.

마. 맨홀이나 경계석 주변은 지반침하가 일어나지 않도록 단단히 다진다.

3.2 흙다짐 포장

3.2.1 흙다짐 포장 일반

가. 포장용 흙이 다짐 최적함수비보다 과다하게 수분을 함유하고 있을 때에 포설하여서는 안 된다.

나. 포장용 흙이 다짐 최적함수비보다 너무 적은 수분을 함유하고 있을 때에는 다짐 최적함수비에 가까워지도록 물을 뿌려가면서 포설하거나 다진다.

다. 다져진 노상 또는 하층토의 표면을 갈퀴로 얕게 긁어 요철이 생기게 한 후, 그 위에 포장용 흙을 포설하여 하층토와의 접합이 잘 이루어지도록 한다.

라. 마감층은 흙덩어리가 남지 않도록 갈퀴 등으로 충분히 긁어서 제거한다.

마. 표층 안정제는 소정량을 균일하게 산포하고, 적당히 물을 뿌려가면서 다진다.

바. 계약도면에 특별히 명시되지 않은 경우, 포장면의 경사는 1% 이상으로 한다.

사. 과도한 다짐으로 불투수층이 형성되지 않도록 한다.

아. 포설은 다짐을 고려하여 설계두께에 30%를 더한 두께로 고르게 하여야 한다.

자. 흙다짐포설은 보조기층의 다짐도가 소정의 밀도에 따라 마무리된 후에 실시한다.

차. 포설이 정확하게 된 곳은 다짐을 실시하여 균일한 밀도를 가질 수 있도록 고르게 다진다.

3.2.2 운동장 및 코트

가. 지하배수를 위한 관을 소정의 깊이와 간격으로 설치하고, 소정의 시험에서 적합 판정을 받은 흙을 채운 후 관이 파손되지 않도록 다져야 한다.

나. 코트의 표면경사는 센터라인을 분수령으로 코트의 종축방향으로 5%로 하고, 주위의 측구 부근에서는 약간 더 경사지게 한다.

다. 야구장의 표면경사는 투수 마운드로부터 주위를 향하여 0.5% 이상으로 하고, 투수 플레이트를 소정의 높이까지 성토하면서 내야면과 자연스럽게 연결되도록 마감한다.

라. 선을 그을 때 기준으로 쓰기 위한 가이드 마크는 방부처리를 한 각재(0.45×0.45× 0.3 m)를 지표면 아래 0.02 m 정도까지 박아 넣고 그 위에 나일론 수실이나 고무조각 등을 표식용으로 붙여 지표면 위로 나오도록 설치한다.

마. 선은 가이드 마크를 기준으로 하여 실을 띄우고 그 실을 따라 옆으로 번지지 않도록 긋는다.

3.3 모래 및 쇄석깔기 포장

가. 놀이시설물 주변에 까는 모래는 최대입경 0.004 m 이하의 굵은 모래로 하되, 0.005 m의 체로 쳐서 유해한 물질을 걸러내는 작업을 2회 이상 실시하여야 한다.

나. 원지반과 모래의 치환 및 혼합이 일어나지 않도록 적정 규격의 부직포로 재료분리를 실시한다.

다. 놀이시설물 주변에 모래를 깔 때에는 배수시설에 대해 담당원의 확인을 받은 후에 깔기작업을 시작하고 물빠짐이 좋도록 마감하여야 한다.

라. 주변의 집수정 및 맨홀을 사전조사하여 구배 및 암거, 다발빈의 선형을 감독관의 승인을 득한 후 시행한다.

마. 모래포장은 모래와 양질의 흙을 고르게 혼합한 후 물을 뿌려가면서 다져서 소정의 높이와 두께로 되도록 마감하여야 한다.

바. 쇄석포장은 쇄석을 고르게 포설한 후, 물을 뿌려가면서 다져서 소정의 높이와 두께로 되도록 마감하여야 한다.

마. 표층 안정제는 소정량을 균일하게 산포하고, 적당히 물을 뿌려가면서 다져야 한다.

3.4 흙시멘트 포장

3.4.1 일반사항

가. 연약화된 구역을 확인하기 위해서 시험다짐을 하고 연약화된 구역은 깎아내야 한다.

나. 바닥면에 까는 부직포의 이음 부분은 0.2 m 이상 겹쳐야 한다.

다. 결합재와 흙은 골고루 혼합하여야 한다.

라. 혼합재는 0.2 m 미만의 두께로 연속된 층이 되게 포설하여야 하며, 혼합재를 다진 후에는 즉시 표면을 양생용 피막으로 봉합해야 한다.

마. 하루 일의 종료 시에는 수직한 직선의 시공이음을 만들어 두어야 한다.

3.4.2 포틀랜드 시멘트 혼합재

가. 혼합된 재료는 혼합수를 넣고 2시간 이내에 포설해야 한다.

나. 인접지역의 혼합재 포설은 30분 이내에 시행하여야 하며, 혼합재의 다지기는 포설 후 30분 이내에 시작해야 한다.

3.4.3 석회 혼합재

가. 혼합된 재료는 혼합수를 넣고 16시간 이상 대기하고, 72시간 내에 포설해야 한다.

나. 인접지역의 혼합재 포설은 60분 이내에 시행해야 하며, 혼합재의 다지기는 포설 후 60분 이내에 시작해야 한다.

3.5 투수성 아스팔트 포장

3.5.1 필터층

가. 필터층이 노상토와 섞이지 않도록 하면서 두께가 균일하게 포설하여야 한다.

나. 노상이 연약한 경우에는 담당원의 승인하에 노상 위에 보조기층재를 깔고 필터층과 동시에 다질 수 있다.

3.5.2 보조기층 및 기층

가. 재료의 분리가 일어나지 않도록 균일하게 포설한다.

나. 적절한 밀도와 투수기능이 얻어지도록 다진다.

3.5.3 표 층

가. 아스팔트의 혼합률은 3.5∼5.5%로 하며, 혼합물이 과열되지 않도록 가열하여 혼합하고, 혼합물의 온도가 내려가기 전에 포설하여야 한다.

나. 투수성을 높이기 위하여 프라임코트와 텍코트의 접착층은 두지 않는다.

다. 포설할 때에는 재료분리가 일어나지 않도록 주의하여야 한다.

라. 다짐을 혼합물이 밀리지 않고, 포장 표면의 평탄성이 유지되며, 투수성이 확보되도록 한다.

마. 특별히 명시되지 않은 경우, 포장면의 경사는 2% 이상으로 한다.

바. 최종다짐 완료 후 24시간 이상 통행을 통제하여야 한다.

3.5.4 아스팔트 및 콘크리트 포장

가. 수목에 통기 및 수분, 양분의 흡수가 가능하도록 수목의 뿌리목 주변에서 일정거리 이상 격리하여 포장하여야 한다.

나. 수축, 팽창 등에 의한 파손을 방지하기 위하여, 계약도면에서 명시한 일정간격으로 줄눈을 설치하여야 한다.

다. 산책로 등에 콘크리트 포장을 할 경우 양쪽 모서리는 줄눈용 흙손으로 모따기를 하여야 한다.

라. 콘크리트 포장의 표면은 각 마감의 종류와 특성에 따라 주변과 조화되게 마감하여야 한다.

3.6 색조포장(컬러 세라믹 포장)

가. 포장재를 접착시킬 면의 표면은 접착에 장해가 될 수 있는 불순물이 없도록 정리해야 한다.

나. 접착제와의 혼합은 골재가 건조한 상태에서 한다.

다. 접착제의 경화 중에는 물기가 가지 않도록 주의하고, 먼지 등의 불순물이 포장면에 날아들어 가지 않도록 조치하여야 한다.

라. 접착제의 경화시간 동안 포장면 위로의 출입을 통제하여야 한다.

마. 2개 층으로 나누어 포설할 때에는 하층부 혼합물이 충분히 경화된 후, 담당원의 승인을 얻어 상층부 혼합물의 포설을 시작한다.

3.7 인조잔디 포장

가. 기층부의 종류에 따라 배수가 잘 되도록 조치하여야 한다.

나. 바닥은 요철이 없도록 고르게 다듬어야 하고, 오물, 먼지, 물기, 녹 등을 제거하여 기층부와 잘 접착되도록 하여야 한다.

다. 접착제는 요철이 생기지 않도록 고르게 도포하여야 하며, 접착제가 잔디면에 묻지 않도록 주의하여야 한다.

라. 투수성 인조잔디는 기층부와의 접착에 의하여 투수성이 저하하지 않도록 하여야 한다.

마. 이음 부위에서 단차가 발생하지 않도록 하여야 한다.

바. 외기온도 10℃ 이하에서는 접착제의 접착력이 저하될 우려가 있으므로 담당원과 협의하여 공사를 진행하여야 한다.

사. 접착시킨 후 롤러로 고루 문질러서 접착면에 틈새가 생기지 않도록 하여야 한다.

3.8 잔디블록포장

가. 포장구간 내 토공마감면을 주변경계블록 계획고 및 포장계획고를 감안하여 표면배수 경사가 형성되도록 조정하여야 한다.

나. 다짐대상 지반에 스펀지가 발생할 경우 환토 또는 굴착 후 최적함수비를 맞추어 다짐하여야 한다.

다. 식재구멍에 80%까지 사질양토를 채우고 식재 후 모래로 충진하여 식물뿌리 부분이 블록의 표면 이하에 위치하도록 한다.

3.9 조립블록 포장

3.9.1 완충 및 줄눈용 모래

가. 완충용 모래의 포설은 노상, 노반의 공사가 완료된 시점에서 담당원의 확인을 받아 시작한다.

나. 모래깔기는 1일 시공분량만큼만 깔도록 하고, 고른 모래 위로의 통행을 금지하여야 한다.

다. 완충용 모래는 균일하게 깔아야 하며, 따로 명시되지 않은 경우의 다짐 후 두께는 0.03 m로 한다.

라. 완충용 모래는 물을 뿌린 후 평면진동기로 다진다.

마. 줄눈용 모래는 줄눈에 들어가지 쉽도록 건조한 상태의 것을 사용하고, 평면진동기를 사용하여 줄눈에 충분히 충전한다. 충전 후의 남은 모래는 깨끗이 제거하여야 한다.

3.9.2 블록 표층

가. 배치평면도에 의하여 어쩔 수 없이 블록을 절단하여야 할 경우에는 현장가공으로 마무리한다.

나. 블록을 포설할 때에는 소정의 표면기울기를 얻을 수 있도록 경사에 맞추어 실을 띄워놓고 시공하여야 한다.

다. 블록포장 표면마감에는 평면진동기를 이용하여, 소정의 평탄성이 얻어지도록 마감한다.

라. 경사가 급한 곳에 포설하는 경우에는 끝부분의 마감에 대하여 충분히 주의하여 변형이 생기지 않도록 하여야 한다.

마. 맨홀이나 경계석 주위에 절단된 블록이 들어갈 경우에는 그 마감방법에 대하여 충분히 주의하여야 한다.

바. 블록은 보행 또는 차량의 진행방향을 기준으로 계약도면에 명시된 문양으로 마감부부터 연속적으로 포설하여야 한다. 이때 블록과 블록 사이의 간격을 0.002∼0.005 m를 기준으로 한다.

3.10 평판, 타일 포장

3.10.1 바탕 콘크리트

가. 보조기층은 바탕 콘크리트보다 0.03 m 이상 넓게 하여 다진다.

나. (기초 콘크리트 공사)에 준하여 거푸집 설치, 철근배근, 콘크리트 타설 공사를 한다.

다. 계약도면에 명시된 대로 이음매를 설치한다. 모든 이음매는 마무리된 표면에 직각되게 설치한다.

3.10.2 포장재의 배치

가. 포장패턴, 경계석, 기타 공작물과의 접합 및 신축줄눈을 고려하여 배치한다.

나. 포장재의 배치 시 포장재를 절단하여야 할 경우에는 현장가공으로 한다.

3.10.3 줄 눈

가. 줄눈은 지정된 패턴과 폭에 따라 마무리한다.

나. 치장줄눈을 모르타르로 할 때에는 표면에 모르타르가 부착되지 않도록 주의한다.

다. 타일포장의 신축줄눈이 따로 명시되지 않은 경우에는 발포 폴리에틸렌으로 신축줄눈을 만들고 표면을 폴리설파이드계 코킹재로 마감한다. 이때 신축줄눈에 의하여 둘러싸이는 부분은 0.01 m 이하가 되도록 한다. 또한 바탕 콘크리트 신축줄눈과의 위치를 정확히 맞추도록 한다.

3.10.4 설 치

가. 소정의 표면기울기가 되도록 기준실을 띄워 정확히 설치한다. 넓은 면적을 포장할 때에는 측구나 맨홀의 위치를 고려하여 경사를 잡을 방향을 결정한다.

나. 판석깔기는 고름 모르타르 바탕 위에 붙임 모르타르를 표고 기준틀에 따라 판석을 깐다. 모르타르가 잘 밀착되도록 나무망치로 두들겨 넣고 수평되게 한 후에 판석 사이에 붙임 모르타르를 빈틈없이 채워넣어 마무리한다.

다. 포석깔기는 바탕 모르타르가 굳기 전에 세척된 포석을 올려놓고 밀착되게 가볍게 두들겨 넣는다. 모르타르가 흘러내리지 않을 정도로 물을 뿌려 포석을 고정시킨 다음 연결 모르타르로 줄눈채움 작업하여 마무리한다.

라. 타일붙이기는 바탕면 청소 및 물축임 후 붙임 모르타르를 펴고 기준실에 따라 타일을 붙인다. 붙임 모르타르가 배어 나올 정도로 고무망치로 가볍게 두들기면서 줄눈이 바르고 수평되게 붙여 나간다.

마. 통나무를 잘라서 포장을 할 때에는 지름이 작은 쪽이 위를 향하게 한다. 바탕 모르타르면의 경사는 배수를 고려하여 약간 급하게 잡고, 포장면의 주변부에는 물빼기 구멍을 설치한다.

바. 불규칙한 형상의 자연석 평판을 깔 때에는 가설치한 후 이 설치를 하도록 한다.

사. 석재나 타일 마감 후 표면에 묻은 모르타르를 닦아내고, 양생될 때까지 통행을 금지한다.

3.11 자갈면 노출 포장

3.11.1 씻어내기에 의한 자갈면 노출 포장

바탕 콘크리트에 모르타르(1 : 3)를 두께 0.2 m 이상 깔고 그 위에 자갈과 모르타르를 깐 후 브러시질 등으로 자갈면을 노출시키면서 자갈의 위치를 조정해 가면서 마감을 한다.

3.11.2 자갈박기 포장

바탕 콘크리트 위에 모르타르(1 : 3)를 두께 0.2 m 이상 깐 후, 자갈을 세워서 박고 흙손으로 표면을 마감한다.

3.12 합성수지 포장

가. 접착제의 접착 효과가 저하되지 않도록 오물, 먼지, 모래, 녹, 물기 등을 제거한 후 접착제를 도포하여야 한다.

나. 접착제, 용제 등을 밀폐되지 않은 곳에서 보관되어 접착력이 떨어지는 것을 사용해서는 안 된다.

다. 접착제는 용제와 잘 혼합하여 균질되게 하여야 하며, 고르게 도포하여 요철이 생기지 않도록 한다. 이때 화기에 특히 주의하여야 한다.

라. 외기온도 10℃ 이하에서는 접착제의 접착력이 저하될 우려가 있으므로 담당원과 협의하여 공사를 진행하여야 한다.

3.13 기타 포장류

3.13.1 고무바닥 타일 깔기

가. 원지반 다짐 후 콘크리트 포장에 준하여 지정된 두께로 콘크리트를 타설하고 양생한 다음 바탕 위에 고무바닥 타일을 깔고 완전히 접착시켜 마감한다.

나. 구조물에 접하여 도려낸 부위는 틈새가 최소화되도록 하고, 틈새 폭이 0.01 m를 초과하는 경우 타일을 걷어 내고 다시 깔도록 하며, 틈새는 실란트로 채워 마감한다.

3.13.2 잔디 블록

고압 합성수지 블록재 등을 잔디와 같이 사용하여 바닥포장을 할 경우에는 미끄럼이나 바닥의 요철 등이 생기지 않도록 하여야 한다.

3.13.3 프리캐스트 콘크리트

프리캐스트 콘크리트 부재가 설치되는 지지구조물의 모든 부분과 상태를 조사하고, 각 부재의 설치정밀도를 결정짓는 정착물의 위치를 확인해야 한다.

가. 프리캐스트 콘크리트 부재의 운반과 설치는 손상을 주지 않는 요령으로 해야 한다.

나. 프리캐스트 콘크리트 부재는 하중보다 용량이 큰 기계적인 양중장비를 써서 제자리에 정밀하게 세워 설치해야 한다.

다. 프리캐스트 콘크리트 부재는 항시 직립위치를 유지하게 하고, 부재의 조작은 부재에 과재응력이나 손상이 가지 않는 요령으로 명시된 양중장치나 쿠션 패드를 써서 해야 한다.

라. 프리캐스트 콘크리트 부재는 명시된 설치허용조사로 설치해야 하며, 명시된 순서에 따라 설치해야 한다. 부재는 힘의 편심작용이 없게 정확한 위치에 세우고, 지지면과 완전하고 균등하게 접합되게 해야 한다.

마. 정착과 접합을 위한 용접과 볼팅은 명시된 대로 해야 한다.

바. 설치가 완성되었을 때 부재가 수직, 수평 및 사각, 선에 맞고 각과 연단은 관련구조물선에 평행해야 한다.

사. 명시된 대로 소음방지 봉함을 하고, 밀착된 봉함이 되도록 15% 이상 압축해야 한다.

아. 명시된 대로 충전재를 제자리에 설치해야 한다.

3.14 경계블록

가. 벽돌, 블록, 목재류, 강재류, 합성수지류 등의 각 재료별 경계처리는 계약도면 및 공사시방서에 따른다.

나. 곡선 부위는 미관을 고려하여 곡선형 제품을 사용하여야 한다.

다. 도로경계석은 차량의 바퀴가 올라설 수 없는 높이로 하여야 한다.

라. 서로 다른 재료의 연결부에서는 재료의 뒤섞임이 생기지 않도록 높이를 조절하여야 한다.

마. 경계블록의 마무리면은 평탄성을 유지하여야 하며, 줄눈 모르타르의 강도가 충분히 확보된 후가 아니면 경계블록의 뒤채움을 해서는 안 된다.

20035 관수공사

1. 일반사항

1.1 적용 사항

가. 이 시방서는 관수시설에 관련되는 재료의 조달과 정상적으로 작동되도록 하는 공사에 적용한다.

1.2 관련 시방절

가. 이 공사와 관련이 있으나 이 시방서에서 언급되지 않은 사항은 이 시방서 20015 부지조성공사, 20040 식재공사, 20065 옥상 및 벽면녹화 공사, 20070 생태복원공사 등의 다른 시방서의 해당 사항에 따른다.

1.3 참조 표준

이 시방서에서 인용된 표준은 이 시방서의 일부를 구성한다. 년도 표시가 있는 경우에는 해당 년도의 표준을 적용하며, 년도 표시가 없는 경우에는 가장 최근 표준을 적용한다.

KS D 4311	덕타일 주철관

KS D 3595	일반 배관용 스테인리스강관

KS M 3401	수도용 경질 폴리염화비닐관

1.4 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 한다. 특별히 명시하지 않은 경우의 제출시기는 해당 공사 착공 전으로 한다.

1.4.1 인허가자료

가. 급수, 전기관련 인허가 서류

나. 배관에 따른 도로굴착 시 도로굴착허가서류

1.4.2 제품관련자료

가. 공사에 사용될 자재 및 계기류의 제품자료 및 설치지침서

나. 관수장치의 운전 및 유지관리 지침서

1) 취수원을 상수로 할 경우

2) 취수원을 우수저류지나 폰드 물을 사용할 경우

다. 관수장치 보수용 자재를 계약서의 내용에 따라 제출하여야 한다.

라. 동파방지, 에어통제장치, 동절기 관리방안계획서

1.4.3 시험 분석자료

가. 동력장치의 출력기기 효율에 대한 시험성과표

나. 수압시험 실시기록, 통수시험 실시기록, 펌프작동시험 성적표 등

1.4.4 시공도

가. 관의 가공, 접합방법 및 매설방법에 대한 시공상세도

나. 수리계산 및 용소수요량 산출서

다. 관로 배치평면도 및 지장물 조사서

CCTV장치

1.4.5 공사 준공 시

가. 매설물의 실제 위치도와 유지관리지침서

나. 수급인은 관수설비를 공급할 때와 동일한 가격과 품질의 유지보수품을 제공하여야 한다. 유지보수품의 수량은 밸브를 포함하는 관수설비의 5%에 상당하고, 각 부품은 1개 이상이어야 한다.

다. 관수 시설의 시운전계획서를 제출한다.

1.5 사전검사

수급인은 이 공사와 관련된 다음 사항의 확인 검사에 대한 담당원의 지시를 이행하여야 한다.

1.6 운반, 저장 및 취급

수급인은 공사용 기자재의 운반, 저장, 취급 시 다음의 사항을 준수하여야 한다.

가. 각종 계기류는 충격방지용 포장재에 포장된 채로 운반하여야 한다.

나. 각종 배관용 자재는 빗물에 젖거나 오물에 의해 더럽혀지지 않도록 조치하여야 한다.

다. 플라스틱 접착제는 제조업체의 저장요건에 맞추어 서늘한 곳에 저장한다.

1.7 측 정

배관과 관련하여 시공되는 터파기, 되메우기, 기타 부대공사는 배관공사가 완료된 길이에 따라 별도 산정한다.

1.8 시공허용오차

가. 누수율 : 단위시간당 관수량의 1/100,000 이내

나. 각종 기기 및 기구류의 오동작이 없어야 한다.

다. 살수량은 토양의 침투율 이내로 하여 표면유수가 없어야 한다.

라. 관매설깊이 : 0.05 m 이내

마. 매설형 살수기의 매설깊이 : 지표면에서 5 mm 이내

1.9 환경관리 및 친환경시공

1.9.1 일반사항

가. 환경에 관한 법규를 준수하고 건축물의 전과정(생애주기) 관점에서 조경공사 단계에서 의도하는 환경관리 및 친환경시공의 목표가 달성되도록 재료 및 시공의 사양을 정한다.

나. 이 절은 관수공사에 있어서 환경관리 및 친환경시공을 실시하는 경우에 적용하며 이 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01045(환경관리 및 친환경시공)에 따른다.

1.9.2 재료선정

가. 환경마크, 탄소마크, 환경성적표지 등 공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

나. 조경공사의 자재는 전과정에 걸쳐 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 적은 것을 우선적으로 선정한다.

다. 각종 수목 및 조경재료, 그리고 조경공사에 필요한 가설자재 등은 현장 인근에서 생산되어 운송과 관련한 환경영향이 적은 것의 우선 선정을 고려한다.

라. 조경공사에 사용되는 재료는 순환자원의 사용을 적극적으로 고려한다.

마. 적절한 구매계획을 수립하여 잉여 자재가 발생하지 않도록 하고, 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 것을 우선적으로 사용한다.

1.9.3 시공방법 선정

가. 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경 공법의 사용을 고려한다.

나. 천연자원의 보전에 도움이 되는 공법, 폐기물 배출을 최소화하는 공법을 사용한다.

다. 공사용 장비 및 각종 기계·기구는 에너지 효율 등급이 높고 배출 등에 의한 환경영향이 적은 것을 우선적으로 사용한다.

라. 공사용 용수는 사용량을 측정하여 환경관리계획에 포함될 수 있도록 하고, 공사의 품질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 우수 및 중수를 적극적으로 활용한다.

마. 공사에 따르는 소음, 진동 등의 억제에 도움이 되는 건설장비, 기계·기구를 우선적으로 이용하고 작업장소 또는 작업시간을 충분히 고려하여 공사현장의 주변지역 환경 및 작업환경의 보전에 노력한다.

바. 공사장에서 발생하는 폐기물, 분진, 오수 및 배수 등이 공사장과 공사장 인근의 대기, 토양 및 수질을 오염시키지 않도록 적절히 계획하고 조치하여야 한다.

사. 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선적으로 사용하고, 부득이하게 발생한 폐기물 및 이용할 수 없게 된 재료의 재자원화를 고려한다.

아. 반출, 폐기 및 소각되는 경우에는 이에 따른 처분 및 운송에 의한 환경영향을 최소화할 수 있도록 고려한다.

2. 자 재

자재는 제조업자의 표준제품으로 하고, 제조업자의 성명과 주소 모양 모델 및 일련번호를 표시한 명판이 붙어 있어야 한다.

2.1 예비비품

수급인은 자재조달계획의 승인 후 자재목록과 구매예정 수량을 작성 보관하고 총사용량의 10% 이상, 항목당 최소 2개 이상의 예비부품을 구비하여야 한다.

2.2 관 재

관망은 한국산업표준에 적합한 스테인리스 강관이나 염화비닐관 혹은 주철관을 사용하고, 특히 주관망은 동파방지의 내구성이 뛰어난 스테인리스나 주철관을 사용한다.

2.2.1 주철관

주철관은 KS D 4311에 적합한 수도용 원심력 덕타일 주철관을 사용한다.

2.2.2 아연도 강관

아연도 강관은 수도용 아연도금 강관 중 백관을 사용한다.

2.2.3 스테인리스 강관

스테인리스 강관은 KS D 3595에 적합한 일반배관용 스테인리스 강관으로 한다.

2.2.4 염화비닐관

염화비닐관은 KS M 3401에 적합한 수도용 경질 염화비닐관으로 한다.

2.3 이음재

가. 내경 0.05 m 이상인 관의 연결은 링조인트나 나사조인트 또는 제조회사가 추천하는 연결부품을 사용하고 내경 0.04 m 이하는 소켓이나 커플링을 사용한다.

나. 0.75 g/m²에에 누수가 없는 것이어야 한다.

2.4 밸브류

0.75 kg/m²에서 누수가 없는 것이어야 한다.

2.5 살수기

충격에 강한 재질이어야 하며, 20%의 수압변화에도 설계 토출량이 분사되는 것이어야 한다.

2.6 기타 재료

가. 밸브 박스는 주철제 도난방지용 뚜껑이 붙은 것으로 한다.

나. 수도미터 박스는 콘크리트체 도난방지용 뚜껑이 붙은 것으로 한다. 단, 수도미터의 구경이 0.04 m 이하인 경우는 주철제 박스로 할 수 있다.

다. 계약도면에 명기되지 않은 경우 퀵커플링용 박스는 주철제 도난방지용 뚜껑이 붙은 것으로 한다.

라. 펌프는 운전 시 지나친 소음이 없고, 유류의 혼입이 없는 구조이어야 한다.

마. 전동기는 교류삼상유도전동기로 한다.

3. 시 공

3.1 배 관

3.1.1 사전 검토사항

배관의 시공에 앞서 각종 관 및 기기와의 관련사항을 검토하고, 경사를 고려하여 위치를 결정한다.

3.1.2 가 공

가. 관은 관의 길이방향에 대하여 직각으로 절단하고, 절단 시 관을 찌그러뜨리지 않는 기구를 사용하여야 한다. 절단 부위는 관의 내·외부가 벗겨지거나, 거스러미가 붙어 있지 않도록 마무리한다.

나. 배관용 강관은 절곡기 등에 의한 구부림 가공을 하지 않는다.

3.1.3 배 관

가. 파이프 배관은 현장여건을 고려하여 최소수량의 연결관을 사용한다.

나. 파이프 설치 시 공기가 잔류할 수 있는 높은 지점이나 역류를 유발시킬 수 있는 역경사가 발생하지 않도록 한다.

3.1.4 관의 접합

가. 강관의 나사접합은 나사부위에 방식용 실링제 혹은 실링테이프를 사용하여 누수를 차단한다. 노출된 나사부위나 표면이 손상된 곳에는 녹막이 페인트를 칠하고 방식용 실링제는 위생상 무해한 합성수지계 제품을 쓴다.

나. 나사내기에 쓰이는 절삭유는 위생상 해가 없는 수용성으로 한다.

다. 염화비닐관의 접합은 접착제를 사용하는 냉간공법으로 한다. 접합후 5시간 이내에는 접합부위에 힘을 가해서는 안된다.

라. 폴리에틸렌관의 접합은 기계적 접합을 표준으로 한다.

3.1.5 토 공

가. 관매설을 위한 터파기는 계획고와 기울기를 유지하고 인력으로 주의깊게 마무리한다. 도면에 특별히 명시되지 않은 경우에는 바닥면의 폭을 관의 바깥지름보다 0.3 m 이상 넓게 파고, 수직 터파기로 한다.

나. 되메우기는 다짐 최적함수비에 가까운 토양수분상태에서 시공하고 시공 후 침하가 발생하지 않도록 다진다. 더돋우기는 20%로 한다.

3.1.6 매설 깊이

동결심도를 고려하여 호칭경 0.5 m 이하는 지표면으로부터 0.45 m 이상의 깊이에 매설하고 호칭경 0.65 m 이상은 0.75 m 이상의 깊이에 매설한다. 도로부분의 매설깊이는 차도 부분에서는 1.2 m 이상, 보도부분에서는 1 m 이상으로 한다.

3.1.7 기 타

가. 시공 중에는 개구부로 이물질이 들어가지 않도록 플라그 등으로 막아 놓는다.

나. 배관에 누수현상이 발견되었을 때에는 관 혹은 연결구를 교체하여 수리하여야 한다. 코킹재 등으로 수리하여서는 안 된다.

3.2 살수기 및 점적관수기의 설치

3.2.1 살수기의 설치

가. 살수기는 누수되지 않도록 설치하여야 한다.

나. 관수지역 외로 물이 분사되지 않도록 분사각도를 조절하여야 한다.

다. 살수반경과 토출량을 점검하여 규격에 미달하는 살수기는 교체하여야 한다.

3.2.2 점적관수기의 설치

가. 점적관수기는 누수되지 않도록 설치하여야 한다.

나. 표면유수가 생기지 않도록 점적관수기의 토출량을 조절하여야 한다.

다. 점적관수기 밑에 수직적인 홈이 파이지 않도록 유의하여야 한다.

3.3 기기의 부착

가. 펌프 및 전동기는 빗물이나 이슬에 젖거나 침수될 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.

나. 펌프는 받침대를 기초위에 수평으로 놓고, 펌프와 전동기를 수평, 직선이 되게 조정하고, 볼트로 고정하여 설치하여야 한다.

다. 물탱크는 만수 시의 중량과 외부의 충격에 대하여 충분히 견딜 수 있는 구조로 안전하고 견고하게 설치하며, 이 때 탱크 주위 배관의 중량이 직접 탱크에 걸리지 않도록 지지하여야 한다.

라. 펌프실, 기계실 등에는 시공업자명, 완성 년월일, 탱크의 유효용량, 사용기기의 품명, 규격, 제작소명 및 조작용 배관계통을 기록한 플라스틱제 도판을 부착하여야 한다.

3.4 제어장치/관수장비/기계실

가. 펌프의 전동기에는 과전류 및 누전 차단기를 부착하여야 한다.

나. 3.7 kW 이상의 유동전동기는 기동장치가 부착되어 있어야 한다.

다. 전동기의 철재 받침 및 펌프의 외벽상자는 접지공사를 하여야 한다.

라. 펌프류의 기초는 기기의 중량 및 외력에 견디고, 설치에 충분한 지지면적을 가지는 철근 콘크리트제로 하며, 지지력이 있는 지반 위에 설치하여야 한다. 기초의 높이는 지표면보다 0.3 m 높게 하는 것을 표준으로 하며, 표면을 모르타르마감으로 하고, 주위에 배수구를 설치하여 호칭직경 0.03 m 이상의 염화비닐관으로 외부의 배수로에 연결시킨다.

마. 침수방지를 위해 패널은 지하로 하지 않는다.

바. 기계실에는 통풍을 위한 시설 및 장치를 갖추고 펌프의 동파를 방지하기 위한 보온 및 난방을 하여야 한다.

3.5 시 험

3.5.1 수압시험

가. 배관이 끝난 후 되메우기 전에 실시하고, 모든 기구의 부착이 끝난 후에도 실시한다. 관수대상 지역이 넓을 때에는 담당원의 허락을 얻을 부분적으로 실시할 수도 있다.

나. 수압시험은 담당원의 입회하에 최고사용수압의 1.5배의 수압에서 30분 이상 실시하여 누수가 없는 것을 확인하여야 한다. 수압시험 실시 기록은 담당원에게 제출한다.

3.5.2 통수시험

가. 모든 기구류의 부착이 끝난 후 관수 구간별로 통수시험을 해야 한다.

나. 통수시험은 맑은 물이 토출될 때까지 실시하며 이 때 오물 등에 의하여 막히지 않도록 유의하여야 한다. 통수시험이 끝난 후 통수시험 실시 기록을 담당원에게 제출한다.

3.5.3 기 타

가. 펌프에 대한 작동시험을 실시하고, 그 시험성적표를 담당원에게 제출하여야 한다.

나. 전동기는 절연저항 및 절연내력에 대한 측정시험을 실시하고, 그 시험성적표를 담당원에게 제출하여야 한다.

3.6 시험 및 교육

설치가 완료되면 담당원 또는 담당원이 지정하는 관리운영자에게 작동을 시범하고 관리운영에 대하여 교육하여야 한다.

20040 식재공사

1. 일반사항

1.1 적용 사항

가. 이 시방서는 조경식재공사에 적용한다.

나. 식물재료의 식재와 잔디류를 제외한 지피류와 초화류의 식재 및 수목의 이식, 식재 후 관리 등의 공정을 포함한다.

다. 노거수, 대형목 등 특수목에 대한 굴취, 운반, 식재는 공사시방서에 따른다.

1.2 관련 시방절

가. 이 공사와 관련이 있으나 이 시방서에서 언급되지 않은 사항은 이 시방서 20015 부지조성공사, 20020 배수공사, 20035 관수공사, 20065 옥상 및 벽면녹화 공사, 20070 생태복원공사 등의 다른 시방서의 해당 사항에 따른다.

1.3 참조 표준

이 시방서에서 인용된 표준은 이 시방서의 일부를 구성한다. 년도 표시가 있는 경우에는 해당 년도의 표준을 적용하며, 년도 표시가 없는 경우에는 가장 최근 표준을 적용한다.

KS F 4409	원심력 유공 철근 콘크리트관

KS M 3404	일반용 경질 폴리염화비닐관

1.4 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 한다. 특별히 명시되지 않은 경우의 제출시기는 해당 공사착공 전으로 한다.

1.4.1 현황관련 자료

시공에 앞서 수급인은 공사지역의 지하매설물 및 지장물을 조사하고 이의 조치 계획을 작성하여 제출한다.

1.4.2 제품관련 자료

가. 토양개량제, 비료, 약제, 기타 처리제의 품질입증을 위한 자료, 제품이 바뀔 때마다 밀봉용기 1포의 견본품

나. 반입 표토의 견본 1 m³. 취토장 및 토양조건이 바뀔 때마다 취토장의 현황도 및 사진

다. 지주목재료, 멀칭재 등 기타 잡재료의 견본품

1.4.3 시험 분석자료

가. 수급인은 수목의 생장을 좌우하는 토성을 시험하고, 시험성적 자료와 그 조건을 개선하기 위한 제안서를 제출하여야 한다.

나. 그외의 제품 또는 자재는 공인기관의 시험성적서 또는 자체시험성적서

다. 기후분석자료

돌관공사, 혹서기, 동절기 시공이 증가하는 추세이므로 이에 대한 대책을 강구하여 기후분석 계획서를 제출한다.

1.4.4 재료조달계획서

식물재료의 반입 시 산지, 규격, 수량 등 관련사항이 명기된 재료조달계획서

1.4.5 시공도

가. 경관목 식재 시에는 2개소 이상의 측점에서 입체 투시도를 제작·제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 지주설치 시공상세도 및 단근작업 뿌리돌림 계획서를 제출한다.

다. 식재기반 조사원

수목식재 대상지에 지하수위, 배수, 염도분석 보고서를 제출한다.

1.4.6 공사 준공 시

가. 공사일자, 식재식물 목록, 그간의 유지관리기록과 함께 식재식물의 정상적인 생육을 유지시키기 위한 관리방법, 관리스케줄 등을 포함한 각종 자료를 준공서류와 함께 제출한다.

나. 준공검사 시에 개화상태를 볼 수 없는 화목류는 동일 품종 수목의 컬러 개화사진을 주농사진첩에 첨부하여 제출한다.

1.5 사전검사

수급인은 이 공사와 관련된 다음 사항의 확인 검사에 대한 담당원의 지시를 이행하여야 한다.

1.5.1 식물재료

가. 식물재료는 현장반입 전 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입 후 검사로 구분하여 시행하며 수종, 품질 및 규격 등은 현장도착 즉시 철저히 시행하여 합격 여부를 판정한다.

나. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반 포장 등의 취급이 나쁘거나 굴취 후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다.

다. 식물재료는 수종 및 성상에 따라 철저히 검사한다. 담당원이 지엽 등의 제거를 지시할 경우에는 제거 전의 규격을 확인할 수 있도록 사진 등으로 촬영하여 제출하여야 한다.

1.5.2 표토채취장

표토채취장은 채취 전에 담당원의 검사를 받고 승인받아야 한다.

1.6 운반, 저장 및 취급

1.6.1 비료, 농약 등

무게, 구성성분, 생산자 등이 명기된 방수포장상태로 운반하여야 하며, 약재의 취급 및 보관요령에 대한 주의사항을 숙지하고 준수하도록 한다.

1.6.2 식물재료

가. 충격으로 뿌리분의 파손, 흙털림, 세근절단 등이 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

나. 식물재료는 식재 직전에 현장으로 운반하여야 하며 식재될 때까지 양호한 상태를 유지하여야 한다.

다. 반입하여 당일 식재하지 못한 경우에는 잎, 뿌리 등의 건조방지를 위하여 강한 바람이 없고 햇볕이 차단되며, 배수가 양호하고 약간 습한 장소에 보관하여야 한다.

1.6.3 표 토

가적치기간 중 방재와 배수대책을 강구하고 피복하여 저장한다. 가적치의 두께는 3 m를 초과할 수 없다. 또한, 유기질이 풍부한 표토를 보존하기 위해 표토부패 방지계획서를 제출한다.

1.7 측 정

토사는 다짐상태의 수량으로서, 도면에 표시된 단위체적으로 산정한다.

1.8 공사종료

표토, 객토의 준비로부터 식재, 지수목설치, 관수 및 뒷정리가 끝난 상태에서 담당원의 승인을 받았을 때를 공사의 종료로 인정한다. 단 계약조건에 일정기간의 유지관리가 포함되었을 경우에는 계약된 유지관리기간이 종료되는 때로 한다.

1.9 환경관리 및 친환경시공

1.9.1 일반사항

가. 환경에 관한 법규를 준수하고 건축물의 전과정(생애주기) 관점에서 조경공사 단계에서 의도하는 환경관리 및 친환경시공의 목표가 달성되도록 재료 및 시공의 사양을 정한다.

나. 이 절은 조경공사에 있어서 환경관리 및 친환경시공을 실시하는 경우에 적용하며 이 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01045(환경관리 및 친환경시공)에 따른다.

1.9.2 재료선정

가. 환경마크, 탄소마크, 환경성적표지 등 공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

나. 조경공사의 자재는 전과정에 걸쳐 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 적은 것을 우선적으로 선정한다.

다. 각종 수목 및 조경재료 그리고 조경공사에 필요한 가설자재 등은 현장 인근에서 생산되어 운송과 관련한 환경영향이 적은 것의 우선 선정을 고려한다.

라. 조경공사에 사용될 수목 등의 자재는 현장의 기존 수목 중 생존 가능성이 높은 것들을 골라 선정한다.

마. 조경공사에 사용되는 재료는 순환자원의 사용을 적극적으로 고려한다.

바. 적절한 구매계획을 수립하여 잉여 자재가 발생하지 않도록 하고, 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 것을 우선적으로 사용한다.

1.9.3 시공방법 선정

가. 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경 공법의 사용을 고려한다.

나. 천연자원의 보전에 도움이 되는 공법, 폐기물 배출을 최소화하는 공법을 사용한다.

다. 공사용 장비 및 각종 기계·기구는 에너지 효율 등급이 높고 배출 등에 의한 환경영향이 적은 것을 우선적으로 사용한다.

라. 공사용 용수는 사용량을 측정하여 환경관리계획에 포함될 수 있도록 하고, 공사의 품질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 우수 및 중수를 적극적으로 활용한다.

마. 공사에 따르는 소음, 진동 등의 억제에 도움이 되는 건설장비, 기계·기구를 우선적으로 이용하고 작업장소 또는 작업시간을 충분히 고려하여 공사현장의 주변지역 환경 및 작업환경의 보전에 노력한다.

바. 공사장에서 발생하는 폐기물, 분진, 오수 및 배수 등이 공사장과 공사장 인근의 대기, 토양 및 수질을 오염시키지 않도록 적절히 계획하고 조치하여야 한다.

사. 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선적으로 사용하고, 부득이하게 발생한 폐기물 및 이용할 수 없게 된 재료의 재자원화를 고려한다.

아. 반출, 폐기 및 소각되는 경우에는 이에 따른 처분 및 운송에 의한 환경영향을 최소화할 수 있도록 고려한다.

자. 수목 시공 후 노출된 부분에 부착된 흙, 기타 불순물을 청소할 시 현장 및 인근의 수질, 수목식생, 표토층 및 생태계를 최대한 보존하기 위한 적절한 공법 및 조치를 취한다.

2. 자 재

2.1 토양관련 재료

2.1.1 표 토

가. 표토는 양질의 현장발생표토 또는 반입표토를 사용하되 토양시험결과 부적합 토양으로 판정된 경우에는 적정 수준으로 개량하여 사용한다.

나. 표토의 기준을 O층과 A층의 사질양토(pH 5∼7, 유기함량 2% 이상)로서 0.4 m까지의 깊이를 표준으로 하되 현장 여건에 따라 담당원과 협의하여 조정할 수 있다.

다. 표토는 계약도면에 지정된 장소에서 채취 수집하여야 하며, 계약도면에 채취 장소가 명시되지 않아야 수급인이 선정하는 경우에는 사전에 담당원의 승인을 받아야 한다.

2.1.2 식재하부용토

가. 식재하부용토는 배수가 양호한 양질의 현장발생토 또는 반입토사를 사용한다.

나. 식재하부용토는 점토덩어리, 쓰레기, 기타 유해물질을 포함하지 않아야 하며, 따로 지정하지 않은 경우의 품질기준은 75 ㎛ 통과량 25% 이하, 자갈의 최대치수 0.05 m 이상인 사질양토로 한다.

2.1.3 인공토양

식물생육에 필요한 필수영양분과 미량요소들을 고르게 함유하고 흙 또는 기타 불순물이 혼합되지 않은 것으로서 토성기준은 설계도서에 따른다.

2.1.4 토양개량제

가. 흙, 잡초종자 또는 기타 불순물이 혼합되지 않아야 한다.

나. 모래는 중사(0.00025∼0.0005 m) 성분이 80% 이상이 강모래이어야 한다.

다.  이탄토는 건조시켜 잘게 부수어 No. 10 체거름에 90% 이상, No. 100 체거름에 50% 이상 통과될 수 있어야 한다.

라. 피트모스는 나무뿌리, 돌 등과 같은 이물질이 섞이지 않은 것으로서 건물 중 대비 85% 이상의 유기물질을 함유하고 pH(4∼5)의 기준을 충족하여야 한다. 포장으로 인하여 뭉쳐진 상태의 것을 잘게 부수어 사용한다.

마. 부숙톱밥은 완전하게 부숙되어야 하며, 유해물질이 혼합되지 않아야 한다.

바. 펄라이트, 버미큘라이트, 제오라이트 등의 광물성 토양개량제는 입도가 균일하고, 쉽게 부스러지지 않아야 한다.

사. 석회는 탄산석회, 생석회, 소석회 등을 이용하되 No. 10 체거름에 90% 이상, No. 100 체거름에 50% 이상 통과될 수 있어야 한다.

2.2 수목재료

2.2.1 종 류

계약도면에 명시된 품종으로 한다.

2.2.2 품 질

가. 식재 예정지역과 유사한 기후조건에서 재배·성장한 것이어야 한다.

나. 농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다.

다. 야생 굴취목을 반입식재하는 경우는 담당원의 승인을 득한 후 식재한다

라. 지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

마. 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염 정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

2.2.3 규 격

가. 조형수목의 흉고 또는 근원직경 등이 지정 규격 이상인 경우는 담당원의 승인하에 수고 및 수관폭을 지정규격 이내로 할 수 있다.

나. 가로수용 수목은 지하고가 1.6 m 이상의 범위의 것으로서, 수고가 균일(최대편차 : 1 m)하여야 한다.

다. 규격의 허용오차는 －10% 이내로 한다. 단, 허용오차에도 불구하고 규격미달의 수목이 각 수종별, 규격별 총수량의 20%를 초과할 수 없다.

라. 특수 수형과 용기(컨테이너) 재배품의 규격기준은 계약도면을 따른다.

2.2.4 수종 및 규격의 변경

식재수목의 수종 또는 규격의 변경은 수급인이 관련 증빙자료를 첨부, 서면으로 요구하여 담당원의 승인을 받지 않는 한 허용되지 않는다.

2.3 잔디재료

2.3.1 뗏장

가. 잡초가 없고 건강하며 품질이 균일하여야 하고, 뗏장이 견실하여 운반과정에서 발생하는 유실이 5% 이내이어야 한다.

나.  일반 뗏장은 재배단지로서 규격은 공사시방서에 규정이 없는 한 가로 0.3 m, 세로 0.3 m, 두께 0.03 m의 것을 기준으로 한다.

다. 롤형 잔디는 잔디수확기(sod cutter)로 떼어내어 롤형태로 말은 잔디 규격은 1 m² 이상의 것을 사용한다.

라. 현장에 도착된 뗏장은 1일 이내에 식재하는 것을 원칙으로 한다.

2.3.2 포복경 및 지하경

가. 뗏장에서 흙을 털어내서 용도에 맞게 절단하여 사용한다.

나. 포복경과 지하경의 제조를 위한 잔디의 초장은 0.025∼0.03 m 이상, 0.05 m 이하로 한다.

다. 마르거나 신선도가 떨어지지 않은 것이어야 한다.

2.3.3 잔디씨

가. 파종용 잔디종자는 담당원의 승인을 받아 구매하고, 혼합잔디의 혼합률은 설계도서에 따르거나 승인된 배합 비율로 하여야 한다.

나. 국내 자생종 Zoysia 계통과 Poa의 잔디종자는 2년 이내에 채취된 것으로 발아촉진처리된 것이어야 하며, 발아율 60% 이상, 순량률 98% 이상이어야 한다.

다. 도입잔디는 발아율 80% 이상, 순량률 98% 이상이어야 한다. 혼합종자를 사용할 경우에는 자재조달계획서를 제출할 때 원산지증명과 품질보증서를 첨부하여야 한다.

2.4 지피, 초화류

2.4.1 규 격

종자는 중량단위의 수량과 순량률 및 발아율로, 초화류의 규격은 분얼, 포기 등으로 표시한다.

2.4.2 품 질

가. 종자, 구근 등은 신선하고 병충해가 없으며 혼합되지 않고 발아율이 양호한 것이어야 한다.

나. 모종은 지정된 규격에 고유의 성상을 유지하고 줄기, 잎, 꽃눈의 발달이 양호하며, 병충해 상해가 없고 근계가 충실히 보호되어 식재 후 건전한 생육을 유지할 수 있는 것이어야 한다.

다. 포트(pot)식재 초화류는 지엽이 치밀하고 생육이 왕성한 초종을 반입하여야 한다.

2.5 농약, 비료, 생장조절제 등

2.5.1 품 질

가. 농림부의 제조공정과 농림부 장관의 등록을 받은 것이어야 한다.

나. 각각의 품질에 적합하고 상품명, 종류(성분소), 용량이 명시된 용기에 밀봉된 것으로서 변질되지 않고 유효기간 내의 것이어야 한다.

2.5.2 유기질비료

가. 퇴비, 부엽토, 부숙왕겨, 부숙톱밥 등의 부산물 비료로서 유해물, 기타 다른 물질이 혼입되지 않으며, 충분히 건조하고 완전부속된 것으로서 건물 중 대비 유기물함량이 25% 이상인 것이어야 한다.

나. 골분(bone meal)은 가공되지 않은 것으로서 곱게 분쇄되고, 최소 3%의 질소성분과 20%의 인산성분이 함유된 것이어야 한다.

다. 퇴비는 계분, 돈분 및 우분에 왕겨 또는 짚을 섞어 완전부숙, 건조시킨 것으로 덩어리가 지지 않은 것이어야 한다.

2.5.3 화학비료

질소, 인산, 칼리 등의 성분이 함유된 복합비료나 질소, 인산, 칼리 등의 각각 단독 성분을 지닌 것이어야 한다.

2.5.4 수목 생장조절제

가. 발근촉진제 : 루톤, IBA, 홀멕스콘 등

나. 증산억제제 : 크라우드커버, 그리너, 월트 푸르트 등

2.5.5 상처유합제

절단부의 상처바르기는 석회유황합제, 검은 아스팔트 부패방지 도료 또는 보르도액과 아마인유 및 흑색안료를 혼합한 검은 도료를 칠한다.

2.5.6 부패부 수간처리제

살충제, 살균제, 방부제, 방수제, 동공충진제, 인공수피 등의 부패부 수간처리제는 제조압자의 지침에 따르며, 수목생장에 지장이 없어야 한다.

2.6 피복재

2.6.1 폴리에틸렌 필름

두께 0.03 mm인 것을 기준으로 한다.

2.6.2 볏짚, 왕겨, 수목의 대팻밥 등

썩지 않고 잘 건조된 것으로 잡초종자나 식물생육에 해로운 물질이 섞이지 않은 것이어야 한다.

2.6.3 천염섬유망

황마, 코코넛 열매섬유 등으로 짠 것으로 구김이 없으며, 가장자리의 풀림이 없는 것이어야 한다.

2.6.4 기 타

가. 차광막의 차광률은 일정하여야 한다.

나. 부직포는 내구성이 있고 균일한 두께를 가지고 있어야 한다.

다. 바크는 염도가 낮고, 충분히 건조한 것으로서 바람에 날리지 않을 정도의 크기를 가지고 있어야 한다.

2.7 부속재료

2.7.1 지주재

가. 버팀대

뿌리돌림 및 굴취할 때 사용하는 버팀대는 직경 0.01 m 이상의 원형강관을 사용한다.

나. 지주대

계약도면에 지정된 박피통나무, 각목, 대나무 또는 특별히 고안된 재료로서, 내구성이 강한 것이나 방부처리(탄화, 도료, 약물 주입)되어야 하며, 설치 후 유동하지 않도록 끝부분이 잘 마무리되어야 한다.

다. 당김줄

1) 당김줄은 12게이지의 당금질한 아연도금강선으로 한다.

2) 당김줄 중간에 부착하는 턴버클(turnbuckle)은 아연도금 또는 카드뮴 판금강으로 하고 당김줄의 신축, 팽창이 용이하도록 턴버클의 기능 및 품질관리에 유의하여야 한다.

라. 말뚝용 통나무는 마구리를 가공하고 절단면과 측면을 고루 잘 다듬어 사용한다.

2.7.2 뿌리덮개

지표수의 침투가 원활하도록 창살무늬 형태로 제작된 공장주물 혹은 철판가공의 부식 방지처리된 제품으로서, 설계규격에 부합하고 보행자나 자동차로부터 쉽게 손상되지 않는 것이어야 한다.

2.7.3 수간보호재

가. 수간감기의 재료는 새끼, 황마끈, 황마제 테이프, 마직포 또는 고무밴드로 한다.

나. 황마끈은 황마로 만든 직경 6 mm의 천연섬유 노끈을 사용한다.

다. 고무밴드는 폐튜브를 폭 30 mm가 되도록 6등분한 것이나 시판용 고무밴드를 사용한다.

2.7.4 뿌리분 보호재

가. 보호목

1) 분 보호를 위한 비계목은 직경 0.12 m, 길이 0.25 m의 육송원목을 2등분하여 사용한다.

2) 뿌리목 보호를 위한 말목은 육송 원목을 사용하되, 뿌리목 지름이 0.12 m 이상이고 0.2 m 미만인 경우는 직경 0.06 m의 원목을, 뿌리목 지름이 0.2 m 이상인 경우는 직경 0.09 m의 원목을 사용한다.

나. 분보호 마대

1) 거적은 가마니 중품을 사용하되, 1회에 한하여 재사용할 수 있다.

2) 녹화마대는 황마(jute)로 만든 천연섬유시트를 사용한다.

다. 결속재료

1) 새끼는 직경 0.009 m의 2등급품 이상을 사용한다.

2) 녹화끈은 황마(jute)로 만든 직경 0.006 m의 천연섬유 노끈을 사용한다.

3) 고무밴드는 폐튜브를 6등분하여 사용하거나, 시판용 고무밴드를 사용한다.

4) 철선은 소사 8번선(0.004 m)을 3중으로 꼬아 사용한다.

2.7.5 기 타

가. 완충재는 결속 부위에 삽입 설치하여 수목의 줄기나 가지를 보호할 수 있는 것으로서 새끼, 고무조각 등을 사용한다.

나. 결속재료는 결속 후 쉽게 풀리지 않은 것으로 잘 짜인 녹화끈, 새끼줄 등을 사용한다.

다. 관수용 물은 오염되거나 식물생육에 유해한 물질이 섞여 있지 않은 것이어야 한다.

라. 유공 콘크리트관은 KS F 4409에 적합한 제품이어야 한다.

마. 유공 PVC관은 KS M 3404에 적합한 제품이어야 한다.

바. 기타 유공관은 투수구멍의 연면적이 표면 연면적의 20% 이상이어야 하며, 토사의 유입방지를 위하여 투수구멍을 일부 막은 제품을 사용할 때는 막힌 부분이 위로 향하도록 하여야 한다.

3. 시 공

3.1 식재지반 조성

3.1.1 최소생육심도

특별히 정하지 않은 경우, 식재종에 따라 식재하부용 토층과 식재용 (표토)토층으로 구성되고 표 20040.1의 최소생육심도 이상을 확보하여야 한다.

표 20040.1  식재식물 유형별 생육최소 토양심도

구 분	생육최소 토양심도
잔디와 초본류	0.3 m
소 관 목	0.45 m
대 관 목	0.5 m
천근성 교목	0.9 m
심근성 교목	1.5 m

3.1.2 준 비

벽돌이나 모르타르 등의 건축잔재가 방치되어 있거나 또는 지나친 다짐 지역이나 배수가 불량한 지역이 없는지를 확인하여야 한다.

3.1.3 표토갈기 및 정지

가. 표토 복원의 두께는 설계도서를 기준으로 정한다.

나. 하층토와 복원 표토와의 조화를 위하여 최소 200 mm 이상의 깊이로 지반을 경운한 후 그 위에 포설하여야 한다.

다. 표토의 다짐은 수목의 생육에 지장이 없는 정도로 시행하여야 한다.

라. 강우 시 또는 강우 직후에는 대형장비에 의한 표토깔기를 금하며, 불가피한 대형 장비 사용으로 성토면이 필요 이상으로 다져진 경우에는 식재공사 전에 성토깊이 이상으로 경운하여야 한다.

마. 수급인은 식재 대상지의 토양경도를 측정하여 수목의 활착 및 생장에 지장이 없도록 담당원의 승인을 득한 후 시공한다.

3.1.4 토양 개량

가. 토양분석의 결과에 따라 토양 개량을 위한 첨가제(토양개량제, 유기질비료, 화학비료 등)의 소요량을 개량 대상 토양의 면적, 부피 또는 무게단위로 산출한다.

나. 대상지역 전체에 첨가제를 고루 펴고, 토심 0.3 m의 깊이로 경운하여 흙덩이를 잘게 부수며 혼합한다.

다. 일반토양 또는 천연골재 이외에 계약도면에 명시된 인공경량골재나 기타 토양 개량제를 지정된 배합비율로 혼합하여 식재기반을 조성하며, 별도의 명시가 없는 경우 단지 안의 잔토 중 수목생육에 적합한 토양 7 : 토양개량제 3의 비율로 혼합하여 사용한다.

라. 소량의 객토용 흙은 설계도서에 지시한 대로 유기물질(부식, 부엽, 이탄토 등)을 첨가하거나 특수 배양토를 조성하여 사용한다.

3.1.5 마운딩

가. 마운딩은 0.2∼0.3 m 두께로 다짐하여 지정된 흙쌓기 높이와 양이 되도록 하며, 상부와 언저리는 둥글게 처리하고, 평균경사 30% 이하의 완만한 구릉을 이루어 자연스런 형상이 되도록 한다.

나. 건축물 주변이 부토 또는 마운딩처리를 할 때에는 토공에 의한 표면수의 흐름을 고려하여 우수가 건물지하로 역류하지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

3.1.6 정지작업 및 식재면 고르기

식재지역을 토심 0.3 m의 깊이로 경운하여 흙덩이를 잘게 부순 후, 토심 0.1 m 이내에 있는 직경 0.2∼0.3 m 이상 크기의 돌, 쓰레기, 잡초 등 불순물을 제거하고, 식재면에 물이 고이지 않게 잘 고른다.

3.1.7 화단 조성

가. 객토는 일반적일 객토용 양토의 사용을 원칙으로 한다.

나. 설계도서에 명시한 바에 따라 지피, 유기질토양(부식, 부엽, 이탄토 등)을 첨가하여야 한다.

다. 특별히 명시하지 않은 경우에는 1 m²당 2 kg의 유기질비료를 사용한다.

라. 시비한 뒤 파종지를 깊이 0.2 m 이상 되게 갈아엎고 자갈이나 돌 또는 기타 식물생장에 유해한 물질을 제거하여야 한다.

3.2 배 수

3.2.1 표면배수

가. 녹지 표면은 배수가 용이하도록 일정한 기울기를 유지하여야 하며, 표면배수가 계획된 집수시설이 흘러들어 가도록 처리하여야 한다.

나. 식재지역쪽으로 역기울기가 되어서는 안 되며, 식재지역에 타 지역의 우수가 유입되지 않도록 하여야 한다.

다. 필요한 경우 잔디밭 등에 배수로를 설치한다.

3.2.2 심토층 배수

지하수위가 높은 곳이나 불량지반 및 인공지반 등에는 (배수공사)의 해당 규정에 따라 심토층 배수시설을 설치하고, 평탄한 지역 중에서도 지하수위가 높은 곳은 완화배수 시설을 설치하여야 한다.

3.2.3 토양경도화지역 배수

토양경도를 측정하여 필요시 맹암거 배수, 토양치환 등의 대책을 수립한 후 시공한다.

3.3 특수지반

3.3.1 불량지반 개선

쓰레기 매립지, 논 매립지, 임해 매립지, 파쇄암 성토 및 암지반, 자갈섞인 지반, 토양경도화가 진행된 지역 등의 불량지반은 각 지반별 특성을 고려한 계약도면에 따라 시공하여야 한다.

3.3.2 인공지반조성

가. 공사착수 전에 기 조성된 플랜트 박스 내부의 굴곡과 요철상태를 정리하고 이물질을 완전히 제거하여 배수구의 막힘을 방지하여야 한다.

나. 식재층 바닥은 설계도서에 명시된 배수판이나 천연 또는 인공골재 깔기로 하며, 그 위에 지반용 섬유를 깔아 토양유실이나 배수기능의 저하를 방지하여야 한다.

다. 인력관수의 경우 급수전을 설치하고, 자동관수 설비를 갖출 경우 이 시방서 25035(관수공사)의 해당 규정을 따른다.

라. 화분 재배의 경우에는 인공적으로 생산되는 특수토양 등으로 배양토를 조성하여 사용한다.

마. 방수

1) 수직면의 방수층은 반드시 토양 표면보다 높은 곳까지 설치되도록 한다.

2) 각종 관부설 또는 시설물공사 등으로 인하여 방수막이 파손되지 않도록 유의한다.

3) 콘크리트의 팽창·수축으로 인한 방수막의 훼손에 대비하여 예방조치를 취하여야 한다.

바. 배수

1) 비교적 넓은 면적의 식재지에는 배수층을 형성하고, 유공관을 병행하여 설치하며, 배수점검구를 두도록 한다.

2) 바닥면은 설계서에 명시된 기울기를 유지하여야 한다.

3) 배수층 및 배수판은 상재하중과 답압에 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

4) 배수층 및 배수판의 구멍으로 토양이 유실될 우려가 있는 경우를 제외하고는 배수판과 토양 사이에는 토양의 유실을 방지하는 부직포 등을 포설하여서는 안 된다.

사. 토양이 식재식물을 지지할 수 있도록 다짐 최적함수비 상태에서 충분히 다진다.

아. 식물의 뿌리가 바닥면으로 침입할 우려가 있는 곳은 이를 방지할 수 있는 조치를 취한다.

자. 인공토양이 바람에 흩날리지 않도록 피복재를 사용하여야 한다.

3.4 수목의 굴취, 운반

3.4.1 뿌리돌림

가. 뿌리돌림은 수종 및 이식시기를 충분히 고려하여 일부의 큰 뿌리는 절단하지 않도록 하며 적절한 폭으로 형성층까지 동글게 다듬어야 한다.

나. 뿌리돌림 시 수종의 특성에 따라 가지치기, 적엽 등을 하고 필요한 경우에 가지주를 설치한다.

3.4.2 굴 취

가. 수목 굴취 시에는 해당 수목을 확인한 후 수고 4.5 m 이상의 수목은 담당원과 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수하여야 한다.

나. 뿌리분의 크기와 형태는 설계설계도서에서 명시한 바를 따르며, 분의 깊이는 세근의 밀도가 현저히 감소된 부위로 한다.

다. 설계서에 별도의 지시가 없음에도 한국산업표준을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 담당원과 협의하여 승인받아야 한다.

라. 기계 굴취의 경우에는 기계에 의해 굴취수목이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

마. 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하고 자르고 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하며, 밀생한 세근을 이를 뿌리분에 붙여 보존하여야 한다. 절단된 뿌리 부분이 손상된 경우에는 손상부위를 예리하게 절단하고 방수처리한다.

바. 뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료를 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

사. 지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취 시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위 내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리한다.

아. 운반에 지장을 받지 않도록 무리가 가지 않는 범위 내에서 가지를 새끼, 밧줄 등으로 잡아맨다.

3.4.3 굴취 후 정리

굴취 구덩이는 굴취 후 즉시 산토로 메워 지형과 일치되도록 정리하여야 한다. 땅지기와 높이, 방법에 대해서는 담당원의 지시에 따른다.

3.4.4 운 반

가. 운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인 블록이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

나. 운반 중의 보호조치

1) 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

2) 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

3) 지조는 간편하게 결박한다.

4) 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재하여 이중적재를 금한다.

5) 비포장도로로 운반할 때에는 뿌리분이 충격을 받지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충 재료를 깐다.

6) 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

7) 수송 도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

다. 운반 중 회복 불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종 동품으로 보상하고, 경미한 가지 부러짐 등에 대해서는 담당원의 지시에 따라 조치하여야 한다.

3.5 수목 가식

가. 반입수목 또는 이식수목의 당일 식재가 불가능한 경우에 적용한다.

나. 가식 수목은 가능한 한 반입 당일 사질양토로서 배수가 양호하고 공사에 차질이 없는 곳에 식재함을 원칙으로 한다.

다. 가식 수목간에는 원활한 통풍을 위하여 충분한 식재간격을 확보하고 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기중에 노출되지 않게 한다.

라. 가식수목의 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기 중에 노출되지 않도록 조치하여야 한다.

마. 가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연식지주를 설치하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 하여야 한다.

바. 하절기에는 담당원의 지시에 따라 수목증산억제제 살포, 전정 등의 조치를 취하고, 동절기에는 동해방지를 위해 거적, 짚 등을 이용하여 보온조치 하여야 한다.

3.6 수목식재

3.6.1 식재 위치

가. 식재 위치는 설계도서 상의 지정 위치로 하며, 반드시 실측에 의해 설계 위치를 확인하여야 한다.

나. 현장의 지형, 지반, 토양 상태 등 부득이한 사유로 설계 위치에의 식재가 불가능한 경우 또는 식재목적을 위하여 식재 위치를 다소 조정하는 것이 바람직하다고 판단되는 경우에는 담당원의 승인을 받아 조정할 수 있다.

다. 다수 수목의 위치변동 또는 위치의 대폭적인 변동이 필요한 경우에는 사유서 및 증빙 서류를 첨부·제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

라. 식재 위치의 조정은 반드시 식재 전에 검토·시행하여야 하며, 이미 식재한 수목을 옮겨 심지 않아야 한다.

3.6.2 식재구덩이

가. 식재구덩이는 식재 당일에 파되 수목반입 즉시 식재될 수 있도록 미리 작업을 시행하도록 한다. 다만, 부득이한 경우 사전에 굴착할 수 있으며, 이때는 담당원과 충분히 협의하여 안전대책을 수립하여야 한다.

나. 식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보하여야 한다.

다. 식재구덩이는 구덩이에 급수하여 투수성을 점검한다. 투수성이 불량한 경우에는 담당원과 협의하여 위치를 조정하거나 이 시방서 20020 배수공사의 해당 규정에 따라 배수처리 하여야 한다.

라. 식재구덩이를 팔 때는 표토와 심토는 따로 갈라놓아 표토를 활용할 수 있도록 조치하여야 한다.

마. 기계, 인력 병행의 굴착 시에는 기존의 공작물 및 매설물에 손상을 주지 않도록 특히 주의하여 시공한다.

바. 굴착에 의해 발생된 토사 중 객토 또는 물집에 사용하는 토사는 생육에 지장을 주는 토질을 제거하여 사용하여야 한다.

사. 대형목 등 특수목 식재를 위한 구덩이의 굴착방법은 공사시방서에 따른다.

3.6.3 객 토

가. 식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토하여야 한다. 채움흙의 토질은 배수성과 통기성이 좋은 사질양토를 표준으로 한다.

나. 혼합토 사용 시의 혼합재료 선정비율은 공사시방서에 따른다.

3.6.4 식 재

가. 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재하여야 한다.

나. 원래의 식재높이와 방향을 유지시키되 경관, 기능 등의 이유로 조정이 필요한 경우에는 담당원과 협의 조정하여야 한다.

다. 물 조임 시 침하를 고려하여 약간 상식하도록 한다.

라. 유기질비료를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울 때에도 유기질 비료를 혼합하여 넣는다. 식재 후에는 화학비료를 시비하여, 시비량은 토양조사결과에 따라 결정하거나 계약도면에 정한 바를 따른다.

마. 활착보조재의 사용은 제품별 용법에 따른다.

바. 흙넣기 및 다짐은 수목의 생리적 특성에 따라 물다짐 또는 마른다짐으로 하며, 뿌리분 주위에 공극이 발생되지 않도록 면밀히 실시하여야 한다.

사. 분해되지 않은 뿌리분 결속재료는 식재 전에 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다. 단, 이들의 제거로 뿌리분 등에 심각한 손상이 예상되는 경우에는 담당원과 상의하여 최소량을 존치시킬 수 있으나, 이때에도 잔여 재료가 지표면에 노출되지 않도록 깨끗하게 정리하여야 한다.

아. 식재 후에는 근원부를 중심으로 수관폭의 1/3 정도 크기에 0.1∼0.15 m 정도의 높이의 원형 물받이를 설치하여 관수 시 물이 흘러내리지 않도록 하고, 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수하여야 한다.

3.6.5 가로수 식재

가. 가로수의 식재 마감면은 보도 연석면보다 0.03 m 이하로 끝마무리하여야 한다.

나. 가로수는 수고 및 지하고를 일정하게 맞추어 식재한다.

다. 분의 상단부위까지 흙이 쌓이지 않도록 하고, 불필요한 잔토 및 잔재는 보행에 지장을 초래하지 않도록 신속히 처리하여야 한다.

3.7 식재 후 처리

3.7.1 지주, 수목보호대 및 뿌리덮개 설치

가. 식재완료 후 즉시 지수 및 수목보호대를 설치하여 수목이 흔들리거나 전도되지 않도록 한다. 지주목은 반입 수목의 실제 규격에 의거하여 설치하고 정산한다.

나. 지주목은 필요에 따라 이각, 삼각, 버팀형 지주 등을 설치하도록 하고, 지주의 경사각은 70°를 기준으로 한다.

다. 지주 및 수목보호대는 깊이 매설하여 흔들림이 없어야 하고, 매설깊이는 0.03 m 이상이어야 한다. 지반침하가 우려되는 경우에는 침하 후 유동하지 않도록 조치하여야 한다.

라. 지주 및 수목보호대와 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지하여야 한다.

마. 가로수의 경우 매입깊이를 일치시켜 체결높이가 일정하게 되도록 하여야 한다.

바. 뿌리덮개는 수평을 유지하고 포장면과 어긋나지 않도록 주의하여 설치하여야 한다.

사. 뿌리분을 결박했던 고무밴드는 식재 후 세근 발달에 지장이 되므로 제거하거나 끊어줘야 한다.

3.7.2 정지 전정

가. 식재 후에는 정지 전정의 원칙에 따라 모양을 잡는다.

나. 가로수는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

다.  생울타리, 관목을 열식한 경우에는 담당원의 지시에 따라 사진을 촬영하여 형상과 규격을 확인한 후 설계도서에 지정된 높이로 전정하여야 한다.

라. 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여야 한다.

3.7.3 양생 및 약제처리

가. 정지 전정이 끝나면 증산억제제를 처리하여 사용방법은 제조자의 사용지침에 따른다.

나. 토양의 수분증발을 억제하고 지면의 온도를 낮추기 위해 물집 위의 지면을 멀칭 재료로 피복한다.

다. 햇빛, 병충해 등의 피해가 예상되는 수목은 견고하게 수간감기를 하여 피해를 예방하여야 한다.

라. 식재 후 10일 간격으로 관수와 동시에 발근촉진제를 처리하며, 활착상태를 감안하여 조절한다.

바. 수목이 활착할 때까지 충분히 수분을 공급하되 일출, 일몰 시에 관수하는 것을 원칙으로 한다.

3.8 잔디식재

3.8.1 잔디붙이기

가. 잔디를 붙이기 전에, 토양개량과 정지작업이 이루어진 지면을 롤러나 인력으로 다진다.

나. 전면붙이기

1) 일반 뗏장은 전체 지면에 틈새 없이 붙이거나 0.01∼0.02 m 간격으로 서로 어긋나게 붙인 후 모래나 사질토를 살포하고 다시 롤러나 인력으로 다진 후 충분히 관수한다.

2) 롤형 뗏장은 전체 지면에 틈새 없이 붙이고 모래나 사질토를 가볍게 살포한 후 롤러로 다지고 충분히 관수한다.

다. 줄떼붙이기

계약도면 또는 공사시방서에 지정한 크기(0.05, 0.1, 0.15, 0.2 m)와 간격(0.15, 0.2, 0.3 m)으로 잔디장을 잘라 뿌리가 흙속에 묻히도록 표토를 파가면서 붙여 심는다.

라. 어긋나게 붙이기

뗏장을 0.2∼0.3 m 간격으로 어긋나게 놓거나 서로 맞물려 여유 있게 배열하여 호미 또는 괭이로 잔디뿌리가 흙속에 묻히도록 표토를 파가면서 붙인다.

마. 풀어심기(stolonizing or sprigging)

1) 뗏장에서 풀어낸 포복경을 0.05 m 정도로 절단한 것을 토양개량제 등에 혼합하여 산파한다.

2) 0.05∼0.1 m 정도의 간격을 띄우고 골을 파서 붙이고, 모래나 사질토를 살포하여 잔디뿌리기가 흙 속에 묻히도록 하고 가볍게 다져야 한다.

3) 줄기가 쓸려나가지 않도록 피복(mulcing)하고 충분히 관수하여야 한다.

4) 잔디가 완전히 활착되면 멀칭 피복물을 벗겨내야 한다.

바. 잔디고정

1) 30% 이상의 경사면에 잔디를 붙일 때에는 뗏장에 떼꽂이를 꽂아서 잔디가 움직이지 않도록 고정하여야 한다.

2) 뗏장 1장당 2매 이상의 떼꽂이를 꽂는다.

사. 뒷정리

식재완료 후 남은 뗏장 및 돌, 기타 부스러기, 쓰레기 등을 제거하고 정리한다.

3.8.2 파종시기

난지형 잔디는 5월경, 한지형 잔디는 9∼10월 또는 3∼4월경을 기준으로 하되 종의 특성을 고려하며, 공기 및 현장 여건에 따라 담당원과 협의하여 결정한다.

3.8.3 파종지 준비

가. 잡초의 발생이 우려되는 곳은 대상지 전면에 제초제를 살포하고 일정기간 경과를 하여야 한다.

나. 파종지는 인력 또는 경운기로 깊이 0.2 m 이상 부드럽게 간다.

다. 비료를 뿌리고 흙을 곱게 부수고 고른 후 롤러로 가볍게 다진다.

3.8.4 파 종

가. 파종량의 반을 모래와 섞어 종으로 파종하고 나머지 반을 모래와 섞어 횡으로 파종한다.

나. 파종 후 롤러로 가볍게 눌러서 종자가 흙 속에 박히도록 한다.

다. 파종지가 충분히 젖도록 관수하되 흙이 흘러내리지 않을 정도로 물을 뿌려야 한다.

라. 발아를 위한 적절한 수분과 토양온도유지를 위하여 폴리에틸렌 필름(두께 0.03 mm)이나 볏짚, 황마천, 차광막 등으로 피복하고 바람에 날리지 않도록 고정한다.

마. 씨드 벨트(seed belt)로 파종할 때에는 정지된 지면에 종자가 닿도록 벨트를 깔고 충분히 관수한 다음 0.001 m 정도의 고운 흙으로 복토하고 다시 관수한 후 폴리에틸렌 필름을 덮어 준다.

3.8.5 파종 후 관리

가. 종자가 발아하면 상태를 주시하여 웃자라거나 고온장애를 받을 우려가 있으면 즉시 폴리에틸렌 필름을 제거하여야 한다.

나. 파종지가 건조할 경우에는 전면에 살수하되 표면이 마르지 않게 해야 한다.

다. 발아 후 2개월 경과 시부터 시비를 하되 한국잔디의 경우 질소, 인산, 가리를 각각 년 간 0.02 kg/m², 0.01 kg/m², 0.02 kg/m²의 비율로 생육기간 중 2∼3개월 간격으로 시비한다. 기타 잔디시비는 유지관리계획에 따라 담담원과 협의하여 정한다.

라. 파종 후 20일 이내에 발아되지 않거나 전면에 고루 발아되지 않고 일부만 발아하는 경우에는 처음과 동일한 공법으로 재파종하여야 한다.

3.9 지피, 초화류 식재

3.9.1 기본사항

가. 식재지역에 여러 종류의 지피류, 초화류를 혼식하는 경우에는 설계도서에 명시한 각 초종별 식재위치와 소요 수량을 준수하여야 한다.

나. 재료에 따른 다양한 생육 및 재배조건을 충족시켜야 한다.

3.9.2 식 재

가. 바닥을 부드럽게 파서 고른 후 충분히 관수한다.

나. 뿌리가 상하지 않도록 주의하면서 재배용토가 뿌리 사이에 빈틈없이 채워지도록 심고 충분히 관수한다.

다. 가는 대나무류 및 지피류 식재간격은 설계도서에 지정되지 않은 경우 0.15 m (44주/m²)를 표준으로 한다.

라. 지피류 및 초화류를 뗏장 또는 기타의 방법으로 식재하는 경우에는 제조회사의 시공 지침을 따른다.

마. 덩굴성 식물은 식재 후 주요 장소를 대나무 또는 지정재료로 고정한다.

바. 종자의 파종은 각 재료별 파종방법에 따라 화단 전면에 걸쳐 균일하게 파종한다. 파종일 시에 대해서는 담당원과 합의하여 기후를 충분히 고려하고 파종 직후에 강우에 의해 종자가 유출되지 않도록 조치하여야 한다.

사. 시공 후 기후에 주의하고 담당원의 지시에 따라 지나치게 건조하지 않도록 양생 관리하여 발아를 촉진시킨다.

아. 특수한 식물의 식재와 파종에 대해서는 각 식물별 재식 및 파종방법 또는 공사시방서를 따른다.

3.10 유지관리

3.10.1 관수 및 엽수

가. 혹서기에는 매일 관수 및 잎세척을 위한 엽수를 3∼4회/일 실시한다.

나. 전문적인 관리인이 토양의 보습상태를 점검하여 필요 시 추가관수한다.

3.10.2 정지전정

가. 식물류별(상록/낙엽, 교목/관목/초화류 등)과 크기(대/중/소)를 기준으로 구분하여 관리한다.

나. 교목과 관목은 연 2회 이상 수세와 수형을 가늠하여 정지 전정하며 형태를 유지시킨다.

다. 교목류 중 일부 필요한 수종은 기본전정과 적심 및 잎따기를 병행한다.

라. 초화류는 잎따기를 실시하여 항상 건강한 잎을 유지시킨다.

마. 정지 전정의 부산물은 즉시 수거하여 처리하여야 한다.

3.10.3 수간보호

포장지역에 식재한 독립교목은 태양열 및 인적 피해로부터의 보호와 미관을 고려하여 지표로부터 1.6 m 높이까지의 수간에 매년 새끼 등 수간보호재 감기를 실시한다.

3.10.4 태풍피해 방지대책

잣나무 등 천근성 수목은 대형태풍에 전도되지 않도록 장마, 태풍 전 수목지주 관리를 철저히 한다.

3.10.5 월동보호

가. 겨울의 추위나 건조한 강풍에 피해가 예상되는 수목은 11월 중에 지표로부터 1.5 m 높이까지의 수간에 모양을 내어 짚싸기를 실시하여야 한다.

나. 강풍에 의한 피해가 예상되는 관목식재지역에서는 방풍벽을 설치하여야 한다.

다. 관목류에는 월동보호약제를 시기, 용량, 수종을 고려하여 처리하여야 한다.

3.10.6 병충해 구제

가. 연 2회 이상 예방을 위한 약제를 살포하며, 병충해 발생 시에는 초기에 대처하여야 한다.

나. 주변 연계녹지로부터의 전염을 각별히 관찰하고 예방하여야 한다.

3.10.7 시비 및 약제살포

가. 농도, 사용시기, 사용량, 사용방법 등 사용기준을 반드시 준수하여, 사용 후에 발생하는 포장재 및 용기는 안전하게 폐기하여야 한다.

나. 독성이 강한 농약류는 별도의 농약보관소에 보관한다.

다. 수목의 시비는 토성을 개선할 수 있는 완숙된 상토를 사용하여 연 2회로 분할하여 기비와 추비로 사용한다.

3.10.8 고사목의 처리

가. 고사목의 발생위치와 상태를 점검하여 원인을 규명하고 사후대책을 수립하여야 한다.

나. 고사의 우려가 있는 대행수목은 하자기간 종료 후에도 책임 있게 관리하여야 한다.

3.10.9 숙근초화류

맥문동 등의 숙근초화류는 공해 및 갑작스러운 직사광노출, 공중습도결핍 등에 의한 생육장애가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

3.11 비탈면공사

3.11.1 비탈면 기반공사

가. 표토의 보존 및 토양개량

1) 반입된 토양개량제는 0.3 m의 깊이로 토양과 골고루 섞이도록 하며, 토양산도 교정을 위한 석회는 토양이 pH 6.2∼6.5의 산도가 되도록 고루 사용한다.

나. 식재용토(표토) 붙이기

1) 식물의 생장에 불리한 절토된 비탈면의 경우 표토 붙이기를 하여야 한다.

2) 설계서 상의 비탈면의 높이와 기울기에 따라 표토를 붙이고 충분히 다짐한다.

다. 모든 비탈면 녹화는 비탈면적 및 지역적, 기후적 조건에 따라 설계도서 및 담당원의 지시에 의해 준공 시까지 관수와 시비 등의 유지관리를 시행하여야 한다.

라. 비탈면의 표면에 물이 고이지 않도록 하고 세굴, 유출 또는 붕괴가 우려되는 곳은 산마루 측구, 비탈면 노견배수구, 소단배수구, 종배수구, 암거, 유공관, 비탈면 밑 배수구 등의 배수시설을 설치한다.

마. 비탈면 기초공사로는 낙석방지망 덮기, 격자틀 붙이기(격자블록공), 편책공 등으로 비탈면의 기초공사를 실시한다.

3.11.2 토사비탈면 녹화공사

수급인은 다음의 공법 중에서 현장에 적합한 공법을 적용하여 토사비탈면 녹화를 실시하여야 한다.

가. 잔디 식재공

1) 잔디생육에 적합한 토양의 비탈면에 비탈면경사가 1 : 1보다 완만할 때에는 비탈면을 일시에 녹화하기 위해서 흙이 붙어 있는 재배된 잔디를 사용하여 붙인다.

2) 비탈면 평떼붙이기는 줄눈을 떼어놓지 말아야 하며, 떼의 긴 면을 수평방향으로 놓고 세로줄눈이 닿도록 하고, 십자줄눈이 형성되지 않도록 어긋나게 붙이며 떼 소요면적은 비탈면 면적과 동일하다.

3) 비탈면 줄떼다지기는 잔디폭이 0.1 m 이상 되도록 하고, 비탈면에 0.1 m 이내 간격으로 수평골을 파고 수평으로 심고, 다짐을 철저히 한다.

4) 선떼붙이기는 비탈면에 일정 높이마다 수평으로 단끊기 후 되메우기한 앞면에 떼를 세워 붙이되, 흙층에 완전히 밀착되도록 달구판으로 다지기를 잘하고 줄눈이 수평이 되도록 시공하며, 침하율을 감안하여 계획높이보다 덧쌓기를 하고, 부위별 떼의 규격은 설계서 및 담당원의 지시에 따라 정한다.

5) 떼고정은 떼꽂이를 사용하여 떼 1매당 2개 이상 견실하게 고정하며, 시공 후에는 모래나 흙으로 떼붙임면을 얇게 덮은 후 달구판으로 고루 두들겨 다져준다.

6) 잔디판 붙이기는 비탈면의 침식방지 및 활착이 용이하도록 잔디판을 비탈면에 밀착 고정한다.

나. 종자뿜어 붙이기

1) 급경사지에 종자를 기계적으로 뿜어 붙여 일시적으로 조기에 녹화될 수 있도록 시공한다.

2) 시공시기는 동절기(11∼2월)를 제외하고 연중시행 가능하나 보통 봄(3∼6월), 가을(8∼10월)에 시행한다.

3) 종자착지가 어려운 부분은 담당원의 지시에 따라 적정간격으로 수평 또는 경사지게 골을 파고 시공한다.

4) 종자가 비탈면 한쪽에 치우치지 않도록 종자살포기탱크 안의 종자를 잘 섞어서 균일하게 분사한다.

5) 파종 후 침식이 우려될 때에는 비닐 등 피복재를 전면에 덮도록 하여 바람에 날리지 않도록 잘 고정한다.

6) 파종 3개월 이내에 골고루 발아되지 않거나, 일부만 발아되었을 때에는 재파종한다. 단, 10월 이후 시공 시는 익년 6월 초순에 재파종을 결정한다.

다. 식생혈공(종자혈공)

1) 비탈면에 일정한 간격으로 구멍을 파고 식생을 도입하여 녹화되도록 시공한다.

2) 구멍의 밑바닥에 완숙된 퇴비나 복합비료를 넣어야 하고, 그 위에 생육기반재를 충진하며 구멍의 상부에 종자를 넣고 복토한다.

3) 식혈지는 선정된 수목의 생육에 적합한 깊이를 확보해야 한다.

라. 식생자루공(종자자루공)

1) 생육기반 및 종자를 자루에 담아 비탈면에 판 수평구속에 넣어 붙여 일시적으로 녹화되도록 시공한다.

2) 자루를 넣을 구멍은 규정된 깊이로 파고, 얕아서 자루가 떠오르지 않도록 하며, 틈 사이는 흙으로 채우고, 자루 밑에 고형비료를 시비한다.

3) 자루의 고정을 위해 경질제, 염화비닐 U철선(길이 0.25 m) 등의 떼꽂이, 혹은 맹아력, 발근력이 좋은 목본류의 가지로 된 떼꽂이를 1자루에 1∼2본을 사용한다.

마. 식생 매트공(종자매트공)

1) 면상의 매트에 종자를 붙여 비탈면에 포설, 부착하여 일시적인 조기녹화를 도모하도록 시공한다.

2) 비탈면을 평평하게 끝손질한 후 나무꼬챙이 등을 꽂아주어 떠오르거나 바람에 날리지 않도록 밀착한다.

3) 비탈면 상부 0.2 m 이상을 흙으로 덮고 단부(端部)를 흙속에 묻어 넣어 비탈면 어깨로부터 물의 침투를 방지한다.

4)  긴 매트류로 시공할 때에는 비탈면의 위에서 아래로 길게 세로로 깔고, 흙쌓기 비탈면을 다지고 붙일 때에는 수평으로 깔며, 양단을 0.05 m 이상 중첩한다.

바. 비탈면 수목식재

비탈면의 안정적이고 생태적인 녹화를 조기에 달성하기 위하여 비탈면에 수목을 도입하여 식재 시공한다.

사. 식생대(종자대)

1) 띠모양의 일정규격의 식생대에 종자와 비료 등을 부착시켜 비탈면에 일정한 간격으로 설치하여 녹화되도록 시공한다.

2)  식생기지가 지표면보다 약간 나오도록 하고, 종자가 표면의 내측에 위치하도록 놓는다.

아. 식생판(식생반, 종자판)

1) 생육기반재를 판상으로 만들어 표면에 종자를 붙여놓고 비탈면의 수평구속에 깔아 붙여 일시에 녹화되도록 시공한다.

2) 식생판을 지반에 고정하기 위하여 떼꽂이 2개 이상을 사용하고, 필요시 새끼 등을 띄워 고정한다.

3) 비탈면의 상무부터 순차적으로 하향하여 수평구에 배열한다.

4) 식생판 부착 시 지반과 틈이 생기지 않도록 생육기반재를 채워서 밀착시킨다.

3.11.3 암반비탈면 녹화공사

수급인은 다음의 공법 중에서 현장에 적합한 공법을 적용하여 암반비탈면 녹화를 실시하여야 한다.

가. 암절개면 보호식생공

비탈면의 안정적이고 생태적인 녹화를 조기에 달성하기 위하여 비탈면에 수목을 도입하여 식재 시공한다.

나. 새집붙이기

1) 암석을 채굴하고 깎아낸 요철이 많은 암반비탈면에 점적 녹화를 목적으로 시공한다.

2) 수목생육에 충분한 깊이로 표토나 생육기반재를 채운다.

3) 암반비탈의 凹부를 선정하여 새집 공작물을 설치할 터파기, 터 다듬기공사를 하고 주위의 깬 잡석 등을 수집하여 제비집 모양으로 구축하고 그 안에 객토한 후 식재한다.

4) 제비집 모양의 구축물 크기는 길이 2∼3 m, 폭 0.6∼1.0 m, 높이는 0.5∼1.0 m 크기를 표준으로 한다.

5) 찰쌓기로 새집을 만들 경우 반드시 물빼기 구멍을 설치해야 한다.

6) 식생상(植生箱, Vegetation Box)은 점적 또는 선적인 식생녹화대로 조성하며 주로 콘크리트, 합성수지(FRP, CRP, RPM) 제품, 인조목재, 인조석재 또는 목재 등으로 제작한다. 식생상의 크기는 시공장소와 시공여건에 따라 다르지만 안쪽 길이 0.8∼1.0 m, 안쪽너비 0.5∼0.6 m를 표준으로 하며 견고하게 제작해야 한다.

다. 차폐수벽공

1) 식생의 도입이 불가능한 암반비탈면 및 채석장 등에서 수목에 의한 차폐를 도모하기 위하여 시공한다.

2) 비탈면 하단부나 소단, 옹벽 등에 생육기반을 조성한 후에 2∼3열로 식재한다.

라. 덩굴식재공

1) 일반식생의 도입이 불가능한 암절개지 및 채석장 등에서 덩굴식물에 의한 차폐와 녹화를 도모하기 위하여 시공한다.

2) 비탈면의 상단부, 소단부, 하단부에 생육기반을 조성 식재하여야 한다.

마. 식생상공(식생분공)

1) 암석을 채굴하여 요철이 많은 비탈면에 점적녹화 및 부분녹화 또는 특수경관 조성을 도모하도록 시공한다.

2) 식생상은 비탈면에 경관적인 고려가 우선되도록 하여, 고르게 설치한다.

3) 비탈면의 적소에 설치하며, 단단히 고정한다.

4) 식생상 안의 식물은 주변임상과 조화되도록 생태적으로 적절히 배합하여 식재한다.

바. 식생기반재 뿜어붙이기(종비토 뿜어붙이기)

1) 식물의 자연생육이 곤란한 비탈면에 일정한 품질로 제조된 생육기반재에 종자를 섞어 조기에 경관적인 녹화와 생태적 복원 및 보전을 도모하도록 시공한다.

2) 공기압에 의한 뿜어붙이기를 할 때에는 시공비탈면과 노즐간격을 약 1 m 정도로 유지하되 수직이 되도록 시공하고, 비탈면 상부에서 하부로 진행하며 균열 및 요철에 의한 내부공극이 발생되지 않도록 유의하여 시공한다.

3) 비탈면이 특히 건조되어 있거나 이물질이 붙어 있을 때에는 살수를 먼저 시행한 후 시공한다.

4) 토질압에 의한 분사붙이기를 할 때에는 설계서에 의해 시공 전 재료배합관리실험을 반드시 실시한다.

5) 암반비탈면을 시공할 때에는 전면피복녹화를 지양하고 균열과 요철에 따른 자연스러운 부분녹화를 시행하여 주변식생과 조화를 이룰 수 있도록 한다.

6) 암의 균열간격이 클수록 시공두께를 두껍게 조절한다.

7) 암의 돌출부 및 수직, 역구배비탈면은 녹화시공을 지양하고 움푹파인 곳을 집중적으로 시공한다.

8) 시공 후 검사는 500 m²당 1개소 이상의 측정구를 설치하여 조사하며, 측정이 곤란할 경우에는 시공투입량으로 대신할 수 있다.

9) 생육판정은 피복률과 성립본수로 하되 피복률은 경사도 및 종자배합에 따라 조정해야 한다.

3.11.4 유지관리

가. 식생천이를 고려한 유지관리를 실시하여야 한다.

나. 풀베기는 필요 부분만 시행하고, 천이를 진행시켜 수림화시킴으로써 식생의 다양성을 증진시키고 동물서식지로의 다양한 식생층을 확보하도록 한다.

다. 광범위한 풀베기보다는 일부분을 남겨 소형동물의 피난처를 제공한다.

라. 풀베기는 시기별로 중복되지 않도록 하여 곤충들의 생활에 피해를 최소화하여야 한다.

마. 겨울철 풀베기는 곤충의 월동에 영향을 미치므로 되도록 자제하며 지역과 대상종에 따라 곤충의 산란기와 유충기, 가수면기 등에는 풀베기를 피한다.

바. 낙엽 등의 부엽토는 토양 생태계를 활성화시키고 토양을 건강하게 하므로 유효하게 이용한다.

사. 광범위한 화학적인 사용은 자제하고 물리적인 풀베기를 시행하는 것이 바람직하다.

20045 조경석 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 가공자연석을 포함한 산석, 강석, 해석 등의 자연석의 옥외 및 실내공간의 단독 또는 다수를 조합하여 운반, 놓기, 쌓기, 깔기 등 경관을 조성하는 모든 조경석 공사에 적용한다.

1.2 일반사항

이 시방서는 조경공사 중 조경석 자재를 이용한 시공, 설치에 관한 전반적인 사항이다.

1.3 관련 시방절

이 시방서의 관련 시방은 다음과 같다.

1.2.1 조경공사 표준시방서 제14장 조경석

1.2.2 국토교통부 건설공사 전문시방 96100 자연석

1.2.3 서울특별시 전문시방서(조경편) 제11장 조경석

1.2.4 LH공사 전문시방서 91390 조경석

1.2.5 건축공사표준시방서 20025 조경구조물공사

1.4 용어의 정의

이 시방서에서 사용하는 용어는 다음과 같으며, “2. 자재”의 내용을 따른다.

자연석의 종류는 채집 지역에 따라 산석, 강석(하천석), 해석과 별도의 가공석, 그리고 풍화에 의한 파쇄암이 있다. 조경시공 방법에 따라 쌓기, 놓기 그리고 깔기가 있으며, 포장용도에 따라 디딤돌, 징검돌, 계단돌이 있다.

1.5 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 한다. 특별히 명시하지 않은 경우의 제출 시기는 해당 공사 착공 전으로 한다.

1.5.1 인·허가 자료

조경석을 반입할 때에는 원소재지에서의 반출허가증명서 사본을 제출한다.

1.5.2 제품관련 자료

가. 자연석 및 가공조경석은 현장 반입 전에 사진 또는 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 담당원이 지정하는 특수한 용도의 조경석은 해당 조경석의 사진을 제출한다.

다. 현장반입 후 시공하기 전에 수량, 품질 및 공인계량소의 계량증명서를 제출하여야 한다.

1.5.3 시험자료

물과 접하는 곳에 설치되는 조경석은 물 속에 24시간 침적시킨 후의 함수량과 물속에서 5시간 끓인 후의 함수량을 조사하고, 성과표를 제출하여야 한다.

1.5.4 시공도

담당원이 지시하는 경우, 조경석쌓기 또는 놓기의 시공도를 제출하여야 한다.

2. 자 재

2.1 기본요건

가. 조경석은 설계도서에 근거하여 크기 및 형상을 엄선하여야 한다.

나. 암석의 종류 및 산지에 따른 고유의 특성을 지녀야 하며, 부적당한 색깔이나 갈라짐, 깨어짐이 없어야 한다.

다. 물과 접하게 되는 조경석은 동파의 위험이 없는 것으로서, 물 속에서 5시간 끓인 후의 함수량이 17% 이하, 포화도가 0.78 이하이어야 한다. 부득이 흡수율이 높은 자연석을 쓰게 될 경우에는 물과 접하는 곳을 방수처리 하여야 한다.

2.2 종 류

2.2.1 산 석

자연풍화로 표면이 마모되어 있거나 착생식물(이끼 등)이 끼어 있는 것을 사용한다.

2.2.2 하천석(강석)

가. 물에 의해 표면이 마모된 것으로서 모서리가 예리하지 않은 것이어야 한다.

나. 단위중량 2.65 ton/m³을 기준으로 하며, 경관효과를 감안하여 크기를 조정할 수 있다.

2.2.3 해 석

바닷물에 의해 돌의 표면이 마모되고 모서리가 예리하지 않은 것이어야 한다. 조개류의 껍질이 부착되어 있는 경우에는 담당원의 승인을 얻어 사용 여부를 결정한다.

2.2.4 가공조경석(무늬조경석)

가. 형태와 질감이 자연석과 유사하고 모서리가 예리하지 않은 것이어야 한다.

나. 무늬조경석은 단위중량 2.65 ton/m³을 기준으로 하며, 경관효과를 감안하여 그 크기를 조정할 수 있다.

2.2.5 파쇄암

가. 풍화로 인해 변색 및 변질되지 않는, 보통암 이상의 내구성과 강도를 지닌 양질의 것으로서, 균열이나 흠집, 얇은 석편 등이 없는 것이어야 한다.

나. 표면에 노출될 부위는 쌓기 전에 미리 면다듬기를 하여 사용하여야 한다.

2.2.6 디딤돌, 징검돌 및 계단돌

가. 보행에 불편을 주지 않을 정도로 윗면이 편평하고, 미끄럽지 않으며, 물고임의 우려가 없는 형상의 것으로서 내구성과 강도를 지닌 것이어야 한다.

나. 디딤돌과 징검돌의 답면 크기는 한 발 딛기용 30 mm 내외, 두 발 딛기용은 50∼60 mm 정도이어야 한다.

다. 계단돌은 윗면이 평평한 자연석, 판석 등을 사용하며 재질, 크기, 모양 등은 설계설계도서에 따른다.

2.2.7 경관용 깔기 자갈

입자의 크기가 고르고 이질재나 불순물을 포함하지 않은 것으로 한다.

2.3 돌틈식생

관목류, 초화류 등 돌틈식생의 품질은 이 시방서 식재공사의 식물재료기준에 준한다.

3. 시 공

3.1 일반사항

조경석 시공 전 운반, 저장 및 취급에 대한 일반사항은 다음과 같다.

3.1.1 조경석을 운반할 때에는 표면이 손상되지 않도록 충분히 유의한다.

3.1.2 착생식물이 부착된 자연석의 운반에는 이중 적재를 금하고 접촉 부위에 완충재를 삽입하여야 하며, 현장에 반입 후에는 착생식물이 고사하지 않도록 수분을 관리하여야 한다.

3.2 경관석놓기

가. 경관석의 배분 및 배치는 암석의 종류, 형상, 색깔 등 조경석 고유의 특징을 살리고 주변과 조화되도록 한다.

나. 조경석 하나하나의 크기, 형태, 색깔 등을 사방에서 관찰하여 가설치하고 위치, 방향, 깊이 등을 검토한 후 담당원의 승인을 받아 본설치를 한다.

다. 조경석을 앉힐 때에는 돌의 뿌리에 해당하는 부분만큼을 땅속에 심고, 돌받침, 돌굄, 콘크리트 뒤채움 등으로 보강한 후 주위 흙을 빈틈없이 밀어 넣으며 다져 흔들리지 않도록 하여야 한다.

라. 돌을 설치하는 작업이 끝나면 돌틈과 주위에 마른 흙을 채워 수평으로 메우고, 채우는 흙의 두께 0.3 m마다 충분히 다진다.

마. 돌을 겹쳐놓을 때에는 설계도면 및 시방서에 따라 흔들거리거나 무너지지 않게 상하, 좌우, 전후의 돌과 잘 맞물리도록 하고 필요에 따라 받침돌, 고임돌, 콘크리트 뒤채움 등을 설계도면 및 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 아래에 놓은 돌은 상부에 높은 돌보다 큰 것을 사용하는 원칙으로 한다.

3.3 조경석쌓기

가. 단위공사에 필요한 조경석이 모두 반입된 후에 쌓기를 시작하는 것을 원칙으로 한다.

나. 안정도를 높이기 위해 기초가 되는 밑돌을 아랫부분에 묻고, 그 위에 큰 돌에서 작은 돌의 순서로 쌓는다. 가장 아랫부분에 놓이는 조경석은 높이의 1/3 이상이 지표선 아래에 있어야 한다.

다. 사전에 지반을 조사하여 연약지반은 말뚝박기 등으로 지반을 보강하고, 필요한 경우 콘크리트나 잡석 등으로 기초를 보완하는 등 하중에 의한 침하를 방지하여야 한다.

라. 조경석 하나하나의 크기, 형태, 색깔 등을 사방에서 관찰하여 가설치를 하고 담당원의 승인을 받아 본설치를 한다.

마. 아래 윗단이 서로 엇갈리게 쌓되, 골쌓기가 되지 않도록 하고, 인접한 돌이 서로 맞물려 흔들림이 없도록 한다. 이때 조경석 사이에 작은 돌을 끼워넣지 않아야 한다.

바. 가장 자연스러운 상태의 면을 전면에 노출시키면서 크고 작은 조경석을 서로 어울리게 배석하고, 시작점과 끝지점 높이는 지반고와 일치시켜야 한다.

사. 1일 시공높이는 1.5 m 이내로 한다.

아. 돌틈식재

1) 쌓기와 동시에 시공하는 것을 원칙으로 하며 공사 중 수목의 뿌리가 햇빛에 직접 노출되어 건조하지 않도록 조치하여야 한다.

2) 양질의 토사로 틈을 채워 식생의 활착을 돕도록 한다.

3.4 디딤돌 및 징검돌놓기

가. 특별히 명시하지 않은 경우, 크기 300 mm 내외의 디딤돌은 상단이 지표면보다 정도 높게 설치하고, 크기 500∼600 mm의 디딤돌은 상단이 지표면보다 600 mm 정도 높게 설치한다.

나. 특별히 명시하지 않은 경우, 징검돌은 상단이 수면보다 150 mm 정도 높게 설치한다.

다. 특별히 명시하지 않은 경우, 디딤돌 및 징검돌의 돌과 돌 사이 간격은 80∼100 mm로 한다.

라. 상단을 수평으로 흔들리지 않게 하고 돌의 장축이 진행방향에 직각이 되도록 설치한다.

마. 분지되는 지점에는 양방향으로의 진행이 불편하지 않은 형태의 돌을 놓는다.

3.5 계단돌놓기

가. 돌의 윗면은 수평으로 놓고 아래 계단부터 윗계단으로 설치한다.

나. 돌의 두께에 맞추어 터파기하고 지반을 다진 후, 거친면을 발판으로 하여 안정되게 놓는다.

다. 놓은 돌이 흔들리지 않게 괴임돌 등을 설치한 다음, 주위에서 흙으로 메우고 다진다.

라. 콘크리트 기초 및 사춤 모르타르를 사용해야 하는 경우에는 설계설계도서에 따른다.

3.6 경관용 자갈깔기

가. 배수기울기를 고려하여 바닥을 정지, 다짐하고, 그 위에 토사분리용 부직포를 깐다. 이때 토사유입을 차단할 수 있도록 부직포의 선단을 지표면까지 오도록 하며, 자갈깔기를 할 때 부직포가 노출되지 않도록 처리한다.

나. 설계도서에 표시된 마감선을 실을 띄워 표시한 후, 이 선에 맞추어 자갈을 깐다.

다. 마감선이 특별히 표시되어 있지 않을 경우에는 주위의 지표보다 자갈의 평균입자 크기만큼 높게 마감선을 설정한다.

라. 침하가 생기지 않도록 자갈을 잘 다짐하고, 다짐 후의 높이가 마감선에 맞아야 한다.

20050 수경시설공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 장은 옥외 및 실내공간에 물을 이용하여 수경관을 연출하기 위한 제반시설의 설치공사에 적용한다.

1.1.2 수경시설은 상수 또는 우수를 활용하여 급수와 배수를 위한 기계설비를 이용한 다양한 형태의 수경관을 연출하는 분수, 캐스케이드, 도섭지 및 인공개울 등 다양한 형태에 적용한다.

1.1.3 또한 수경시설 설치를 위한 구조물의 형태와 시공방법에 따른 분수, 자연석을 이용한 호안 등에 적용한다.

1.2 일반사항

이 시방서는 수경시설의 구조물, 설비공사 및 수중 조명설치공사 전반에 관한 일반사항이다.

1.3 관련 시방절

이 시방서의 관련 시방은 다음과 같다.

1.3.1 조경공사 표준시방서 제16장 수경시설

1.3.2 서울특별시 전문시방서(조경편) 제13장 수경시설

1.3.3 LH공사 전문시방서 91110 분수, 91130 개울 및 소폭포

1.3.4 건축공사표준시방서 20035 관수공사

1.4 참조 표준

KS B 2101	밸브의 용량계수 시험방법

KS B 2103	밸브의 표시 통칙

KS B 2301	청동 밸브

KS B 2304	밸브 검사 통칙

KS B 2332	수도용 제수 밸브

KS B 2333	수도용 버터플라이 밸브

KS B 2340	수도용 공기 밸브

KS B 2350	주철 밸브

KS B 7505	소형 다단 원심펌프

KS D 3503	일반 구조용 압연강재

KS D 3507	배관용 탄소강관

KS D 3536	기계구조용 스테인리스강 강관

KS D 3565	상수도용 도복장강관

KS D 3576	배관용 스테인리스강관

KS D 3595	일반 배관용 스테인리스강관

KS D 3615	도장 스테인리스강관

KS D 3698	냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대

KS D 3705	열간 압연 스테인리스 강판 및 강대

KS D 4101	탄소강 주강품

KS D 4103	스테인리스강 주강품

KS D 4307	배수용 주철관

KS D 4308	덕타일 주철 이형관

KS D 4311	덕타일 주철관

KS D 7004	연강용 피복 아크용접봉

KS D 7006	고장력강용 피복 아크용접봉

KS D 7014	스테인리스강 피복 아크용접봉

KS F 2322	흙의 투수 시험방법

KS F 2405	콘크리트 압축강도 시험 방법

KS F 4052	방수공사용 아스팔트

KS F 4401	무근콘크리트관 및 철근콘크리트관

KS F 4911	합성 고분자계 방수 시트

KS F 4917	개량아스팔트 방수시트

KS F 0506	섬유제품의 두께 측정 방법

KS M 3305	섬유강화 플라스틱용 액상 불포화 폴리에스테르 수지

KS M 3404	일반용 경질 폴리염화비닐관

KS M 3509	포장용 폴리에틸렌 필름

KS M 3805	폴리염화비닐 지수판

1.5 용어의 정의

수경시설이란 자연형, 인공형 재료 및 급수설비방법에 따라 구분할 수 있으며, 물을 이용한 옥내·외 조경구조물과 물이 결합한 시설을 의미한다.

1.6 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 한다. 특별히 명시하지 않은 경우의 제출 시기는 해당 공사 착공 전으로 한다.

1.6.1 현황관련 자료

가. 연결되는 배수로의 위치와 높이를 표시한 자료

나. 급수원의 위치와 분기점의 상태를 나타내는 자료

다. 전기 분전함의 위치와 설치용량을 나타내는 자료

1.6.2 인허가 자료

급수·관수 및 배수시설 설치로 도로굴착이 필요한 경우에는 해당 공정 착수 3일 전까지 관리청의 허가서류를 제출한다.

1.6.3 제품관련 자료

가. 방수액 1통, 배관자재 2 mm, 수중 등 1개를 견본품으로 제출한다.

나. 담당원의 요구가 있을 때에는 방수관련 제품의 견본품과 현장 시공한 시제품을 제출한다.

다. 물 순환장치의 운전 및 유지관리 지침서

1.6.4 시험 및 분석 자료

가. 높이가 2 m를 초과하는 인조암에 대해서는 구조기술사의 승인을 받은 구조계산서

나. 인조암에 대한 재질시험(내연성, 인장강도, 압축강도, 굴곡강도) 성적서

다. 물과 접하는 저수조의 구성재료는 물속에 24시간 침적 후의 함수량과 물 속에서 5시간 끓인 후의 함수량을 조사 기록한 성과표

라. 동력장치의 출력기기 효율에 대한 시험성과표

마. 수압시험 실시기록, 통수시험 실시기록, 펌프작동시험 성적표

1.6.5 시공도

가. 지수판이 설치되는 모든 이음매의 위치를 나타낸 시공도면

나. 저수조의 개구부, 돌출부, 관통부에서의 방수방법을 명시한 도면

2. 자 재

2.1 저수조

2.1.1 일반 콘크리트

인력비빔 또는 레디믹스트 콘크리트 중 설계도서에 명시된 것으로 하되 다음의 조건을 충족시켜야 한다.

가. 콘크리트의 배합설계는 설계압축강도가 21 N/mm² 이상이 되도록 한다.

나. 물시멘트비는 50% 이하로 한다.

다. 굵은골재의 최대치수는 20 mm 이하로 한다.

라. 슬럼프치는 65 mm 이하로 한다.

마. 물고기가 서식하는 저수조는 물고기의 생육에 지장을 초래하는 물질이 녹아나오지 않도록 하여야 한다.

2.1.2 고화제 콘크리트

가. 고화제는 잘 혼합된 균질의 시멘트계 경화재로서, 그 화학적 성분은 제조업자의 지침에 따른다.

나. 물은 깨끗하고 기름, 산, 염류, 유기물 등이 섞여 있지 않아야 한다.

다. 토양의 입도는 제한이 없으나, 큰 흙덩어리나 나무뿌리, 잡초 등을 함유하지 않아야 한다.

2.1.3 수밀 콘크리트

가. 콘크리트의 배합설계는 설계압축강도가 28 N/mm² 이상이 되도록 한다.

나. 물시멘트비는 45% 이하로 한다.

다. 굵은골재의 최대치수는 20 mm 이하로 한다.

라. 슬럼프치는 65 mm 이하로 한다.

마. AE제 또는 AE감수제를 사용하며, 그 사용량은 제조업자의 제품설명서에 따른다.

바. AE제 또는 AE감수제의 사용에 따른 공기량은 3%에서 6% 사이로 한다.

사. 물고기가 서식하는 저수조는 물고기의 생육에 지장을 초래하는 물질이 녹아나오지 않도록 하여야 한다.

2.1.4 벽 돌

가. 압축강도가 21 N/mm² 이상이어야 한다.

나. 물 속에서 5시간 끓인 후의 함수량이 17% 이하이어야 한다.

다. (물 속에 24시간 침적 후의 함수량) / (물 속에서 5시간 끓인 후의 함수량)＝(포화도)라 할 때 포화도가 0.78 이하이어야 한다.

라. 접착용 모르타르는 에폭시 모르타르 혹은 라텍스 모르타르를 사용한다.

2.1.5 타 일

가. 외장용 타일을 사용한다.

나. 접착용 모르타르 에폭시 모르타르 혹은 라텍스 모르타르를 사용한다.

2.2 방수재

2.2.1 벤토나이트

가. 벤토나이트는 수분 공급 시에 건조 시보다 10배 이상의 팽창성을 가지는 것이어야 한다.

나. 벤토나이트는 0.85 mm체의 통과량이 90% 이상이고, 75 ㎛체의 통과량이 10% 이하이어야 한다.

2.2.2 방수막

가. 방수막의 재료는 신축성이 있는 재료로서, 신장률이 200% 이상이어야 한다.

나. 방수막은 5 N/mm² 이상의 인장강도를 가진 것이어야 한다.

다. 방수막 재료는 적절한 접착방법이 확보된 것이어야 한다.

2.2.3 도막방수액

설계도서에 특별히 도막방수액의 종류가 정해져 있지 않을 경우에는 폴리우레탄고무계 도막방수재를 사용한다.

2.3 지수판

가. 지수판은 수분의 침투에 대하여 콘크리트의 이음매를 효과적으로 밀봉할 수 있는 내구성과 탄력성 있고 해당 한국산업표준에 적합한 것이어야 한다.

나. 고무지수판의 재료는 천연고무, 적합한 합성고무 또는 천연 및 적합한 합성고무의 혼성재이어야 한다.

다. 폴리염화비닐지수판(PVC지수판, polyvinyl chloride)의 재료는 폴리염화비닐(PVC, polyvinyl chloride) 기질의 합성고무 플라스틱 화합물재료로 되어야 한다.

라. 지수판은 재질이 치밀하고 균질하게 될 수 있는 공정으로 제조된 것이어야 하며, 구멍과 다른 불순물이 없어야 한다. 지수판의 단면은 전 길이에 걸쳐서 균등하고 대칭이어야 한다.

마. 지수판은 설계도서에 명시된 단면 형태와 치수를 가져야 한다.

2.4 인조암

가. 인조암은 불포화 폴리에스테르 수지와 유리섬유 등을 사용한 유리섬유강화 폴리에스테르(GFRP, glass fiber reinforced plastic) 수지로 만든 것으로 공장제작을 원칙으로 한다.

나. 인조암에 사용된 재료는 햇빛, 건조, 동결, 습기 등에 의하여 변질될 우려가 없는 것이어야 한다.

다. 인조암에 사용되는 재료는 휨모멘트에 대한 응력이 0.7 N/mm² 이상이어야 한다.

라. 유리섬유 사용량은 전체 무게의 25% 이상이어야 한다.

마. 연결철물에 의하여 연결되는 인조암의 부분들은 동일재료로 제작되어야 하며, 색깔, 질감 등에 있어서 동질성이 인정되어야 한다.

바. 인조암의 연결 부위에 사용되는 철물은 스테인리스 자재 사용을 원칙으로 한다.

2.5 배관재료 및 밸브류

가. 급수관은 KS D 3576의 규정에 적합한 배관용 스테인리스강관 STS 304으로 한다.

나. 소켓, 리듀서, 엘보우, 티이, 캡 등의 관이음쇠 재료는 급수관과 동일한 재질의 제품으로 하되, 사용상 해로운 갈라짐, 비틀림, 기공, 주물귀 등의 결합이 없어야 하며, 이음쇠의 양 끝면은 실용적으로 진원이고, 이음쇠의 축에 대하여 직각이어야 한다.

다. 외부에 노출되어 설치되는 밸브류는 손잡이가 분리 가능한 구조를 갖춘 것이어야 한다.

라. 따로 지정하지 않은 경우, 수량을 조절할 필요가 있는 곳에는 글로브 밸브를 쓴다.

마. 따로 지정하지 않은 경우, 관의 개폐에 쓰이는 밸브는 게이트 밸브를 쓴다.

바. 밸브는 사용최고압력이 0.69 N/mm² 이상이어야 한다.

사. 노즐은 설계도면에 명시된 형태와 규격으로 하되, 겉모양이 균일하고 해로운 결함 등이 없어야 하며, 노즐구멍이 수압과 살수형태에 적합한 크기이어야 한다.

아. 펌프는 토출량과 양정에 적합한 것으로 펌프의 크기와 종류는 설계도면에 따른다.

2.6 수중조명기구

본체의 누수 및 램프의 파손을 방지할 수 있는 구조로 만들어진 조명기구를 사용해야 하며, 전기설비기술기준에 적합하게 설치하여야 한다.

2.7 수경용수

가. 환경정책기본법규 제10조 2항에 근거하여 시행령 제2조의 해당 항에 따른다.

나. 수질은 하천, 호소, 지하수, 해역 등 수경시설의 목적에 부합되는 적정수질을 적용해야 하며, 구체적인 사항은 공사시방서에 따른다.

다. 지하수환경기준항목 및 수질기준은 수도법 제4조에 의한 음용수의 수질기준 등에 관한 규칙을 적용한다.

라. 수경시설의 수질은 용도에 따라 각각 다른 기준을 선택하며 일반적으로 표 20050.1의 기준을 적용한다.

표 20050.1  수경시설 용수의 수질기준

항 목	친수용수	경관용수	자연관찰용수
수소이온농도(pH) 생물학적 산소요구량(BOD(mg/[eqn: l]) 부유물질량(SS)(mg/[eqn: l]) 악 취 대장균군수(mPN/100㎖)	6.5∼8.5 3 이하 5 이하 불결하지 않을 것 1,000 이하	6.5∼8.5 6 이하 15 이하 불결하지 않을 것 5,000 이하	5.8∼8.6 5 이하 15 이하 불결하지 않을 것 5,000 이하

2.8 식생 및 어류

식생 및 어류는 계약도서에 명시된 바에 따른다.

3. 시 공

3.1 시공전 일반사항

3.1.1 운반, 저장 및 취급

가. 방수재

1) 벤토나이트 제품은 건조한 상태로 운반, 저장하며, 물이 들어가지 않도록 보호해야 한다.

2)  시트 방수재는 변형이나 손상이 발생하지 않도록 하고, 직사광선에 노출되거나 지표면에 직접 닿지 않게 보관한다.

나. 지수판

1) 지수판은 재료의 주위에 공기가 자유롭게 유통할 수 있게 저장하여야 한다.

2) 지수판은 저장 중 그리고 콘크리트에 부분적으로 묻혀 있을 때 48시간 이상 직사일광을 받지 않게 해야 한다.

3.1.2 측 정

콘크리트 구조체, 거푸집, 미장, 마감, 방수 및 밸브, 펌프, 수중등 등의 부속시설을 포함한다.

3.1.3 시공허용차

가. 물의 순환장치에서의 누수율은 10-6 m³/sec 이내로 한다.

나. 저수조에서의 누수율은 10-7 m³/sec 이내로 한다.

다. 배관은 길이 50 m마다 10 mm 이내로 한다.

3.2 기초, 콘크리트 공사

가. 관련 규준의 시공방법을 적용한다.

나. 터파기로 인하여 발생된 토사처리를 위한 사전계획을 수립한다.

다. 침하 우려가 있는 지반은 기초설치 전에 구조적으로 안전하게 처리하여야 한다.

라. 연못바닥 토사다짐은 함수율 10% 미만으로 다짐하는 것을 원칙으로 한다.

마. 콘크리트 저수조는 수밀하고 동절기에 파손되지 않는 구조이어야 한다.

바. 물고기가 서식하는 저수조는 배설물의 청소가 용이하도록 바닥을 마감하여야 한다.

3.3 방수공사

3.3.1 진흙방수

가. 방수용으로 사용되는 진흙은 투수계수가 10-7 mm/sec 이하이어야 하며, 투수계수가 기준에 미치지 못할 경우에는 벤토나이트를 혼합하여 기준 이하가 되도록 조정하여야 한다.

나. 방수용으로 쓰이는 진흙은 다짐시험을 하여 최대 건조밀도를 얻을 수 있는 함수상태에서 시공하여야 한다.

다. 벤토나이트는 분말상태로 혼합하여야 한다.

라. 방수용 진흙 포설 후 최대 건조밀도의 90% 이상이 나오도록 골고루 다진다.

마. 지반이 침하될 우려가 있을 때에는 진흙을 깔기 전에 보강용 부직포를 깔아야 하며, 부직포는 1 m당 1톤의 인장력에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

바. 진흙의 포설두께는 150 mm 이상으로 한다.

사. 바닥면과 호안의 연결 부위에는 누수를 막기 위하여 진흙 및 폴리에틸렌(PE, poly-ethylene) 필름 등을 겹쳐 축조해야 한다.

3.3.2 방수막 방수

가. 방수막을 지지할 하부의 토양은 충분히 다진다.

나. 방수막의 설치 시 방수막이 찢어지지 않도록 토양의 표면에 요철이나 예리한 돌출물이 없어야 한다.

다. 방수막재는 담당원의 승인을 받은 후 제작자의 지침에 따라 방수막재의 주름과 공기 주머니가 최소가 되도록 설치해야 한다.

라. 방수막재의 이음은 100 mm 이상 겹치게 하여야 한다.

마. 방수막재는 제작자의 지침에 따라 떨어지지 않게 접착시켜야 한다.

3.3.3 도막방수

가. 도막방수재를 도포할 콘크리트 표면에 방수재의 부착 또는 방수시공에 해로운 이물질이 있는지 확인하고 이를 제거하여야 한다.

나. 콘크리트 바닥면에 구멍이나 균열이 있는지 확인하고, 필요에 따라 보완 조치를 하여야 한다.

다. 바탕이 충분히 건조되어 있는 상태에서 시공한다. 콘크리트를 친 후 40일 이후에 하는 것을 원칙으로 한다.

라. 표면조절제는 제작자가 추천하는 양으로 도포하고, 비나 서리로부터 보호해야 한다.

마. 방수재료는 제작자의 지침에 따라 도포하되, 양생된 방수재의 두께는 2 mm를 표준으로 한다.

바. 모서리, 교차부 및 각진 부분에서는 방수재의 두께를 더 두껍게 해야 한다.

3.4 호안축조

3.4.1 자연못

가. 호안축조 시 호안 외부로 물의 유출이 없도록 축조면 방수를 해야 하고, 물로 인한 축조면의 구조적인 약화를 방지하기 위한 지반다짐 및 구조체 보완시설을 해야 한다.

나. 호안축조 시 자연석쌓기를 할 때에는 조경석공사의 해당 규정을 따르고, 호안축조 시 사용되는 목재 등 물에 약한 재료는 방수 및 방부처리를 하여 사용해야 한다.

다. 섬만들기, 취수구, 배수구 등의 시설은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

3.4.2 인공연못

가. 찰쌓기방식의 구조체인 경우 구조체 이면의 용출수를 배수하기 위한 배수구나 맹암거를 설치하여야 한다.

나. 지반과 축조면이 연약한 곳은 사전에 구조보강공사를 한 후 축조면을 조성해야 한다.

다. 호안은 주변 배수체계 및 생태계에 부정적인 영향을 주지 않도록 조성해야 한다.

라. 섬만들기, 취수구, 배수구 등의 시설은 설계설계도서에 따른다.

3.5 표면 및 마감처리

3.5.1 콘크리트제물 마감

가. 거푸집은 손상이 없는 것을 사용하여 해체 후에 마감면의 요철을 예방하고, 요철이 발생하였을 때에는 표면을 평활하게 다듬거나 연마해야 한다.

나. 기타의 사항은 이 시방서 20050에 따른다.

3.5.2 모르타르 마감

가. 보호용 모르타르는 설계도서에 따라 일정두께 이상으로 포설하여야 한다.

나. 모르타르 포설 시 방수면이 손상되지 않도록 하고 최종 마감면을 고르게 해야 한다.

3.5.3 타일 마감

가. 콘크리트구체에 부착되는 타일은 수분흡수율이 낮은 타일을 사용하여야 한다.

나. 타일 부착용 모르타르는 고운 입자의 모래와 접착력이 뛰어난 시멘트를 사용하여야 한다.

다. 타일줄눈은 방수 모르타르나 방수성 충전제를 사용하여 수분이 타일 이면으로 침투되지 않도록 해야 한다.

3.5.4 석재마감

가. 석재로 표면을 마감할 때에는 재료의 이음새 줄눈 사이로 누수되지 않도록 방수모르타르나 방수성 충전제로 처리하여야 한다.

나.  석재부착 시 수분침투에 의한 재료 이탈을 방지하기 위해 고강도접착 모르타르를 사용해야 한다.

3.5.5 조경석마감

가. 조경석의 크기 및 마감높이는 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

나. 콘크리트구체에 자연석을 붙일 경우에는 접착용 모르타르가 외부에 노출된 조경석 표면에 묻지 않도록 하고, 시공 후 즉시 모르타르를 제거한다.

다. 조경석은 절리가 고르며 금이 가거나 깨지지 않은 것을 사용해야 한다.

라. 조경석 쌓기를 할 경우에는 이 시방서 조경석공사의 해당 규정을 따른다.

3.5.6 도장마감

도장재는 내수성이 뛰어난 재료를 사용하고 도장피막에 빈틈이 없도록 도장한다.

3.6 지수판의 설치

가. 지수판은 설계도서대로 제자리에 정확하게 설치하고 콘크리트치기 중 이동되지 않도록 하여야 한다.

나. 지수판은 콘크리트 이음매를 중심으로 양쪽으로 대칭되도록 설치하여야 한다.

다. 콘크리트와 지수판은 그 사이에 공극이 없도록 완전히 채우고 부착하여야 한다. 필요한 경우에는 모래와 시멘트의 반죽 그라우트를 사용할 수 있다.

라. 지수판을 팽창이음으로 설치하는 경우에는 지수판의 방울이 콘크리트의 이음매에 있도록 하고, 이음부 이물질이 퇴적되지 않도록 팽창이음 재료와 봉함재를 설치해야 한다.

마. 봉함재를 사용할 때에는 지수판과 봉함재 사이에 분리용 막대를 끼워서 봉함재가 적절한 역할을 수행할 수 있도록 해야 한다.

바. 설치착오, 거품, 부적한 부착, 투수성, 균열, 어긋남 및 물의 침입으로 지수판의 효과가 훼손될 우려가 있을 경우에는 지수판과 이음매를 제작자의 지침에 따라 보수하거나 대체하여야 한다.

사. 지수판을 이어서 쓸 경우에는 용접하여야 한다.

3.7 배 관

가. 배관의 시공에 앞서 각종 관 및 기기와의 관련사항을 검토하고, 경사를 고려하여 그 위치를 결정한다.

나. 수경용 배관의 기울기는 0.5∼1.0%로 하고, 펌프쪽을 낮게 하여 설치한다.

다. 관은 길이방향에 대하여 직각으로 절단하고, 절단 시 관을 찌그러뜨리지 않는 기구를 사용하여야 하며, 절단 부위는 관의 내·외부가 벗겨지거나, 거스러미가 붙어 있지 않도록 마무리한다.

라. 시공 중에는 관의 개구부로 이물질이 들어가지 않도록 플러그 등으로 막아 놓는다.

마. 배관에 누수현상이 발견되었을 때에는 관 혹은 연결구를 교체하여 수리하여야 하며, 코킹재 등으로 수리하여서는 안 된다.

바. 분수노즐을 설치하기 전에 모든 배관에 고압의 물을 통과시켜 관로 내부의 오물과 이물질을 배출시켜야 한다.

사. 관이 콘크리트 내부를 관통하는 경우에는 콘크리트를 치기 24시간 전에 수압시험을 마쳐야 한다.

아. 지중배관의 되메우기는 배관의 수압시험, 도장, 피복 등이 완료된 후 시행한다.

3.8 수중등

가. 수중등은 렌즈 위로 50 mm 이상의 수심을 확보하여 등이 수면에 노출되지 않도록 설치해야 한다.

나. 전선은 0.75 mm² 이상의 방수용 케이블을 사용한다.

다. 케이블은 수중에서 접속하지 않도록 하고, 접속 시 조인트 박스를 사용해야 한다.

라. 전압은 대지전압 150 V 이하로 한다.

마. 사람의 출입이 우려되는 곳에서는 전원의 1차 전압이 300 V 이하인 절연 변압기를 사용한다.

3.9 펌 프

가. 펌프의 전동기에는 과전류 및 누전 차단기를 부착하여야 한다.

나. 3.7 kW 이상의 유도전동기는 기동장치가 부착되어 있어야 한다.

다. 전동기의 철재 받침 및 펌프의 외벽상자는 접지공사를 하여야 한다.

라. 펌프류의 기초는 기기의 중량 및 외력에 견디고, 설치에 충분한 지지면적을 가지는 철근 콘크리트제로 하며, 지지력이 있는 지반 위에 설치한다. 기초의 높이는 지표면보다 300 mm 높게 하는 것을 표준으로 하며, 표면을 모르타르 마감으로 하고, 주위에 배수구를 설치하여 호칭직경 30 mm 이상의 염화비닐관으로 외부의 배수로에 연결시킨다.

마. 펌프의 설치는 받침대를 기초 위에 수평이 되게 놓고, 펌프와 전동기를 수평 및 직선이 되게 조정하여 볼트로 고정시킨다.

바. 펌프실, 기계실 등에는 시공업자명, 완성년월일, 탱크의 유효용량, 사용기기의 품명, 규격, 제작소명 및 조작용 배관계통을 기록한 플라스틱제의 도판을 부착하여야 한다.

3.10 수질오염방지시설 및 설비

가. 수경시설의 수질오염제어를 위한 수질오염방지기술은 오염물질의 발생원에서 오염물질을 배출에 이르기까지의 종합적인 관리대책을 수립하여야 한다.

나. 수경시설의 목적에 부합되는 수질유지, 기기 및 배관의 보호, 수경시설의 기능유지, 외관보호를 위한 수질오염방지방법을 선정하기 위해서는 원수(原水)의 수질, 보유수의 수량과 수경시설의 규모 및 목적, 수경시설의 주변환경, 유지목표수질을 검토해야 한다.

다. 수경시설의 수질오염방지설비는 물리적 처리, 화학적 처리, 생물학적 처리방법이 있다. 목적에 따라 처리방법을 선정하되, 환경보존법, 건설기술관리법과 공사시방서에 따른다.

3.11 시 험

가. 수압시험은 담당원의 입회하에 실시하여야 하고, 최고 사용수압의 1.5배의 수압에서 30분 이상 실시하여 누수가 없는 것을 확인하여야 하며, 실시 기록은 담당원에게 제출한다.

나. 수압시험은 콘크리트를 치기 24시간 전에 완료되어야 한다.

다. 펌프의 작동을 시험하고, 그 시험성적표를 담당원에게 제출한다.

라. 전동기는 절연저항 및 절연내력을 측정 및 시험하고, 그 시험성적표를 담당원에게 제출한다.

마. 저수조는 설계도서에 표시된 높이만큼 깨끗한 물을 채우고, 48시간 후에 담당원과 함께 누수 여부를 확인해야 하며, 누수가 발견되면 담당원의 지시에 따라 새로운 방수재료로 누수구역을 보수하고, 누수시험을 반복해야 한다. 이때 구조물에 손상이 있으면 보수해야 한다.

20055 조경시설물공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 장은 광장, 공원, 휴게소 및 주거단지 외부 등 옥외공간에 설치하는 조경시설물에 적용한다.

1.1.2 조경시설은 놀이시설, 체력단련시설, 휴식시설, 편익시설, 관리시설, 안내시설, 환경조형시설, 경관조명시설을 포함한다.

1.2 일반사항

조경시설은 설치 장소 및 이용목적에 따라 구분하며 각 시설의 세부적인 시설물 내용은 다음과 같다. 또한 이하의 시설물 이외에 조경공사에 반영된 시설물을 포함한다.

1.2.1 놀이시설은 모래밭, 그네, 미끄럼틀, 시소, 정글짐, 사다리, 회전무대, 회전그네, 조합놀이시설 등 놀이를 목적으로 하는 시설물을 포함한다.

1.2.2 체력단련시설은 이동식 또는 고정식으로 운동을 목적으로 하는 시설 등

1.2.3 휴식시설은 휴게 및 휴식을 위한 시설로서 의자, 파고라 등

1.2.4 편익 및 관리시설은 옥외공간 이용자의 편의를 제공하고 옥외공간 관리를 위한 시설로서 음수전, 울타리 등

1.2.5 안내시설은 옥외에 설치하는 안내판 등

1.2.6 환경조형시설은 옥외공간 내 설치하는 환경조각이나 조형시설 등이며, 문화예술진흥법에 의한 미술장식품과 동일 기능을 수행하기 위하여 수급인은 담당원과 사전 협의·조정 필요

1.2.7 경관조명시설은 안전 및 보안을 목적으로 하는 조명시설 이외의 조경공간의 야간경관 연출을 위한 조명시설

1.3 관련 시방절

이 시방서의 관련 시방은 다음과 같다.

1.3.1 조경공사표준시방서 제17장 옥외시설물

1.3.2 서울특별시 전문시방서(조경편) 제14장 옥외시설물

1.3.3 건축공사표준시방서 20025 조경구조물공사

1.4 참조 표준

1.4.1 참조규격

KS B 1002	6각 볼트

KS C 2306	전기절연용 폴리염화비닐 점착테이프

KS C 4613	산업용 누전차단기

KS C 7501	백열전구(일반 조명용)

KS C 7603	형광등기구

KS C 7607	메탈핼라이드 램프

KS C 8302	소켓

KS C 8321	산업용 배선용 차단기

KS C 8431	경질 폴리염화비닐 전선관

KS D 3501	열간압연 연강판 및 강대

KS D 3512	냉간 압연 강판 및 강대

KS D 5512	납판 및 경납판

KS D 5201	동 및 동합금의 판 및 띠

KS D 6701	알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 조

KS F 1519	목재의 제재치수

KS F 2530	석재

KS F 3510	점토 기와

KS F 4009	레디믹스트 콘크리트

KS F 4514	목구조용 철물

KS K 4001	마 로프

KS M 3811	일반용 메타크릴 수지판

1.4.2 국립산림과학원 목재의 방부·방충 처리기준

국립산림과학원고시 원목규격

국립산림과학원고시 침엽수 구조용 제재규격

1.5 용어의 정의

조경시설은 기능에 의한 유희시설, 편익시설, 관리시설 등을 의미하며, 조경시설물은 식재, 포장, 수경 및 구조물 이외의 옥외시설에 대한 기능과 각각의 시설물에 대한 재료 및 시공에 대한 공사를 의미한다.

1.6 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 하며, 특별히 명시하지 않은 경우의 제출 시기는 해당 공사착공 전으로 한다.

1.6.1 인·허가 자료

전기사용승인서류

1.6.2 제품관련자료

가. 도안 및 색채자료를 포함한 지붕재, 부속자재에 대한 제품자료와 기성제품시설의 제작 및 설치도면, 시방서 등 관련 자료를 제출한다.

나. 다음의 견본을 제출한다.

1) 조명기구 견본품 각 1개 (조명특성 및 배광곡선 포함)

2) 울타리 종류별, 규격별 1경간

3) 방부처리된 목재 (총량 1 m³ 이상)

4) 보온재 1 m² (또는 1 m)

5) 조직을 확인할 수 있는 석재 견본 (종류별 1개)

6) 기타 필요한 견본

다. 조립제품인 경우 부품 개요와 수량, 목록이 작성된 부품개요서 및 유지관리지침서를 제출해야 한다.

라. 조립형 놀이시설 등 기성제품의 제작 및 설치도면, 시방서, 보증서, 설치 및 유지관리지침서 등 관련 자료를 제출해야 하며, 외국어로 표기된 것은 우리말로 번역·제출한다.

1.6.3 시험 및 분석자료

가. 목재방부 및 건조에 대한 시험성과표 및 확인서 등을 시설물 반입 시 담당원에게 제출하여 확인을 받는다.

나. 시공 중에 시행한 목재, 석재, 철재, 기타 시설물 재료에 대한 관리시험성과표를 제출한다. 이때 품질시험 시행 자격을 갖춘 자의 서명 날인이 있어야 한다.

다. 다음에 규정하는 현장관리시험을 실시하고 그 자료를 제출하여야 한다.

1) 경화된 콘크리트 : 배합이 달라질 때 또는 150 m³마다 KS F 2405에 의한 압축강도시험

2) 석재 : 재질변화시마다 KS F 2519에 의한 압축강도시험

3) 기타 : 10,000매당 3매씩의 KS F 3510에 의한 휨파괴 하중시험

1.6.4 시공도

가. 시설물의 설치 세부시공도, 환경조형작품의 사용재료, 기술시방 등을 포함한 세부제작도. 시공도는 토공, 기초, 가공, 마감 등을 포함하여야 한다.

나. 안내시설의 안내문, 도형 등 세부도형작업이 필요한 경우 색채의 배합을 포함한 세부도면

2. 자 재

2.1 일반사항

가. 검증된 내구재를 사용하여야 하며, 신자재는 내구성시험에 합격한 것이어야 한다.

나. 금속재는 도장 또는 도금처리 되고, 목재는 방부처리 되어야 하며, 플라스틱재는 자외선에 안정한 것이어야 한다.

다. 모든 재료와 처리과정에서 인체에 유해한 물질이 있어서는 안 된다.

라. 고정철물이나 연결재 및 덮개는 부식되지 않는 것이거나 부식방지 코팅처리 되어야 하며, 공구를 사용하지 않고는 풀리거나 빠지지 않아야 한다.

마. 사용재료의 치수 및 품질은 설계도서의 지정에 따르되, 별도의 규정이 없을 때는 마감치수로 하며, 품질 및 성능이 우수한 시중 최상품으로 하며 이 경우 시공 전에 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

바. 제출된 재료 견본품 및 석조 견본품 등 자료는 준공 시까지 비치한다.

사. 기성제품은 원칙적으로 공장에서 제작하여 현장에 반입 후 설치한다.

2.2 목재, 콘크리트, 철재 및 스테인리스강, 석재, 페인트

목재, 콘크리트, 철재 및 스테인리스강, 석재, 페인트 등은 각기 해당 공사의 시공기준을 따른다.

2.3 합성수지

2.3.1 일반사항

오랜 시간 자외선에 노출되더라도 변질되지 않는 제품으로 한다.

2.3.2 FRP 인조암

이 시방서 수경시설공사의 해당 규정을 적용한다.

2.3.3 아크릴판

가. KS M 3811의 규정에 적합한 일반용 메타크릴 수지판으로, 메타크릴산 메탄올 80% 이상 포함하여야 한다.

나. 광선투과율 91% 이상, 하중변형온도 85℃ 이상이어야 한다.

다. 육안으로 확인하여 금 간 곳이 없고 색이 균일하여야 한다.

2.3.4 비닐 시트

외부 환경변화에 의한 수축이나 이완이 없어야 하며, 자외선에 의한 색상변화에 안정해야 한다.

2.4 점토제품

2.4.1 점토벽돌

가. 벽돌은 KS L 4201의 규정에 적합하게 제작된 제품 또는 동등 이상의 미장벽돌 3종으로서, 벽돌쌓기에 지장을 주거나 강도의 저하 및 내구성을 해치는 균열이나 결함이 없어야 한다.

나. 천연점토 또는 점토와 황토를 혼합하여 성형, 건조, 고온 소성시켜 제조한다.

다. 벽돌 평균 흡수율은 7% 이내이어야 하고, 시료 각각의 흡수율은 10% 이내이어야 하며 외관상 강도의 저하나 내구성을 해치는 균열이나 결함이 없고 색상이 미려해야 한다.

라. 허용차 : 길이방향 ±2 mm, 두께 ±3 mm

2.5 지붕재

2.5.1 아스팔트 싱글

가. 아스팔트 싱글의 색상은 갈색, 적색, 청색 및 녹색으로 한다.

나. 육안으로 보아 구멍이나 실금, 헤진 곳, 움푹 들어간 곳이나 모서리가 깨끗하게 절단되지 않는 등의 결함이 없어야 하며, 시공 후 열이나 햇볕에 의하여 서로 엉겨 붙는 점착성이 있어야 한다.

다. 길이와 폭은 설계도서에 명시된 규격의 ±3 mm 이내이어야 한다.

2.5.2 대나무발

가. 대나무는 재령 3년 이상으로 충분히 건조된 것으로서 곰팡이, 기타 오염이 없어야 한다.

나. 대나무발 한쪽의 폭이 15 mm 이내이고, 대와 대의 간격은 5 mm 이하로 하고 PVC코팅 철선으로 단단히 엮어야 한다.

2.5.3 점토기와

가. 기와는 KS F 3510의 규정에 적합한 공장제품의 점토기와로 휨파괴하중 20 N/mm² 이상, 흡수율 12% 이하이어야 한다.

나. 표면 및 상하 마구리면은 평활해야 하며, 옆면은 심한 요철이 없고 모서리가 파손되지 않은 것으로 균열, 모래구멍, 비틀림, 기타 사용상 지장이 있는 흠이 없어야 하며, 내부까지 충분히 소성되어야 한다.

2.6 환경조형재료

가. 작가의 설계에 따른다. 주변시설은 해당 공사의 관련기준을 적용한다.

나. 강관은 휨곡률이 일정하고, 주름, 졸림, 찌그러짐이 없는 것을 사용하여야 한다.

2.7 전기, 조명재료

2.7.1 소켓 및 기타재료

가. 기구에는 사기제 또는 절연내열성 소켓과 내식성이 있는 설치용 철물 홀더 등을 사용하고 내열성 인출선의 길이는 150 mm 이상으로 한다.

나. 기구, 안정기, 기타 용기 등의 금속부분은 확실하게 접지할 수 있는 구조이어야 한다. 단, 손이 닿을 우려가 없는 장소에 사용하는 것이나 2차 정격전압이 150 V를 넘더라도 대지전압이 150 V 이하에서 사용하는 것은 예외로 할 수 있다.

다. 전면 유리, 렌즈, 글로브는 어느 것이나 청소 및 개폐가 용이하고 위험이 없는 구조이어야 하며, 유리면은 기포나 흠, 흐림이 없고 온도차, 충격 등에 견디는 것이어야 한다.

2.7.2 금속 반사갓

가. KS C 8009의 규정에 적합한 양질의 제품으로서 직경 300 mm 이상의 것은 두께 0.6 mm 이상의 강판으로 제작된 것이어야 한다.

나. 용도에 따라 사용하며, 광축이 바르게 지시하는 방향에 소요광도를 낼 수 있어야 하며 녹막이처리된 것이어야 한다. 반사면은 확산성이 좋은 것으로서 기구효율 75% 이상이어야 하며, 알루미늄 반사 등을 사용할 때는 이에 준한 정도 및 효율에 따라야 한다.

2.8 울타리, 난간, 문주용 강관

가. 잔디울타리 원형 철근은 KS D 3051의 규정에 적합한 열간압연 원형봉강으로 한다.

나. 철제울타리, 난간 등에 사용하는 각관은 KS D 3568의 규정에 적합한 일반구조용 각형강관으로 하고, 막음용 재료는 KS D 3503의 규정에 적합한 일반구조용 압연강재로 한다.

다. 문주용 강관은 KS D 3507의 규정에 적합한 일반배관용 탄소강관(흑관) 또는 KS D 3536의 규정에 적합한 오스트나이트계의 기계구조용 스테인리스 강관으로 한다.

2.9 기타 재료

2.9.1 중고타이어

설계도서에 명시된 규격으로 하되, 표면에 철선이 노출되거나 마모 정도가 심해 구멍이 뚫린 것, 찢어진 것, 오염된 것 등을 사용해서는 안 된다.

2.9.2 모래밭 모래

4.75 mm(No. 4)체 통과율이 98%, 2.58 mm(No. 8)체 통과율이 73% 이상이어야 한다.

2.9.3 아스팔트 싱글 고정못

고정못은 길이 20 mm, 머리직경 10 mm 이상의 아연도금못을 사용한다.

2.9.4 기와 고정못, 결속선, 진흙 등

가. 기와의 고정못은 직경 2.4 mm, 길이 450 mm 내외의 구리못 또는 아연도금못으로 한다.

나. 결속선은 직경 0.9 mm 동선이나 아연도금 철선 또는 콜타르 철선을 2줄로 하여 사용한다.

다. 누름방지용 반죽은 충분히 이겨서 사용한다.

3. 시 공

3.1 시공 전 일반사항

3.1.1 운반, 저장 및 취급

가. 시설물 설치공사와 관련된 모든 재료는 적정 장소를 선정하여 종류별로 보관하여야 한다.

나. 시설 제작 및 설치에 사용될 제품 및 재료가 외기의 영향(햇빛, 건조, 동결, 수분 등)을 받아 변질되지 않도록 바람이 잘 통하는 창고 또는 덮개시설이 있는 장소에 보관하여야 한다.

다. 아스팔트 싱글

1) 옥외에 방치하거나 지면에 닿지 않도록 하고, 패널 등의 위에 보관하되 1.2 m 이상의 높이로 적재해서는 안 된다.

2) 옥외보관이 불가피한 경우 덮개로 씌워 태양광선 및 비 등을 막아주어야 한다.

3.1.2 측 정

가. 조립시설물설치

1) 검측 단위는 동, 개소, 조 등으로 한다.

2) 수량은 설계도서에 의해 설치, 완료된 개수를 의미하며 설치 후 뒷정리까지 끝난 상태를 기준으로 한다.

나. 관리시험

시험비용은 품질관리계획이 제출되어 승인되고, 이 계획에 따라 수행한 후 담당원 또는 감리자가 확인한다.

3.1.3 시공허용차

가. 수직부재 : 높이 1 m마다 수직 수평방향으로 ±5 mm

나. 수평부재 : 길이 2 m마다 ±5 mm

다. 바닥과 지붕의 목재 여유 틈은 최대 1 mm를 넘어서는 안 된다.

라. 바닥마루판 사용 목재는 요철 및 거친 면이 없이 정밀히 시공되어야 한다.

3.2 토공 및 기초

가. 시설물의 설치와 관련된 기초공사 또는 연관공사는 해당 공사의 관련기준을 적용한다.

나. 놀이시설의 기초지반이 불량한 경우에는 연약지반 개량, 잡석다짐 등을 시행하여 지반을 안정시킨 후에 기초 콘크리트를 친다.

다. 기초가 노출되거나 노출될 우려가 있는 부분의 모서리는 모따기를 한다.

라. 철근을 배근하기 전에 녹이나 먼지, 기름, 기타 콘크리트의 부착력을 감소시킬 위험이 있는 이물질을 제거하고 청소하여야 한다.

3.3 조립형 시설물 제작 설치

가. 기성제품은 제조업자의 제작 및 설치시방과 도면에 따라 설치하되, 이 시방서의 관련규정을 우선 적용한다.

나. 각 부재의 연결 상태가 양호하여 흔들림이 없어야 하며, 도장된 면에 흠이 있어서는 안 된다.

다. 방부목재, 침투식 착색목재, 특수합판 등의 목재는 시설물의 기능에 지장을 줄 수 있는 홈이나 갈라진 곳이 없어야 한다.

라. 시설 설치 시 규준틀로 균형을 잡아서 수직, 수평이 되도록 시공하여야 한다.

마. 시소, 그네, 회전무대 등 회전부위는 회전이 원활해야 하며, 소음이 없어야 한다.

바. 철재공사, 목재공사, 도장공사 등은 해당 공사의 관련 항목에 따른다.

3.4 놀이시설

3.4.1 일반조건

가. 모든 놀이시설의 개구부에 머리나 목이 끼일 위험을 줄일 수 있는 구조로 제작, 조립되어야 한다.

나. 뾰족한 부분이나 모서리의 경계부는 최소 곡률반경 6 mm 이내로 가공하여야 한다.

다. 돌출부는 튀어나온 부분이 없어야 한다.

라. S자형, L자형, 펠리컨형의 훅 등은 서로 맞닿아 있어야 하며, 1 mm 이상 벌어짐이 없어야 한다.

마. 어느 한 부재가 움직여 부재끼리 서로 맞물리거나, 고정된 지지대와 움직이는 부분을 받쳐주는 부재 사이가 서로 맞물려 생기는 개구부로 인한 끼임, 물림, 베임이 없도록 시공하여야 한다.

바. 놀이시설 부재 사이에 매달려 있거나 바닥과 45° 이내의 수평각도를 이루는 놀이부재 사이에 케이블이나 와이어, 로프 등은 변형 구성품을 사용해서는 안 되며, 매달린 부재는 밝게 채색하거나 주위 시설과 대비되어 눈에 잘 띄도록 하여야 한다.

3.4.2 모래밭

가. 바닥은 침하를 대비하여 진동기로 다짐한다.

나. 모래를 깔기 전의 바닥면은 배수를 위한 경사도를 유지하여야 한다.

다. 모래깔기의 두께는 전면에 걸쳐서 일정해야 한다.

라. 모래막이는 지면에 수직으로 설치하고, 상단부는 수평을 유지하여야 한다. 안쪽 모서리 부분은 모따기로 둥글게 마감하여 위험성이 없게 하여야 한다.

3.4.3 그 네

가. 그네의 줄이 체인일 경우는 가공이 정확한 것으로서 서로 연결되는 고리가 일정하여야 한다.

나. 줄 상단의 베어링은 좌우로 흔들리지 않아야 하며, 마모 시 교체할 수 있도록 설치하여야 한다.

다. 그네 베어링집은 정밀하게 조립하여 풀리지 않도록 하여야 한다.

라. 발판은 균형이 맞고 연결부분은 파손되지 않도록 단단하게 결속시켜야 한다.

마. 발판으로 타이어를 이용할 때에는 중고품을 사용하고 연결부위는 철판 등을 덧대고 연결하여 흔들림이 없게 하여야 한다.

3.4.4 미끄럼틀

가. 미끄럼면은 국부적인 요철이 없으며 미끄러워야 한다.

나. 스테인리스 미끄럼판은 롤 스테인리스 통판을 사용하며, 부득이 연결할 때는 아르곤 선 용접을 한 후 용접부위를 평활하게 다듬어 기능 및 미관상 지장이 없도록 한다.

다. 미끄럼면을 목재로 할 경우에는 목재의 결을 활주방향으로 맞추어야 한다.

라. 회전미끄럼틀의 미끄럼면은 원심력을 고려하여 안쪽으로 경사지게 한다.

마. 미끄럼면 최하단의 앉음판은 배수를 위해 4% 바깥쪽으로 경사지게 시공한다.

바. 손잡이 부분은 잘 다듬어야 하고 각 부분의 곡률이 일정하여야 한다.

사. 설계도서에 별도로 정하지 않은 경우, 모래판 및 지면에서 최종 미끄럼면까지의 이격거리는 200 mm를 넘어서는 안 된다.

아. 미끄럼틀의 손잡이 부분과 미끄럼판의 시작 부분은 잘 다듬어져야 한다.

자. 착지판과 미끄럼면의 연결부는 급속한 감속으로 신체가 전도되지 않도록 곡면으로 처리하여야 한다.

차. 회전미끄럼틀을 제외하고는 좌우가 수평을 유지하도록 하여야 한다.

카. 미끄럼틀의 상단 아치형 관은 곡률이 일정하여야 한다.

3.4.5 시 소

가. 지지대와 플레이트 연결 부분의 회전이 원활하도록 제작하여야 한다.

나. 좌판이 지면에 닿는 부분에 폐타이어 등을 박아 충격을 줄여야 한다.

다. 철재와 목재의 접착 부분은 방부제를 도포한 후 접착시켜야 한다.

라. 널판과 철판의 연결 부위는 완전히 부착되어야 한다.

마. 각 연결 부분에는 주유가 가능하도록 오일 주입구를 만들어야 한다.

바. 타이어 받침은 이용에 불편이 없도록 일정한 높이를 유지하여야 한다.

사. 널판은 무게의 중심이 균형을 쉽게 이루도록 설치해야 한다.

아. 설치 완료 후 타이어 내부에 고인 빗물을 처리하기 위해 직경 10 mm인 배수구를 5개소 이상 뚫고, 돌출된 철선은 깨끗이 제거하여야 한다.

3.4.6 사다리, 정글짐

가. 가로로 설치되는 파이프는 서로 평행되게 하여야 한다.

나. 수직부재와 수평부재의 연결부위는 용접 후 요철이 없도록 매끈하게 연마기로 연마해야 한다.

다. 원형으로 제작되는 부재는 전 길이에 걸쳐 곡률반경이 일정해야 한다.

라. 구형일 때 정면 및 평면의 곡률은 전 길이에 걸쳐 일정하여야 한다.

3.4.7 회전무대, 회전그네

가. 회전축은 관리를 위한 주유가 필요 없는 베어링으로 설치하며, 굴곡이 없어 회전이 원활하여야 한다.

나. 바닥철판은 무늬철판 원판의 사용을 원칙으로 하되, 부득이 철판을 연결하여 사용할 경우에는 지지용 강관 상단에서 용접하여 철판이 견고하게 부착되도록 한다.

다. 회전이 원활하도록 하며, 회전축이 일직선이 되어야 한다.

라. PP로프의 마모가 예상되는 접속 연결 부위에는 타이어 튜브를 감아주고 손잡이 매듭은 풀어지지 않도록 하여야 한다.

3.4.8 조합놀이시설

가. 각각의 단일 시설은 각 시설의 시방에 준하여 설치한다.

나. 각 기능 간에 마찰로 위험성이 있는 곳은 유의하여 시공한다.

다. 움직이는 기능의 접합은 손상되지 않게 고정하고 이탈되지 않게 하여야 한다.

라. 상부판은 물이 고이지 않도록 배수조치를 취한다.

3.4.9 모험유희시설

가. 어린이의 유희, 건강, 안전 및 정서함양에 이바지할 수 있고 모험, 창조적인 놀이가 가능한 시설에 적용한다.

나. 새로운 유형의 시설은 기능성, 안전성, 내구성을 검토한 후 적정하다고 판단될 경우 도입해야 한다.

다. 일반적인 사항은 각 단일유희시설의 시방에 따른다.

라. 설치 후에는 시공 후 평가를 하여 시설의 구조 및 기능의 적정성을 평가하여야 한다.

3.4.10 민속놀이시설

가. 민속널뛰기, 민속그네, 줄타기, 말차기, 고누, 장대타기 등 전통적 민속놀이시설에 적용한다.

나. 민속놀이시설의 도입은 전통적 의장이 고려되어야 하며 기능성과 안전성, 내구성을 검토한 후 적정하게 도입한다.

다. 민속널뛰기의 널받침, 민속그네의 좌판 등은 내마모성을 고려하고, 내마모성 고무와 탄성고무를 사용할 때는 목재에 준한 경도 이상이어야 한다.

라. 민속그네는 로프의 꼬임현상이 없어야 하며, 그네의 회전반경과 안전거리를 고려하여 여유 공간을 확보하여야 한다.

마. 줄타기 로프는 처짐 방지를 위해서 연결할 때 완전히 당긴 후 턴 버클조립을 해야 하며, 로프와 맞닿는 판재 부분은 로프와 동일한 폭만큼 절단하고 로프의 마모방지를 위하여 모서리는 라운딩 처리해야 한다.

바. 말차기 및 고누의 선긋기는 융착식 도로표지용 도료나 열 부착테이프를 사용하여 시공하여야 한다.

사. 기초는 지반 상태가 불량할 경우 침하 등이 발생되지 않도록 철근콘크리트 구조 등의 방법으로 시공하여야 하며, 연결부와 고정 부위 등은 느슨하거나 풀어짐이 없도록 하고 비틀림이나 휘어짐이 없도록 정밀하게 마감하여야 한다.

3.4.11 폐자재를 이용한 유희시설

가. 폐자재의 모서리, 접합 부분, 절단 부분 등 위험한 곳은 연마하여야 한다.

나. 폐자재는 환경오염이나 이용자의 안전에 대한 사전검증을 거친 후 도입한다.

다. 유희시설의 조기노화를 방지하도록 지속적으로 관리해야 한다.

라. 폐타이어는 설계도서에 표시된 규격으로 하되, 타이어 표면에 철선이 노출되거나 마모 정도가 심해 구멍이 뚫린 것, 찢어진 것, 오염된 것 등을 사용해서는 안 된다.

3.5 체력단련시설

가. 기구사용 안전거리를 확보하고, 미려하고 견고하게 설치되어야 한다.

나. 이동식 시설의 고정용 장치는 사용하지 않을 때 지상으로 돌출되지 않도록 처리해야 한다.

다. 체력단련 안내판은 안내시설 설치방법에 따른다.

라. 등을 뉘게 되는 의자 윗면은 동일 수평면에 있도록 하고 4주면은 반구형으로 모따기 하여야 한다.

마. 발걸이 가공철물은 단단하게 몸체에 고정하고 매끈하게 연마하여야 한다.

바. 지주 파이프 상부는 반구형의 철판으로 막음용접하여 빗물이 들어가지 않도록 하여야 하며, 철봉의 파이프가 돌아가지 않도록 견고히 설치하여야 한다.

사. 손잡이 파이프의 간격은 일정하여야 하며, 마구리는 동일 재료로 막음 처리해야 한다.

아. 고무판걸이(스테인리스 환봉 [eqn: phi`]10)는 손으로 고무판을 쳤을 경우 원위치로 돌아오도록 가공하여야 하며, 고무판 가장자리는 샌드페이퍼 등으로 매끄럽게 한다.

자. 손잡이 부착 시 스테인리스강관 관통 후 돌출부는 10 mm 이내로 하고 마구리 및 지주 강관 상부는 스테인리스 강판으로 막아야 한다.

차. 회전축 및 균형판은 수평을 유지하여야 하며, 베어링 이탈 방지용 철물과 베어링과의 간격은 2∼3 mm 이내로 한다.

카. 회전축은 녹 방지용 도장을 실시하여야 한다.

타. 사용되는 타이어는 모두 동일 규격이어야 한다.

파. 타이어 내 착지면은 평활하게 고른 상태여야 한다.

하. 스테인리스강관 마구리는 모두 동일 재질로 막아야 한다.

갸. 스테인리스강관 제작 시 상단 예각부는 절단하여 용접접합하며, 하단부는 매끄럽게 절곡하여야 한다.

냐. 강관의 곡률 및 간격은 일정하여야 하며, 마구리는 동일재질로 막아야 한다.

3.6 휴식시설

3.6.1 일반사항

가. 높이가 높은 시설물은 창문 및 발코니 전면을 피해 설치한다.

나. 경사면에 설치할 때는 시설물이 수평이 되도록 지반을 조성하며, 급경사 지역은 자연석 쌓기 및 기타의 방법으로 보완하여 기반을 안정시킨 후 설치한다.

3.6.2 의자, 야외탁자

가. 재료에 따라 목재공사, 철재공사, 기초·콘크리트 공사 등의 관련규정을 적용한다.

나. 받침기둥이 콘크리트 구조체인 경우에는 정밀한 거푸집공사로 별도 제작하고, 거푸집 해체 후 요철부위는 그라인더로 평활하게 다듬는다.

다. 등받이 의자의 등과 맞대는 면의 경사각은 앉은 자세에서 편안하고, 전 길이에 걸쳐 일정해야 한다. 따로 정하지 않은 경우의 경사각은 110°로 한다.

라. 등의자 좌판 및 등판을 구조체와 볼트로 연결할 때는 볼트의 머리 부분을 판에 묻히게 하고 구멍을 매립하여야 한다.

마. 사각의자의 4면이 이어지는 부분은 동일한 예각으로 완전맞춤이 될 수 있도록 한다.

바. 볼트 접합부위는 접착제를 덮어 빈틈이 없도록 하고 볼트는 충분히 조여야 한다.

사. 볼트의 구멍은 정면에서 보아 일직선상에 있도록 해야 한다.

아. 발밑 부분은 배수가 잘되도록 처리한다.

자. 이동식 야외탁자는 지지부위가 균형을 이루도록 수평을 정확히 맞추어야 한다.

차. 기초 콘크리트 상단은 스테인리스 강판 조립 시 틈이 발생치 않도록 콘크리트를 칠 때 평탄하게 마무리되어야 하며, 기초 콘크리트에 삽입하는 앵커 위치에는 먹줄놓기를 하여 앵커가 수직으로 놓이도록 주의하여 시공한다.

3.6.3 파고라

가. 목재 기둥 파고라의 경우 지표면에 바로 접하는 부위는 목재방부처리 외에 콜타르 도포 등 추가적인 방부조치를 시행한다.

나. 기둥과 횡보는 수직을 이루어야 하며 접속부위의 긴결을 견고하게 하여 움직이지 않도록 해야 한다.

다. 기둥을 벽돌쌓기로 할 경우 조직 내부에는 별도의 이형철근을 배근하고 콘크리트로 충진해야 한다.

라. 기울어진 지붕의 경우 기울기는 일정하게 시공한다.

마. 파고라의 지표면은 물이 고이지 않도록 다른 곳보다 약간 높게 설치하거나 표면 기울기를 주어 원활한 표면배수가 되도록 해야 한다.

3.7 편익시설, 관리시설

3.7.1 음수전

가. 겨울철 동파를 방지하기 위한 보온시설 및 퇴수시설을 설치하여야 한다.

나. 급수배관은 배관공사시방을 적용하며, 음수대에 별도의 제수밸브를 설치하여야 한다.

다. 물이 떨어지는 바닥면은 배수구 쪽으로 경사를 두어 물이 고이지 않도록 하고, 표면수를 투과시킬 수 있는 표면마감 재료를 사용하여야 한다.

라. 배수구는 청소가 용이하도록 설치한다.

3.7.2 화분대(플랜터)

가. 플랜터 식재식물의 최소 생육토심을 확보하여야 한다.

나. 수목이 식재되는 토양 부분은 배수구를 설치하여 배수관에 연결시켜야 한다.

다. 플랜터의 토양은 플랜터의 최상부보다 낮게 하여 관수나 강우 시에 플랜터 내의 토양이 외부로 흘러나오지 않도록 한다.

라. 석재 플랜터는 가장자리와 코너 부위를 둥글게 마감하여 예각에 의한 파손을 최소화한다.

마. 사각형 플랜터의 코너부위는 예각접속을 피하기 위해 통돌을 사용하고, 이 경우에 별도의 가공품을 적용한다.

3.7.3 울타리 및 잔디보호책

가. 곡선 또는 원형으로 가공되는 부분은 그 곡률이 일정해야 한다.

나. 연결부분의 용접을 견고하게 하여 떨어지지 않도록 한다.

다. 직선부는 수직, 수평을 유지하고 간격이 일정하여야 하며, 시공 도중의 충격으로 기초 콘크리트와 지주강관이 이완되지 않도록 유의하여야 한다.

라. 경사지에 설치하는 경우에는 경사면과 평행하게 설치하되, 간살은 수직으로 설치해야 한다.

마. FRP 펜스의 직선부재는 인접한 직선부재와 평행하여야 하며, 횡대와 세로대를 접착제로 완전히 접착한 후 볼트 조임을 해야 한다.

3.7.4 휴지통

가. 볼트 연결부의 결속작업은 휴지통의 여닫음 등 오물 수거 시 원활하게 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

나. 스테인리스 강판 용접 부위는 연마 등 마무리 작업을 시행하여 평활하게 다듬어야 한다.

다. 통의 내부 바닥에 물고임이 발생하지 않도록 물빠짐 구멍을 뚫어야 한다.

3.7.5 시계탑

가. 형태, 구조, 재료, 색상, 기능 등은 설계도서 및 공사시방서에 따르되 식별성이 확보되어야 한다.

나. 야간 이용을 위해 주변에 조명을 설치하거나 옥외조명 시설의 위치를 감안하여 위치를 선정한다.

3.7.6 자전거보관대

가. 자전거 보관대는 고정형과 이동형으로 구분하여 설치한다.

나. 도난이나 파손을 방지하기 위해 잠금장치를 설치한다.

다. 고정식의 경우 가급적 강우, 강설, 일사광 등으로부터 자전거를 보호하기 위한 지붕을 설치한다.

라. 지붕천막로프 연결 시 장력이 균일하게 작용하여 처지거나 주름이 생기지 않도록 팽팽하게 시공하여야 한다.

3.8 안내시설

3.8.1 제작, 설치

가. 기초는 기초 및 콘크리트 공사의 해당 규정을 따르며, 설치에는 수직 및 수평이 맞아야 한다.

나. 바닥 기초와 볼트, 너트로 결합을 철저히 하여 바람에 의하여 흔들리거나 넘어지지 않도록 조치한다.

다. 기초부분에 목재를 사용할 경우에는 지면에 접착되는 부분에 방부처리를 하고, 철재를 사용할 경우에는 이중 도장을 하여 녹슬음을 방지하여야 한다.

라. 형강은 녹막이 페인트를 2회 도장한다.

마. 안내 및 표지판은 먼저 판을 제작 및 인쇄하고 지지용 스테인리스강관 용접설치 시에 인쇄 부분에 손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

바. 안내판은 설치 위치에 따라 이용자가 전방을 주시했을 때 안내도와 실제 건물배치 방향이 일치하도록 도안하여야 한다.

3.8.2 접 합

가. 고정 및 접합 부분은 손상 시 교체가 가능하도록 용접을 피하도록 한다.

나. 각 접합부는 빗물이 새지 않도록 코킹재 주입 등 적절한 조치를 하여야 한다.

3.8.3 표기 및 인쇄

가. 수작업에 의한 표기에는 작업 전에 글씨체와 문양에 대한 협의를 하여 시공결과물의 오차범위를 줄여야 한다.

나. 인쇄에 의할 때에는 필름판 제작 시 각 색상별로 차이가 없도록 처리해야 하며, 제판 시 스크린사의 재료는 스크린의 망이 일정한 것을 사용하고, 인쇄시에 색상별로 정확하게 부착 및 인쇄하여 인쇄도 중 밀리거나 수축하여 색이 이중으로 중복되지 않게 하여야 한다.

다. 표지판의 화살표는 주요시설의 방향을 8방향으로 구분하여 양면 인쇄한다.

라. 인쇄용 잉크는 색도가 선명하고 질이 좋은 잉크를 사용한다.

마. 석재바탕은 글자새김의 경우 형태와 크기는 설계도면에 의하며, 글자의 깊이는 특별히 정하지 않는 한 글자 폭에 대하여 1/2 내지 같은 치수로 하고, 글자를 새기는 순서는 글자를 쓰는 순서와 동일하게 한다.

바. 금속판이나 법랑판 인쇄의 경우 열처리하고, 표면을 깨끗이 닦은 후 비닐시트지를 부착하고 조각의 경우에는 표면에 마감도료를 칠하고 먼지 등의 이물질이 없는 곳에서 경화시킨다.

3.8.4 도 장

가. 지지용 스테인리스강관 및 강판은 헤어라인 처리를 하며, 밴딩 부위에 굴곡이 심하지 않아야 한다.

나. 기둥 상부는 스테인리스강판으로 마감하여 기둥 내로 빗물이 스며들지 않도록 한다.

다. 글씨 및 문양표기 작업이 끝난 후에는 마감표면상태를 정리하고 각 재료에 따른 적정한 보호양생조치를 해야 한다.

라. 금속판이나 법랑판 인쇄의 경우 열처리를 하고, 표면을 깨끗이 닦은 후 비닐 시트지를 부착하고 조각의 경우에는 표면에 마감도료를 칠하고 먼지 등의 이물질이 없는 곳에서 경화시킨다.

마. 정전도장, 분체도장, 전착도장 등은 도장공장에서 작업하도록 해야 하며, 필요한 경우에는 제작공장의 시설에 대한 사전검사를 해야 한다.

3.9 환경조형시설

3.9.1 적 용

가. 환경조형시설은 조경 내에 설치하는 환경조각이나 조각공원의 조각설치에 적용한다.

나. 기념비, 환경조각, 석탑, 상징탑, 부조, 환경벽화 등 예술성과 환경이 조화를 이룰 수 있는 시설물을 포함한다.

3.9.2 제작, 설치

가. 제작 및 설치시공은 작품을 구상한 설계자 및 작가의 기본구상과 설계 의도에 적절한 작품을 제작하여야 한다.

나. 환경조형시설 설치에는 균형을 잡아 수직, 수평이 유지되도록 시공하여야 한다.

3.9.3 외부작업

가. 필요한 경우 외부작업을 할 수 있다.

나. 외부작업 시 제작장소, 제작기간, 제작자 등을 담당원에게 미리 보고하고 승인을 받아야 한다.

다. 작품 반입 시 훼손이 없어야 하며, 담당원 및 작가가 입회하여 제작의 적정성을 확인하여야 한다.

3.10 경관조명시설

3.10.1 등 및 등주

가. 외부에 쓰이는 등은 직접 혹은 간접적 방법으로 방수해야 한다.

나. 등주와 지면의 접합부는 등주가 수직으로 직립해 있도록 견고히 부착되어야 한다.

다. 등주 및 등까지의 배관 및 전원연결공사는 전기공사 표준시방서, 건축전기설비공사 표준시방서 및 전기설비기술기준을 따른다.

3.10.2 안정기

주위온도는 40℃ 이하에서 사용하며 30℃까지의 주위온도에서도 견딜 수 있어야 하며 안정기를 단독으로 설치할 때는 금속제 함에 넣어서 사용한다.

3.10.3 시설 접합 구조

가. 갓은 램프를 바꾸어 끼우는데 편리한 것으로서 열 발산을 위한 통기와 빗물 빠짐이 원활한 구조이어야 한다.

나. 유리와 금속이 접합되는 부분은 유리의 파손과 비바람에 견디며 먼지가 들어가지 못하는 구조이어야 한다. 금속부는 녹막이 도장 또는 내식성 금속을, 박킹류는 내열성 재료를 사용한다.

3.10.4 기구의 설치

가. 벽부착형 또는 펜던트 등은 빗물이 스며들지 않도록 주의하여 설치하며, 상부로 향하는 등 기구 및 홀더에는 직경 3 mm 내외의 배수구멍을 만든다.

나. 안정기, 개폐기 등은 등주의 하부에 내장하거나 내화성을 확보하고 점검이 용이한 소정의 장소에 빗물이 침입하지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

다. 기구설치용 홀더, 암류 등은 아연도금 또는 녹막이 도장한 것을 나사류, 볼트 등으로 견고하게 설치하고, 자동점멸기는 일몰 후의 자동점등 기능에 지장이 없도록 개폐기 부근 옥외벽면의 손이 닿지 않는 안전하고 건조한 장소에 2.5 m 이상의 높이로 설치한다.

3.10.5 정원등, 공원등, 분수용 조명장치 및 기타의 방전등

형태, 구조, 색상, 밝기 등은 계약도서에 따르고, 일반사항은 조명등 시방규정을 적용한다.

3.11 합성수지시설 제작설치

3.11.1 절단, 성형

가. 이어 붙이는 것을 금한다.

나. 성형은 곡선면, 각도 등을 잘 맞추어야 한다.

다. 소량 제작시설에는 수작업으로 하고 대량제작시설에는 기계몰딩으로 한다.

라. 수작업 시 상단 몰드면은 미려하게 처리한다.

3.11.2 피막작업

가. 몰드면 위에 스프레이 건으로 겔코트를 0.35 mm 이상 도포 경화시킨다.

나. 적층작업 : 겔코트 경화면 위에 골고루 수지를 도포하고 규정의 유리섬유를 설계두께가 되도록 롤러로 탈포작업 후 경화시킨다.

다. 내식수지 코팅작업 : 비스페놀계 내식수지를 0.6 mm 이상 코팅작업 한다.

라. 불소수지 피막작업 : 겔코트면을 융으로 깨끗이 닦고 그 위에 불소수지 140 g/m² 이상이 되도록 도포한다.

3.11.3 접합작업

가. 타 재료와 접합에는 이 절의 목재시설 및 철재시설의 접합방법을 적용하고, 리벳 및 볼트너트접합으로 한다.

나. 부재의 접착에는 재료의 표면을 적절한 방법으로 처리하고, 피착재의 종류에 적합한 접착제를 선정하여야 한다. 높은 온도에서의 작업을 피하고 시공 후에 박리, 박탈 등이 없도록 주의하여 시공하여야 한다.

다. 용제형 접착제는 피착재의 침식이 없는 것을 선택하여 인화하지 않도록 주의하여 사용하고 작업장을 충분히 환기시켜야 한다.

20060 실내조경공사

1. 일반사항

1.1 제출물

1.1.1 현황관련 자료

수급인은 관련 설비 등을 확인한 뒤에 이를 고려하여 시공계획서를 작성하고, 공사착공 전에 담당원의 승인을 받아야 한다.

1.1.2 제품관련 자료

수급인은 관련 자재의 제품설명서, 품질확인서 등의 제품자료를 제출하여야 한다.

1.1.3 공사준공시

수급인은 공사를 준공할 때 관수, 시비, 병충해 방제, 전지 및 전정, 초화류의 교체 식재 및 보식 등을 포함하는 연간 유지관리지침서를 제출하여야 한다.

1.2 운반, 저장 및 취급

가. 식물재료의 운반은 덮개가 있는 차량으로 운반하여야 하며, 운반 중 식물의 유동을 방지하고 수형이 훼손 또는 변형되지 않도록 주의하여야 한다.

나. 각종 실내식물과 관련 자재는 현장도착 즉시 제 검사를 철저히 한 뒤에 반입하여 시공하여야 하며, 필요한 경우 원산지 검사를 행할 수 있다.

다. 공사와 관련한 자재는 적정한 장소를 선정하여 종류별로 구분하여 보관하여야 한다.

라. 실내식물의 취급에는 식물이 손상되지 않도록 조심스럽게 다루며, 떨어뜨리거나 쏟아 부어 뿌리분이 깨지지 않도록 한다.

1.3 공사 전 협의

실내조경공사와 관련하여 건축, 설비, 전기공사 책임자와 다음 사항을 협의하여야 한다.

가. 채광시설

나. 조명시설

다. 급수 및 배수시설

라. 냉난방 및 환기설비

마. 바닥방수 등

1.4 유지관리

실내식물을 위한 유지관리는 식물공급자가 제시하는 유지관리지침서에 따라 실시하며, 별도의 계약서류에 달리 명시된 바가 없는 경우, 수급인 또는 하수급인은 공사를 완료한 후 3월까지 주1회 이상 방문하여 관리하여야 한다.

2. 자 재

2.1 용기와 플랜터

2.1.1 용 기

수목식재용 용기는 나무, 점토, 플라스틱, 자기질, 세라믹, 돌, 금속 등으로 만든 용기 중 설계도서에 명시된 것을 사용하며, 제조업자의 제작시방에 적합하여야 하고, 외관상 결점이 없는 내구성 있는 제품이어야 한다.

2.1.2 플랜터

가. 플랜터 설치를 위한 구조물 자재는 이 장 조경구조물공사의 해당 자재기준에 적합하여야 한다.

나. 플랜터 안의 배수시설 자재는 이 장 배수공사의 해당 자재기준에 적합하여야 한다.

2.2 토 양

실내식물의 생장기반이 되는 토양은 식물의 종류와 여건에 적합하도록 인공토양에 산흙, 마사토, 모래, 부엽토, 바크, 피트모스, 펄라이트, 질석, 화산회토 등의 토양개량제를 계약도서에 명시된 종류와 비율로 혼합한 배합토 또는 혼합 포장되어 있는 인공배합토를 사용하며, 달리 정하지 않는 한 토양부피에 대한 젖은 무게비중이 0.6∼1.2 kg/cm³이며, 토양산도(pH) 범위는 5.5∼6.5가 되도록 한다.

2.2.1 배합토의 조정

가. 비중을 가볍게 하려면 유기물과 거친 입자의 토양개량제를 첨가한다.

나. 토양산도를 중화시키려면 질산칼슘비료나 석회를 첨가하고, 산성화시키려면 토양배합 물에 피트모스를 첨가한다.

다. 물의 침투와 이동이 불량하면 거친 무기물이나 유기물을 첨가하여 공극률을 증대시킨다.

라. 수분을 충분히 함유하지 못할 경우 유기물을 좀 더 많이 첨가시킨다.

마. 통기가 불량할 경우 거친 입자의 토양개량제를 첨가하며, 토양이 적절한 습윤 상태에서 작업하고, 식재작업을 할 때 지나치게 전압하지 않도록 한다.

2.3 식물재료

2.3.1 종 류

실내식물은 지피식물, 초화류, 관엽식물, 수생식물, 난과식물 이외에 일반 수목이나 잔디 및 인조식물재료 등이 있으며, 그 종류와 규격은 설계도서에 따른다.

2.3.2 품 질

가. 실내식물재료의 품질은 이 장(식재공사)의 품질규정을 따르며, 병충해에 감염되지 않은 견실한 식물로 줄기나 잎이 무성하고 잔뿌리 발생이 좋아야 한다.

나. 나무높이 3 m 이상의 큰 수목은 3월 이상, 그 이외의 식물재료는 3주 이상 빛의 강도를 줄여주는 등 환경순응기간을 거쳐야 한다.

2.3.3 규격표시

가.  식물재료의 규격은 성상에 따라 식물의 높이([eqn: H`]：m), 수관폭([eqn: W `]：m), 근원직경([eqn: R `]：cm), 수관수평길이([eqn: L `]：m)를 기준으로 하며, 지피류 및 초화류의 경우 화분폭(치)과 초장([eqn: H `]：m)을 다음과 같이 규격 표시한다.

나. 곧게 자라는 식물(벤자민고무나무, 아레카야자, 떡갈잎고무나무, 왕대, 맹종죽, 행운목, 쉐프렐라, 식나무, 관음죽, 켄차야자, 아랄리아, 크로톤, 팔손이나무, 드라세나, 스파티플룸, 백량금, 산세베리아, 후크시아 등)은 높이([eqn: H `])×수관폭([eqn: W`])으로 표기하며, 소철, 해고, 워싱턴야자 등은 높이([eqn: H])×수관폭([eqn: W`])×근원직경([eqn: R `])으로 표기한다.

다. 키가 낮은 지피류 및 초화류 중 식물 폭이 화분 폭보다 큰 아스플레니움, 꽃베고니아), 아디안텀, 페페로미아, 빌베르기아, 아프리카봉선화, 안스리움, 셀라기넬라 등과 식물 폭이 화분 폭보다 작은 속새, 히아신스, 크로커스 베르누스 등은 화분폭(치)×초장([eqn: H])으로 표기한다.

라. 아브틸론, 클레로덴드룸, 스킨답서스, 서양담쟁이, 호야, 마렌고아이비, 러브체인, 왕모람 등 덩굴성 식물은 높이([eqn: H])×수관수평길이([eqn: L `])로 표기한다.

마. 기타 특수한 수형을 채택하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

2.3.4 검사 및 측정

가. 식물재료 검사는 재배지(생산지) 검사와 반입 후 검사로 구분하는데, 재배지 검사에 합격해도 반입 시 훼손되거나 상태가 악화된 것은 반입 후 검사 시 합격품으로 처리 할 수 없다.

나. 규격의 측정검사는 수형 상태에 따라 수고, 수관폭, 근원직경, 수관길이 표시 규격의 ±10% 범위 내에서 합격품으로 처리할 수 있다.

다. 식물재료의 규격은 설계도서에 의거하되 별도규정이 없는 한 장식화분 등을 사용하여 화분이 노출되는 경우는 화분을 포함한 높이([eqn: H])로 하고, 그 외에 화분을 빼고 인공토양에 직접 식재하거나 화분을 노출시키지 않고 식재할 때에는 분을 뺀 식물높이로 측정한다.

2.4 첨경물

2.4.1 휴게시설

의자 등의 휴게시설은 이 시방서 옥외장치 및 시설공사의 해당 자재기준에 적합하여야 한다.

2.4.2 조각물

석탑, 석등, 장승 등 심미적 가치와 토속성 있는 재료로서 설계도서에 따른다.

2.4.3 조경석

조경석은 이 시방서 조경석공사의 자재기준에 따르거나 수경시설공사의 인조암 기준에 준하여 제작한 것으로 한다.

2.4.4 분수 및 벽천

분수 및 벽천과 관련한 자재는 이 시방서 수경시설공사의 해당 자재기준에 적합하여야 한다.

2.4.5 조명등

조명등은 이 시방서 조경시설공사의 해당 자재기준에 적합하여야 한다.

3. 시 공

3.1 플랜터

가. 플랜터 설치를 위한 구조물 공사는 이 시방서 조경구조물공사에 준한다.

나. 관수시설은 이 장 관수공사의 해당 항에 준한다.

다. 배수시설 등 플랜터 안의 식재기반조성은 이 장 식재공사의 인공지반 조성에 준하되, 배수구에는 가스흡입 방지를 위한 U자관을 설치하여야 한다.

3.2 실내식물 식재

3.2.1 식재시기

식재시기는 특별히 규정하지 않으나 실내에 먼지가 발생하거나 도장작업을 할 때에는 식재할 수 없다.

3.2.2 식재방법

실내식물의 식재방법은 이 시방서 식재공사에 준한다.

3.2.3 점경물 설치

점경물은 내부공간구조나 마감재료의 종류 등을 고려하여 중심목과 조화되고 시각적 초점이 되도록 설치하며, 설치방법은 시공업자의 지침에 따른다.

3.3 청 소

실내조경공사의 잔재는 현장 밖으로 반출하고, 주변을 깨끗이 청소하여야 한다.

20065 옥상 및 벽면녹화 공사

1. 일반사항

1.1 제출물

수급인은 다음의 자료 등을 담당원에게 제출하여야 하며, 특별히 명시하지 않은 경우의 제출 시기는 해당 공사 착공 전으로 한다.

1.1.1 현황자료

수급인은 시공전 현황관련자료, 검토의견서, 시공계획서, 시공도서 등을 담당원에게 제출하여야 한다.

1.1.2 시공후 자료

수급인은 시공 후 준공도면, 모니터링, 유지 및 관리 계획 등을 담당원에게 제출하여야 한다.

1.2 사전검사

2.1.1 현장여건

수급인은 공사 착수 전에 각종 공사관련서류(인·허가서류, 계약문서 등)의 검토와 현장조사를 통해 현장여건(주변건물, 교통상황, 지하매설물, 지상물건, 토질 등)과 기타 공사에 관련된 환경조건(소음, 진동, 하수, 수리, 수문 등)을 충분히 숙지하고 기록·보관하여야 한다.

2.1.2 정밀조사

필요한 경우 수급인은 담당원과 협의하여 정밀조사를 시행하고 그 결과를 담당원에게 보고한다. 이때 계약문서에 계상되지 않은 정밀조사비용은 발주자가 부담한다.

1.3 운반, 저장 및 취급

1.3.1 운반 시에는 수목에 손상을 주지 않도록 주의하여 운반하고 필요에 따라 새끼, 밧줄 등으로 감거나 건조방지를 위하여 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

1.3.2 운반 중 회복 불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종규격품으로 교체하고, 경미한 가지부러짐 등에 대해서는 담당원의 지시에 따라 조치한다.

1.3.3 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우 체인블록이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

1.3.4 운반 중 수목의 보호조치는 식재 공사편을 준용한다.

1.4 측 정

1.4.1 설계도서에 명시되지 않거나 의미가 모호한 사항 또는 상호 모순되거나 도면과 공사시방서 내용이 관련공사와 부합하지 않는 사항이나 기타 의문사항은 담당원과 협의하여 조치한다.

1.4.2 설계도서에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수로 한다.

1.4.3 공사수량의 단위 및 계산은 원칙적으로 정부시설공사 표준품셈의 수량계산규정에 따른다.

1.5 시공허용차

1.5.1 수목규격 허용치

수목규격의 허용치는 수종별로 -5%∼-10% 사이에서 여건에 따라 발주자가 정하는 바에 따른다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽 등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 담당원이 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

1.5.2 포트, 컨테이너 등의 용기 재배품인 경우에는 지정규격에서 10% 범위까지를 기준으로 채택할 수 있다.

2. 자 재

2.1 반입토양

2.1.1 사용되는 인공토양은 식물의 생육에 필요한 양분(K, Mg, Ca, Fe 등)이 함유되고, 무독·무취하며 pH 7.0 내외의 무기질이어야 하며 특히 시공 시 분진 발생이 없어야 한다.

2.1.2 수급자는 인공토양의 품질을 보증하는 품질시험성적서 및 일일제조능력, 제조설비 견본품 및 공정관리, 원자재 수입검사, 인공토의 품질을 보증하는 품질보증서류를 제출하여 담당원의 승인을 득하여야 한다.

2.1.3 시공에 사용되는 제품은 수목의 생육과 지지가 가능하도록 입도가 조성되고 보수성, 통기성이 우수하고 배수가 원활하여야 한다.

2.1.4 경량이며 보수성, 통기성, 배수성, 보비성을 지녀야 한다.

2.1.5 인공토양은 품질을 보증하는 품질보증서 및 기타 담당원이 요구하는 자료를 제출하여 승인을 받은 후 사용한다.

2.2 배수암거자재

2.2.1 배수판

사용되는 암거배수용 배수판은 인공토양포설 전에 배수를 목적으로 설치하는 자재로써 PP를 주재료로 하여 사출한 제품으로써 변형률 5% 이하의 제품이어야 한다.

2.2.2 단, 이와 동등의 배수능력을 가진 재료의 사용 시는 담당원의 승인을 받아 사용한다.

2.2.3 토양 유실을 방지하기 위하여 사용되는 토목섬유는 장섬유 부직포를 사용하여야 한다.

2.3 벽면녹화 식물재료

2.3.1 식물 선정

가. 식물의 선정은 동서남북의 설치장소를 고려하여 결정하며, 주변 고층 건물의 그늘도 중요한 요소로 작용하므로 광량을 사전에 측정하여 알맞은 식물을 선택하도록 한다.

나. 설치 지역의 기후뿐만 아니라 미기후도 고려하여 도심지 등 주위와 다른 온도 경향을 사전에 파악하여 식물을 선택한다.

다. 인공관수시설을 설치한다 하더라도 남향의 경우에는 얕은 식생 기반에 의해 쉽게 건조해지기 때문에 이를 고려하여 건조에 강한 식물을 선택하도록 한다.

2.4 벽면녹화용 재료

2.4.1 겨울철 등 식물의 휴면기 또는 식물 고사 시에는 벽면녹화용 소재 자체가 직접 노출될 수 있으므로 소재 자체가 자연스러운 외관을 가지도록 한다.

2.4.2 지속적인 수분노출과 외부 기후조건에도 부패하거나 변형되지 않아야 한다.

2.5 자재검사

2.5.1 품질, 규격

현장에 반입하는 재료의 규격, 품질 등이 도면, 시방과 일치하는지 여부에 대하여 담당원의 검사를 받아야 한다.

2.5.2 시험성적서

시방에 정한 바가 있거나 담당원의 지시가 있을 때에는 그 제품의 시험성적서를 제출하여야 한다.

3. 시 공

3.1 옥상조경 지반조성

3.1.1 시공일반

가. 경량 인공 토양만으로 식재 기반을 조성하는 경우 제품의 특성과 공법이 완벽히 준수되어야 하며 수목의 뿌리에 의한 건물의 손상을 예방하여야 한다.

나. 등반보조시설은 녹화하는 목적 등을 고려하여 당김줄형과 격자형으로 구분하여 사용하고 필요시 복합적으로 설치한다.

다. 당김줄형 등반보조시설은 벽면 상하에 앵커로 고정시킨 후 와이어로프를 수직 연결하고 턴버클로 조정하여 설치하여야 한다.

라. 격자형 등반보조시설은 벽면에 일정 간격으로 결합구를 박아 고정시킨 후 와이어로프 등을 연결하여 설치해야 한다.

마. 시공 전 건물의 구조안전 확인 실시 후 안전진단 결과에 따라 필요시 구조보강 계획 및 방수층 재시공 계획을 수립하며 담당원의 확인을 승인을 받아 시행한다.

1) 준비

① 플랜터 설치는 조경시설물편을 준용하며, 콘크리트 바닥면은 물론 측벽 토사층상단 100 mm까지 방수처리하며, 방수막이 파손되지 않도록 주의한다.

② 식재층 바닥은 설계도에 명시된 배수판이나 천연 또는 인공골재를 깔며, 그 위에 지반용 섬유를 깔아 토양유실이나 배수기능의 저하를 방지하여야 한다.

③ 지하슬래브 상부 등 비교적 넓은 면적의 식재지에는 배수층을 형성하고, 유공관을 병행하여 설치하며, 배수점검구를 두도록 한다.

④ 옥상 등에서 시공 시 주변의 안정성을 확인하고 인공토양 조성 시 충분한 관수를 위하여 관수시설을 준비한다. 인력관수의 경우 급수전을 설치하고, 자동관수설비를 갖출 경우 관수 및 배수공사에 준하여 시공한다.

⑤ 공사착수 전 인공지반에 기조성된 플랜트 박스 내부의 굴곡과 요철상태를 정리하고 이물질을 완전히 제거하여 배수구의 막힘을 미리 방지한다.

2) 방수

① 방수에 사용되는 각종 재료 및 시공방법은 반드시 담당원과 사전 협의하여 시행한다.

② 각종 관부설 또는 시설물공사 등으로 인하여 방수막이 파괴되지 않도록 주의하며, 특히 식재지에서는 방수막 파괴를 방지하기 위한 보호층을 설치한다.

③ 콘크리트의 팽창, 수축 및 기타요인 등으로 인한 균열로 방수막이 훼손되지 않도록 조치한다.

④ 콘크리트 슬래브의 바닥면은 완전 방수처리하고, 토사로 묻히는 측벽은 토사층 높이까지의 벽면을 방수처리한다.

3) 배수

① 식재층의 바닥면은 2% 이상의 기울기를 갖도록 한다.

② 배수층은 배수판과 천연골재 중 설계도면에 명기된 것을 사용한다.

③ 인공지반 상부에 배수판 설치 시에는 각각의 배수판 틈이 벌어지지 않도록 설치한 후 PLANT BOX에 설치된 배수구에 접속하고, 자갈층 조성 시는 THK100-200 내외로 배수층을 형성한다.

④ 토양의 유실 방지 및 배수구의 막힘을 방지하기 위하여 장섬유부를 이용하여 기 설치된 플라스틱 배수판 및 인공지반 전체에 부설하며 겹쳐지는 부분은 일정부분 겹쳐지도록 시공하고 특히 PLANT BOX의 내측 벽면은 벽면 높이의 절반 이상의 높이까지 치켜올려 시공하여 토양 유실을 완전히 차단한다.

3.2 옥상조경 수목식재

3.2.1 인공토채우기

가. 배수층은 설계도면에 명기된 것을 사용한다.

나. 설치된 부직포 위에 배수용 인공토양을 포설하며 동시에 충분히 관수를 실시하고 도면에 명기된 높이(50∼100 mm) 까지 부설한 후 면고르기를 실시한다. 면고르기 작업 후 인공토양을 포설하되 살수와 다짐을 동시에 실시하면서 도면에 명기된 토심을 확보한다.

다. 인공토양포설이 완료된 후 토양의 다짐 상태를 점검한다.

3.2.2 수목식재

가. 구덩이의 깊이를 뿌리분 높이의 1.1배로 파고 구덩이의 폭은 뿌리분의 1.3배 이상으로 파되 토심이 뿌리분 높이 1.1배보다 낮을 때는 인공토양의 배수용이 포설된 깊이까지 파며 노출된 뿌리분은 마운딩 처리한다.

나. 뿌리분이 깨지지 않도록 구덩이에 넣어서 수형을 살펴 나무의 방향을 조정한다.

다. 인공토양을 뿌리와 밀착되게 채운 다음 잘 밟아 다진 후 관수를 실시한다.

라. 지면을 잘고르고 다짐한 뒤 주변을 정리한다.

마. 수목 이후 노출된 표면은 바크, 잔디 등 토양비산을 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다.

3.2.3 경계석 등 설치

가. 인공토 원지반을 소형 콤팩터(1.0 TON 이상)로 3회 이상 다짐을 실시한다.

나. 사용되는 경계석의 규격을 고려하여 기초 터파기를 실시한다.

다. 경계석의 부동침하 및 온도변화에 의한 지반의 수축팽창을 방지하기 위하여 터파기후 기초콘크리트를 80 mm 이상 타설한다.

라. 기초콘크리트 타설 후 습윤상태에서 5일간 양생시킨 다음 표면을 청소한다.

마. 기초콘크리트 표면을 청소하고 비빔모르타르를 고르게 깐 후 경계석 밑에 나무쐐기 등의 굄을 가설하면서 줄눈이 맞게 깔아나간다.

바. 깔기는 고저가 없고 턱지지 않게 설치한다. 나무쐐기 등은 모르타르가 충전되고 경계석이 움직이지 않게 고정된 다음 반드시 빼어내고 그 자리는 모르타르로 메운다.

사. 시공 후 최소한 3일간 작업하중을 받지 않도록 주의한다.

3.2.4 복구 및 청소

가. 수급인은 토사의 운반이나 취급 등으로 인하여 훼손 또는 오손된 부분에 대하여 원상태로 복구하여야 한다.

나. 오염된 포장구역에 대하여는 청소하여야 한다.

3.3 벽면녹화 시공일반

3.3.1 설계도면에 표기된 위치에 따라 수직 및 수평을 정확히 확인하여 시공한다.

3.3.2 벽면 천공 시에는 현장 벽면의 두께 등을 다시 한 번 확인하여 방수에 문제가 없도록 한다.

3.3.3 방수에 사용되는 각종 재료 및 시공방법은 반드시 담당원과 사전 협의하여 시행한다.

3.3.4 경량 인공 토양만으로 식재 기반을 조성하는 경우 제품의 특성과 공법이 완벽히 준수되어야 하며 수목의 뿌리에 의한 건물의 손상을 예방하여야 한다.

3.3.5 토양이 바람에 날리지 않도록 멀칭용 토양을 적당히 포설한다.

3.4 유지관리

3.4.1 식재 기반 토양의 부피 저하 시에는 식물이 건조 및 냉해를 입을 가능성이 높기 때문에 부족한 부분의 토양을 채워준다.

3.4.2 일반적으로 기존 지반에 식물을 심어 벽면녹화를 실시한 경우에는 특별한 관리가 필요 없으나, 인공지반이나 지붕 유무에 따라 빗물의 유입량 등이 달라지는 곳에서는 주기적인 관찰을 통해 관수관리를 해주어야 한다.

3.4.3 실내의 경우 급수 및 배수장치가 필수적이며, 실외의 경우라 하더라도 우기와 건기가 뚜렷한 우리나라 기후의 여건상 급수 및 배수장치가 필히 반영되어야 한다.

3.4.4 설치장소에 따라 빗물이 쉽게 들어오지 않고 생육기반이 충분하지 않은 경우에는 자동관수시설 등의 설치를 고려한다.

3.4.5 식물이 식재되지 않은 곳이 불필요하게 항상 축축하게 젖어 있을 경우에는 세균번식 등으로 공기의 질을 오염시킬 수 있으므로, 관수설비는 필요 이상의 수분을 빨리 배출할 수 있도록 제어되어야 한다.

3.4.6 비료 사용 시에는 삼대원소 및 미량원소가 적절히 배합된 복합비료를 사용하여 시비한다.

3.4.7 과습이 우려되는 장마기에는 비료가 오히려 식물을 약화시킬 수 있으므로 시비를 자제한다.

3.4.8 도로에 인접한 벽면에 설치할 경우에는 겨울철 염화칼슘에 의한 피해가 발생할 수 있으므로 주의하도록 한다.

3.4.9 식물생육상황에 따라 2∼3년 주기로 덩굴식물의 줄기에 대한 전정관리가 요구된다.

20070 생태복원공사

1. 일반사항

1.1 일반조건

1.1.1 복원방향

건축물 주변의 소생태계의 생물서식공간은 가능한 한 본래 자연생태계 구조의 특성에 가깝도록 조성하여야 하고 기존의 향토식생이나 토석류 등을 적극 활용하는 복원방식을 채택하는 등 현장여건에 맞는 적합한 생태복원 방안을 채택하여 획일적인 인조경관이 발생되지 않도록 시공해야 한다.

1.1.2 서식조건

소생물이 서식하기에 좋은 생태조건을 갖추어 자연환경과 같은 분위기가 조성되도록 하며, 자연지역과 점적인 생물서식공간과의 연결체계를 구축하여 전체적으로 체계화되는 비오톱을 조성해야 한다.

1.1.3 시설조건

소생태계 야생동물이 인공환경에 거부감을 갖지 않도록 시각적 차폐, 공간 규모와 시설의 폭 및 구조 등을 종합적으로 고려하여 적합한 서식공간이 조성되도록 하여야 한다.

1.2 제출물

1.2.1 자연현황자료

공사시행 전에 현장여건을 검토하고 실측자료, 전경사진 등의 현황자료와 이전 목적의 생태구조를 조사·분석한 보고서 및 분석도면, 그리고 복원예정지역의 지형, 식생, 토양 등 제반 자연현황을 조사·분석한 자료를 제출한다.

1.2.2 공사 중 현장에 반출되는 폐기물이나 쓰레기는 사전에 처리계획서를 제출하고 반입되는 종자, 묘목, 수목, 토양은 반입계획서를 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

1.2.3 건축물공사 주변의 오염지 등에서 발생하는 중금속 및 폐기물의 성분과 양을 사전에 조사 분석하여 처리방안을 수립하고 계획서를 제출한다.

1.2.4 공사종료 시 공사기간 및 일정, 식재현황도와 목록, 유지관리기록 등 각종 자료를 담당원의 승인을 받아 제출한다.

1.3 기존식생 보호

1.3.1 대상지 주변의 기존 식생은 보호하는 것을 원칙으로 하며, 공사 중 손상을 입히지 않도록 한다.

1.3.2 기존 수목 주변을 흙쌓기할 때에는 뿌리가 기존의 높이 이상으로 묻히지 않도록 하고, 땅깎기할 때에는 수관폭 이내의 지반을 땅깍기하지 않도록 한다.

1.3.3 땅깍기·흙쌓기 등 정지작업으로 인하여 지하수위의 변동이나 지표수의 흐름에 변화가 발생할 경우에는 수분의 이동에 대한 면밀한 조사분석을 통하여 식물생육에 지장이 없도록 대책을 강구한다.

2. 자 재

2.1 재료일반

2.1.1 재료는 자연재료로 사용하되, 특별한 경우 치수 목적 등으로 인공재료(콘크리트, 블록 등)를 사용할 수 있으나, 생태복원을 전제로 제작된 재료이어야 하고 담당원의 승인을 얻어 사용해야 한다.

2.1.2 자연석 재료의 종류와 품질은 한국산업표준, 설계도면에 따른다.

2.1.3 진흙은 국제토양학회 분류에 의한 입경조성기준을 적용하고, 점성이 강해야 하며 내부에 유기물이 적은 것을 사용한다.

2.1.4 섶단은 버드나무가지, 갯버들류 등 삽목이 가능하고 맹아력이 있는 수종의 가지를 사용한다.

2.1.5 섶단에 쓰이는 나뭇가지는 생가지를 사용하여야 하며, 갈대천연야자섬유롤은 갈대를 견고하게 부착시키거나, 천연야자섬유롤 사이나 주변에 갈대를 식재할 수 있는 것이어야 한다.

2.1.6 지지항목과 섶단을 결박하기 위한 결속재료는 마닐라로프([eqn: phi]12 mm) 또는 천연야자섬유 및 결속선(#10)을 사용한다.

2.1.7 돌망태는 철망 등으로 단단히 결속된 일반제품을 사용하며, 자연석은 산석 또는 강석 등을 사용한다.

2.1.8 갯버들은 잎이 피기 전에는 삽순을 그대로 쓸 수 있으나, 잎이 핀 후에는 미리 삽목한 묘목을 사용한다.

2.1.9 갈대 뗏장은 가로 30 cm, 세로 30 cm인 것과 1 m²인 것을 기준으로 하되, 갈대단용 뗏장을 사용하거나 또는 뗏장의 조기녹화와 숙성을 위하여 지피류와 혼파하여 재배한 혼용 뗏장을 사용한다.

2.1.10 수생식물은 생장이 양호한 상태의 성묘를 사용한다.

2.2 자재검사

2.2.1 현장에 반입하는 재료의 규격, 품질 등이 도면, 시방과 일치하는지 여부에 대하여 담당원의 검사를 받아야 한다.

2.1.2 시방에 정한바가 있거나 담당원의 지시가 있을 때에는 그 제품의 시험성적서를 제출하여야 한다.

3. 시 공

3.1 시공일반

3.1.1 복원 식생은 해당 지역의 식생조사를 거쳐 대상지 내 식물개체와 같은 종의 개체를 활용한다.

3.1.2 생물서식공간에 자연관찰·학습의 기능을 수용할 수 있도록 포함시키는 경우에는 생태통로를 관찰 및 탐방로, 학습장 등과 연계시키고, 정보안내기능 시설과 휴게공간 등 생물서식공간을 보호하는 범위 안에서 최소한의 시설물을 도입한다.

3.1.3 야생동물의 서식과 관련하여 둥지, 보금자리, 은신처로서의 틈새, 웅덩이, 관목숲, 덤불 등의 조성 시에는 인위적 형태나 인공적 마감재는 배제시킨다.

3.1.4 생태연못 등의 수생 비오톱 조성에는 오염되지 않은 물을 수원으로 확보해야 하며, 곤충류와 어류가 공존할 수 있도록 수심의 변화를 주어 성충을 유인할 수 있는 서식공간을 조성하고 곤충과 어류의 산란조건을 구비하여야 한다.

3.1.5 수생 비오톱의 오염을 방지하기 위하여 식생정화대를 설치하고 정화 효과가 탁월한 수생식물을 선정하여야 한다.

3.2 인공생태연못

3.2.1 시공일반

가. 연못 수질의 보전과 수원 확보를 위해 수리계획을 수립하고 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 시공 전후의 우·배수체계의 변화 및 공사중 폭우 시의 대책에 대한 계획서를 제출해야 한다.

다. 기존 수로의 변경이 필요한 경우, 수로변경으로 인하여 다른 부지에 부정적인 영향을 주지 않도록 주변지형을 정지해야 한다.

라. 지하수위가 높거나 지하수가 유출되는 곳에서는 용출수를 처리하기 위한 강제배수시설을 설치해야 한다.

3.2.2 터파기 및 기초

가. 터파기로 인하여 발생된 토사처리를 위한 사전계획을 수립해야 한다.

나. 침하 우려가 있는 지반은 기초설치 전에 구조적으로 안정되게 처리해야 한다.

3.2.3 진흙바닥처리

가. 진흙은 입자가 미세하고 점성이 강한 것을 일정한 두께로 포설해야 한다.

나. 물의 투수 및 유출을 방지하기 위해 방수재를 포설할 경우에는 재료의 손상이 없도록 주의해야 하고, 물의 누수를 방지하기 위해 이중으로 접합해야 한다.

다. 자갈을 바닥에 깔 때에는 방수재의 손상을 방지하기 위해 사전에 보호용 재료를 도포해야 하고, 특히 접합 부위가 분리되지 않도록 한다.

라. 바닥면과 호안의 연결 부분 등의 연결 부위에는 물의 누수를 막기 위하여 진흙 등을 겹쳐 축조해야 한다.

3.2.4 호안축조

가. 호안축조 시 물로 인한 축조면의 구조적인 약화를 방지하기 위한 지반다짐 및 구조체 보완시설을 해야 한다.

나. 호안축조 시 자연석 쌓기를 할 때에는 이 시방서의 해당 항을 따르고, 호안축조 시 사용되는 목재 등 물에 약한 재료는 방수 및 방부처리를 하여 사용해야 한다.

다. 주변에서 유입되는 물이 자연스럽게 유입되고, 잉여수는 집수정으로 넘치도록 구배를 만든다.

라. 급배수는 상수도공사 표준시방서와 하수도공사 표준시방서의 해당 항에 따른다.

마. 배수구의 높이는 목표기준면의 높이와 같아야 한다.

3.2.5 식생 및 어류

가. 연못내 도입되는 어류와 식생은 설계도서에 의하되 현지 생태조사와 다를 경우, 조사결과를 제시하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 식생 및 어류의 선정 시 상호간의 생태적인 균형을 고려해야 하며, 외래수종 등은 기존 생태계의 미치는 영향을 분석한 후 도입한다.

다. 수변, 추수, 수중식물 등의 생육을 위해 필요한 경우에는 환경생태용 방수 및 호안처리, 토심 확보 등의 조치를 시행해야 한다.

라. 연못내 식생의 과다한 번식을 제어하기 위해 필요시 수중분 식재를 한다.

3.3 훼손지복구

3.3.1 시공일반

가. 훼손으로 인한 식생복원이 필요한 지역을 대상으로 한다.

나. 훼손지 주변의 현존식생조사를 토대로 추정되는 원식생을 복원한다.

다. 야생풀포기 심기를 위주로 하고 파종공법을 병행한다.

라. 단계별 식생복원사업을 시행하되, 1단계 사업에서는 초본류, 2단계 사업에서는 목본류를 식재한다.

마. 미기후를 고려한다.

바. 지형안정, 미기후조절기능을 하는 기존암석, 돌 등은 그 자리에 놓은 채 기반안정, 표토깔기를 실시한다.

사. 강한 바람맞이 지역이나 바람통로지역에는 방풍울타리를 설치하여 초기 식생활착을 위한 미기후를 조성한다.

3.3.2 야생초본류 뗏장심기

가. 뗏장용 식물은 훼손지 주위에서 야생하는 초본류를 중심으로 선정하며 일부 관목류도 포함한다.

나. 현지에서 채종한 식물의 종자를 파종하여 뗏장을 만들되 한 가지 식물만을 이용한 단용 뗏장과 여러 식물을 혼파한 혼용 뗏장으로 구분하여 사용한다.

다. 뗏장의 조기성숙을 위하여 잔디류를 혼파하여 뗏장을 생산한다.

라. 시공 후 뗏장이 활착할 때까지 1일 1회 충분히 관수하여야 한다.

3.4 생태수변부 처리

3.4.1 기단부처리공사

가. 나무말뚝박기

① 나무말뚝은 설계도면에 명기된 규격의 원목을 사용하며, 원목은 목재가 치밀하여 쉽게 부패되지 않는 것이어야 한다.

② 말뚝의 끝 부분은 뾰족하게 하고 머리부분은 박고 난 후에 미관적으로 다듬기를 시행하여야 한다.

③ 말뚝은 기준 말뚝을 10개당 1개씩 다른 말뚝보다 200∼300 mm 가량 높게 박은 후 나머지 말뚝을 박는다.

④ 말뚝박기는 기존의 호안선을 따라 자연적인 곡선을 이룰 수 있게 박아야 한다.

⑤ 말뚝은 비탈면의 토사유실을 방지하는 기능을 하여야 하므로 말뚝과 말뚝 사이의 틈새가 생기지 않도록 촘촘히 박아야 한다.

나. 섶단 2단누이기

① 각종 버드나무가지([eqn: phi]5 mm)를 길이 2,000 mm, 직경 100∼300 mm가 되게 묶은 다음, 호안선과 평행하게 누인다.

② 섶단누이기를 할 때는 지면을 약간 굴취하여 섶단이 완전히 지면에 밀착하도록 하여야 한다.

③ 섶단을 고정시키기 위해 나무말뚝을 박는다.

다. 자연석받침

① 자연석은 300×400×500 mm 정도의 크기를 사용한다.

② 자연석쌓기를 할 때는 유수에 의한 유실이 일어나지 않도록 서로 맞물려 쌓아야 한다.

라. 돌망태놓기

① 돌망태공법은 비교적 유속이 빠르고 세굴이 우려되는 지역에 실시한다.

② 돌망태채움 재료는 망태를 빠져나가지 않을 정도 크기의 돌을 이용한다.

3.4.2 비탈바닥공사

가. 욋가지덮기

① 욋가지는 버드나무류의 어린 가지를 사용하되 [eqn: phi]5 mm 정도의 굵기가 적당하고, 추후 싹을 틔울 수 있는 건강한 가지이어야 한다.

② 비탈면을 촘촘하게 피복하여야 하며 가능한 한 버드나무가지가 지면에 밀착될 수 있도록 덮는다.

③ 욋가지의 길이는 1,200 mm 정도가 적당하며 상단과 하단이 약 300 mm 정도 겹치도록 피복하여야 한다. 욋가지의 피복 후에는 원목([eqn: phi]45 mm, 버드나무류)으로 상·중·하 3열로 길게 늘어뜨린 다음, 나무말뚝을 박고 철선으로 말뚝과 원목을 서로 견고하게 엮어 고정한다.

④ 욋가지는 최소한 원목에 의해 양 끝이 고정될 수 있을 정도의 긴 가지를 상용하여야 한다.

나. 녹색마대류

① 자연섬유 또는 동등류의 재질로 된 끈부착 마대에 적당량의 흙을 채운 후 갈대 뗏장을 상단으로 향하도록 심는다.

② 마대자루의 입구는 견고히 묶어 내용물이 흘러나오지 않도록 한다.

③ 완성된 마대자루는 전후면으로 맞물려 쌓은 후 마대의 고정을 위해 말뚝을 박는다.